아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	(주)한국가스기술공사사장(에너지사업개발처장)
(경유)
제목	제2진관 및 송파 수소버스충전소 액화 전환 및 조치사항 안내

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 제2진관 및 송파 수소버스충전소를 액화로 전환하여 추진하기로 결정한바, 향후 조치사항에 대해 아래와 같이 안내드리니, 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 사업 변경 내역

가. 강서 및 제2진관 버스 수소충전소 구축사업

1) 내  용 : 제2진관 수소충전소 기체에서 액화로 전환 결정

※ 강서수소충전소 구축 완료('22.6월)

2) 사업비 : 제2진관 수소충전소 기체 60억 → 액화 100억 (증40억)

나. 송파공영차고지 수소버스충전소 구축사업

1) 내  용 : 기체에서 액화로 전환 결정

2) 사업비 : 기체 60억 → 액화 100억 (증40억)

□ 조치사항 안내

가. 제2진관 버스 수소충전소 (공영차고지 건설사업 포함)

업무협약서 및 사업 시행계획서 변경 제출	→	업무협약서 변경 협의 및 사업 시행계획서 변경 승인	→	액화 추가 사업비 교부 신청	→	액화 추가 사업비 교부
한국가스기술공사		서울시		한국가스기술공사		서울시

※ 공영차고지 건설사업의 업무협약 기간은 수소충전소 업무협약 기간과 동일

※ 액화 추가 사업비 계좌는 기존 사업비 계좌와 별도 개설

나. 송파공영차고지 수소버스충전소

- 액화 추가 사업비 교부 신청

※ 당초 업무협약서 및 사업 시행계획서 변경 불필요

※ 액화 추가 사업비 계좌는 기존 사업비 계좌와 별도 개설.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김광원		버스차고지팀장	박춘종		버스정책과장	01/03
강인철
협조자
시행	버스정책과-191	(	2024. 1. 3.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 7층 버스정책과 (태평로1가)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-9755	/전송	02-2133-1049	/	kukuku132@seoul.go.kr	/	대시민공개