문서번호	물재생시설과-304
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장
설상운	이경주	01/05
		김윤수

물재생센터 기반시설 실태조사

- 용역기간 변경 검토보고 -

2024. 1.

물순환안전국

(물재생시설과)

2024년 물재생센터 기반시설 실태조사

- 용역기간 변경검토 보고 -

「제2차 기반시설 관리계획」수립을 위하여 추진 중인 물재생센터 기반시설 실태조사 용역과 관련하여 용역기간 변경을 검토보고하고자 함.

1		추진근거

□ 관련법규

ㅇ 지속가능한 기반시설 관리 기본법 제9조(기반시설 관리계획)

ㅇ 서울특별시 지속가능한 기반시설 관리 기본조례 제7조(기반시설 관리계획), 제12조(기반시설 실태조사)

□ 추진근거

ㅇ 2024년 물재생센터 기반시설 실태조사 용역 추진계획(물재생시설과-13157,‵23.9.26.)

2		용역개요

□ 대상시설

************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 용역 발주 계획

ㅇ 용 역 명 : 2024년 물재생센터 기반시설 실태조사 용역

ㅇ 용역기간 : ************

ㅇ 소요예산 : *********

ㅇ 예산과목 : *********************************************************

ㅇ 입찰방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

3		변경내용

□ 용역기간 변경 : 기존 ***********

ㅇ 1차 기반시설 관리계획 추진 시 시설물 유지관리현황이 조사 되었으며,

ㅇ 용역 사전절차시 용역기간을 *************

**********************************************

*******************************

ㅇ 따라서, 기 기반시설이 조사자료가 있고, 용역 사전절차***********************결과****************************************************************

4		향후계획

□ 2024. 1. : 입찰공고의뢰(→재무과)

□ 2024. 3. ~ 2025. 1. : 용역 추진

□ 2025. 2. : 실태조사 용역 결과물 제출(→재난안전정책과)