문서번호	서울숲관리사무소-259
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
운영팀장		서울숲관리사무소장	동부공원여가센터소장
양혜정		김방용	01/09
			김인숙
협조
	시설과장		하종식

2024년 서울숲 곤충식물원 정비계획

2024. 1.

동부공원여가센터

(서울숲관리사무소)

2024년 서울숲 곤충식물원 정비계획

서울숲 곤충식물원(온실) 내 전시시설, 노후데크 포장, 옥상 누수, 화단 정비 등 노후 시설물을 정비하고, 식물 수고조정과 테마화단조성으로 안전하고 쾌적한 공원환경 제공

□ 추진배경

ㅇ ****************************************************

****************************************************************************

*************************************

*****************************************************************************************

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 성동구 뚝섬로 273 (서울숲 곤충식물원, 야외나비정원)

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 8.

ㅇ 사 업 비 : 500백만원

ㅇ 사업내용

******************

********************************

******************************************

***************

*****************************************************************************

□ 추진계획

ㅇ 2024. 1.	: 사업추진계획 수립

ㅇ 2024. 1~3.	: 타당성심사, 실시설계용역 및 계약심사

ㅇ 2024. 4.	: 공사발주 및 계약

ㅇ 2024. 5.	: 착수보고 및 도급사 공사 준비 등

ㅇ 2024. 6.~8.	: 공사 실착공 및 준공

※ 봄철 성수기를 피해, 공원이용객이 다소 줄어드는 6~8월 공사시행

□ 행정사항

ㅇ 사업계획수립 후 정비요청(서울숲관리사무소→시설과) : 2024.1.

ㅇ 곤충식물원 정비추진(시설과)	: 2024.1.~8.

- 타당성심사, 설계용역 및 계약심사, 공사 및 준공 등

□ 정비요청사진

*****************************

************

*******************************

*****************************

****************************************************

붙 임 : 1. 곤충식물원 정기안전점검결과 1부.

2. 사업대상지 위치도 1부.  끝.