문서번호	도시철도설비부-331
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
임형민		김이곤	01/09
			성호준
협 조

진접선[4호선연장] 차량기지 건설사업 시스템분야 책임감리용역

계약변경(총차1회, 1차1회) 요청 검토보고

2024. 1.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

진접선[4호선연장] 차량기지 건설사업 시스템분야 책임감리용역

계약변경(총차1회, 1차1회) 요청 검토보고

진접선 차량기지 시스템분야 공사계약상황을 고려 용역의 감리원투입시기를 조정하면서, 계약기간 변경을 요청한 건에 대해 검토보고 함.

관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 제6절(용역과업내용변경 등)

○ 입찰안내서_3.특별과업지시서_1.2_가_(1) (실착수시점 및 상주감리원 투입시기 조정)

○ 진접선(4호선연장) 차량기지 시스템분야 책임감리용역 계약변경 승인요청 (진접시스템감 제24-003호, '24.1.9.)

용역개요

○ 용 역 명 : 진접선[4호선연장] 차량기지 건설사업 시스템분야 책임감리용역

**********************************************

***************************************************

***********************************************

************************************

*************************************

○ 용역범위 : 차량기지신설 197,400㎡, 인입선 4.9km, 창동기지 철거 1식 등             시스템분야(송변전, 전차선, 신호, 통신)에 대한 전면책임감리

계약변경 사유

○ 진접선차량기지 시스템분야 공사계약 지연에 따라, 용역 실착수일 및 감리원투입계획 조정

********************************

******************************

***************************

**************************************

구 분	계약금액 변경 (단위:원)			계약기간 변경	비 고
	당 초	변 경	증액
총차	**************	**************	*	****************************	착수기간 변경
				****************************
1차	***********	***********	*	***************************	착수기간 변경 및 계약기간 연장
				****************************

계약변경 내역

○ 변경내용

- (총차) 착수일 3주 연기

- (1 차) 착수일 3주 연기 및 계약기간 47일 연장

○ 세부변경내역

- (총차) 변동없음

- (1 차)

공 종	단위	당초		변경		증감
		수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
1. 직접인건비	인ㆍ월	*****	**********	*****	**********	*****	**********
1.1 상주감리원	인ㆍ월	*****	***********	*****	***********	*****	**********
감리단장	인ㆍ월	****	***********	****	***********	****	*********
1.1.1 상주감리원(전기)	인ㆍ월	****	***********	****	***********	*****	***********
1.1.1.1 송변전	인ㆍ월	****	***********	****	**********	*****	***********
1.1.1.2 전차선	인ㆍ월	****	***********	****	**********	*****	**********
1.1.2 상주감리원(통신)	인ㆍ월	****	***********	****	***********	****	*********
1.1.3 상주감리원(신호)	인ㆍ월	****	***********	****	***********	****	*********
1.2 비상주감리원	인ㆍ월	****	**********	****	**********	****	*********
1.2.1 비상주감리원(전기)	인ㆍ월	****	**********	****	**********	****	*******
1.2.1.1 송변전	인ㆍ월	****	**********	****	**********	****	*******
1.2.1.2 전차선	인ㆍ월	****	**********	****	**********	****	*******
1.2.2 비상주감리원(통신)	인ㆍ월	****	************	****	**********	****	*******
1.2.3 비상주감리원(신호)	인ㆍ월	****	********	****	********	****	*******
2. 제 경 비	%	***	**********	***	***********	*	**********
3. 기 술 료	%	**	**********	**	***********	*	********
4. 직 접 경 비			**********		***********	*	*********
4.1 현지차량비	대ㆍ월	*	*********	***	**********	***	*********
4.2 현지운영경비(사무원)	인ㆍ월	*	**********	***	***********	***	*********
4.3 보고서 등 인쇄비			*		**	*	*
최종보고서	식	*	*	**	**	*	*
유지관리지침서	식	*	*	*	**	*	*
4.4 동영상 촬영 편집비	식	*	*********	*	**	*	**********
4.5 안전관리비	식	*	*******	*	********	*	*******
공급가액			***********		***********	*	**********
손해보험료			**********		**********	*	*********
소계			***********		***********	*	**********
부가가치세			**********		**********	*	********
사무실임대료	월	*	*********	***	*********	***	*********
총 용역비			***********		***********	*	*

검토의견 및 조치계획

○ 검토의견 : 현장상황을 고려한 기간조정은 관련 법령 및 계약조건에 부합한 것으로 판단되므로, 계약변경하여 예산집행효율성 제고와 원활한 공정관리 만전을 기하고자 함

○ 조치계획 : 계약부서(시 재무과)에 변경계약 요청

붙임 1. (감리단) 계약변경 요청 공문  1부.

2. 감리원배치계획서(총차, 1차) 각 1부.

3. 변경내역서(총차, 1차) 각 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.