문서번호	조경과-438
결재일자	2024. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
한지연		박철수	01/10
			유혜미
협조

2024년 녹색자금 지원사업(나눔숲) 추진계획

2024. 1.

푸른도시여가국

(조 경 과)

2024년 녹색자금 지원사업(나눔숲) 추진계획

복지시설 이용자의 생활환경 개선 및 삶의 질 향상을 위해 산림복지진흥원으로부터 녹색자금을 지원받아 실외 나눔숲을 조성하여 차별 없는 녹색 복지 서비스를 제공하고자 함

1		추진근거 및 추진방향

□ 추진근거

ㅇ「24년도 녹색인프라 확충사업계획서 검토결과 알림」산림복지진흥원 지역상생협력팀-2492(2023.11.24.)호

ㅇ「녹색자금 관리규정」(2022.1.4.) 및「녹색자금사업 사업비 편성 및 집행지침」(2023.4.24.)

<녹색자금 지원사업>

복권기금법 규정에 따른 복권수입금 등을 주 재원으로 하여 한국산림복지진흥원(산림청 유관기관)에서 취약지역 녹색인프라 확충(나눔숲, 나눔길 등)을 지원하는 사업

□ 추진방향

ㅇ 수목식재 및 산책로 조성을 통한 복지시설 내 생활권 동네 정원 조성

ㅇ 시설이용 취약계층의 신체 건강 증진⸱정서 안정 기여 등 삶의 질 향상

ㅇ 유휴부지 내 실외 숲 정원 조성으로 경관 개선 및 시각적 즐거움 제공

2		추진실적('07.~'23.)

ㅇ 추진실적 : **********************************

ㅇ 사 업 비 : *********

구 분	계	~2019	2020	2021	2022	2023	비고
개 소 수	**	**	*	***	*	*	********** *********
나눔숲(㎡)	******	******	*****	*	*	*	******
나눔길(m)	*****	*****	*	*	*****	*****	**********
사업비(백만원)	****** **********	***** ********	*** ******	*	***** ********	***** ********

	2023년도 이월사업 추진계획
■ 2023년 녹색자금 지원사업(나눔길) ‣ 대 상 지 : ********************************** ‣ 사업기간 : ’23. 8. 16.~’24. 3. 12. ‣ 사업내용 : 산림 내 무장애 나눔길 및 보행약자 편의시설 조성 ‣ 사 업 비 : ****************************************************** ‣ 이월사유 : *********************************** ‣ 향후계획 : ’24. 3월 한 공사 준공 및 사업비 정산

3		'24년 추진계획

□ 사업개요

ㅇ 대 상 지 : *************************

ㅇ  사업기간 : 2024. 1. ～ 6.

ㅇ  사업내용 : 사회복지시설 유휴부지 내 실외 정원(나눔숲) 조성

ㅇ  사 업 비 : **********

- 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 시민참여녹지조성, 녹색자금지원사업(나눔숲·나눔길 조성), 시설비·사무관리비

(규모:㎡, 예산: 백만원)

연번	구분	시설명	위치	규모	사업비	비고
계		총2개소		*******	***
1	나눔숲	***********	***********	*****	**	** ****
2		***********	**************	*****	***

************************************

□ 추진일정(안)

ㅇ  ’24. 1. ~ 2.   : 사업계획 수립 및 사업비 교부

ㅇ  ’24. 3. ~ 4.   : 실시설계 및 계약심사

ㅇ  ’24. 5. ~ 6.   : 공사시행 및 사업완료

ㅇ  ’24. 7. ~ 11.  : 사업실적 평가 및 사업비 정산(산림복지진흥원)

일정		'24.1.~2.		'24.3.~4.		'24.5.~6.		'24.7.~11.
시 · 자치구	⇨	계획수립 사업비 교부	⇨	실시설계 계약심사	⇨	공사시행 및 완료	⇨	실적보고서 제출
진흥원		사업비 교부		월별 실적보고		현장·안전점검 실시(매월)		사업평가 및 정산

□ 세부 추진방향

ㅇ  일상 가까이에서 숲 체험 기회 제공 및 시설 내 생활권 동네 정원 조성

- 시설 이용자 누구나 쉽게, 가까이에서 접근할 수 있는 녹색 인프라 마련

- 이용자의 면역력 증진, 정서 안정 기여할 수 있는 녹음 가득한 휴게공간

<강동실버케어센터>	<레가시아동병원>	<피닉스병원>

ㅇ  유휴부지 경관개선을 위한 화목류 식재 및 과도한 시설물 설치 지양

- 화목류 등 다양한 수목식재로 유휴부지 경관 개선 및 다채로운 경관 조성

- 접근로 개선을 위한 산책로 및 소규모 휴게시설 등 최소한의 시설물 도입

<Manor house herb garden>	<Manor garden centre>	<Queen Elizabeth Univ. hospital>

4		행정사항

□ 추진 시 유의사항

ㅇ「녹색자금 관리규정」,「녹색자금 사업비 편성 및 집행지침」등 관련 규정 및 지침과 사업 대상지 세부 사업계획서에 의거 사업추진 철저

- 산림복지진흥원에 설계도서 제출, 시공 추진 시 녹색자금사업 자문위원 자문 등

ㅇ 추후 사업평가를 고려하여 실적관리 철저 및 감점 사항이 발생하지 않도록 사업관리(기한) 엄수

- (평가사항) 예산 집행률, 안전관리 노력, 성과의 질적 수준 및 사회적 가치 반영도, 수혜자 만족도, 홍보실적, 유관기관·이해관계자 등 외부의견수렴 등

- (감점사항) 사업추진 중 국가법령·규정 준수여부, 실적보고서 제출기한 준수

ㅇ  중대재해처벌법 관련 사항 이행 철저

- 예정가격 작성 시 산업안전보건관리비 반영 및 사업장 안전점검 관리 철저

- 용역·공사비 교부 요청시 산업안전보건관리비 등 안전관리비용 반영된 내역서 제출

- 입찰 시 공고문 상에 안전보건확보 의무 명시 및 업체 의무사항 포함하여 계약체결

- 사업완료 시 산업안전보건관리비 등 안전관리비용 실사용 금액 확인·정산 등

□ 행정절차

ㅇ 자체설계에 따른 도면작성비 및 설계용역비 재배정

- 단순식재 및 시설물 설치 공종에 해당되는 경우 유사사례를 참고하여 자체설계 시행

- 사업내용이 복잡하여 실시설계 용역시행이 필요할 경우 기술용역 타당성심사(기술심사담당관)결과에 따라 설계용역비 재배정 요청

ㅇ 설계심의 및 계약심사 결과에 따라 공사비 재배정

- 지역주민 의견수렴 및 시의회 소통결과 등을 반영한 설계도면 작성 및 설계심의 등을 통한 내실 있는 정비 계획 수립

ㅇ 공사 착·준공 시 5일 이내 보고 철저

- 착·준공 보고로 사업 추진 현황 확인 및 신속한 사업 시행

- 다각도에서 촬영한 전, 중, 후 사진 촬영 철저

붙임  사업추진 관련 규정 및 각종 서식 각 1부.  끝.