문서번호	정수시설과-108
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이진근	최병희	01/11
		윤준성
협 조
	주무관		황여진
	주무관		최경민

[배출수 재처리장]

PAC 약품탱크 설치 계획

2024. 1.

강북아리수정수센터

[정수시설과]

[배출수 재처리장]

PAC 약품탱크 설치 계획

배출수 재처리 공정에 필요한 PAC 약품탱크를 추가 설치 하여 운영 효율성 및 설비 예비율을 향상코자 함

□ 추진배경

◯ 배출수 재처리장 운영 관련 시설보강 계획(기전설비과-10489; ‘23.11.15.)

- 국내 최초 재처리설비 도입에 따른 운영자 편의 누락사항 반영

- 사업예산의 한계로 미반영된 부속시설은 정수센터 자체 시행(중요          시설은 본부(생산부) 시행)

□ 설비현황

용 도	수 량	용 량	재 질	비 고
PAC 약품탱크	1	20㎥ (Φ2.8m×4,240mH)	PE

< 약품 공급 계통도 >	< 탱크 신설 위치 >

□ 사업계획

◯ 사 업 명 : 배출수 재처리장 PAC 약품탱크 설치 공사

◯ 사업내용

- PAC 약품탱크(20㎥, PE) 부설

- 약품 공급배관 및 밸브 설치

- 탱크, 배관 보온 및 사다리, 핸드레일 등 설치

◯ 소요예산 : ********

◯ ***************

◯ ****************************************         ***************************************               **********

◯ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,         정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비[재무회계과목:         정수비](기계설비 유지관리)

□ 추진일정

◯ `24. 1.10 ~ 1.26. : 입찰 공고 및 계약

◯ `24. 1.29 ~ 2.16. : 공사 자재 준비

◯ `24. 2.19 ~ 2.27. : 약품탱크 설치 공사

붙임 : 1. 설계자료 1부.

2. 배출수 재처리장 운영 관련 시설보강 계획(본부) 1부.  끝.