아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(영등포구청 바닥신호등 설치공사 2차)교통안전시설 원인자 부담공사 공기 연장 승인 통보

영등포구청 교통행정과-493호(2024.1.3.)와 관련하여 공사기간 연장요청을 아래와 같이 승인하오니 기간내 사업을 완료할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 2023년 상반기 바닥신호등 설치(2차)

2. 원 인 자 : 영등포구청 교통행정과

3. 공사장소 : 문래근린공원 앞 횡단보도 등 2개소

4. 공사내용 : 바닥신호등 설치

5. 연장사유 : 토목공정 지연으로 인한 공사기간 연장

- 영등포구 문래홈플러스입구(연등) 보도 조성 지연

6. 공사기간 연장내용

구 분	승인 전	승인 후	비고
****	************* ***********	************* **********	******

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시경찰청장(교통관리과장), 서울영등포경찰서장(교통과장), 서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 영등포구청장(교통행정과장)
주무관	박준규		기전과장	01/11
김병용
협조자
시행	기전과-509	(	2024. 1. 11.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	jkp1209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)