문서번호	방재시설부-512
결재일자	2024. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	01/12
			이동훈
협조
	주무관		김광호

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

건설공사(5차) 발주계획 검토보고

2024. 1.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

건설공사(5차) 발주계획 검토보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사」중 5차분 발주계획에 대하여 검토 보고드림

※ 관련근거 : 이산2024-국회대로(건)-08호(2024.01.12.)

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 화곡 지하차도 BOX 시점

○ 사업규모 : 도로연장 1.22km, 왕복4차로 (지하차도 신설 995m)

○ 공사기간 : 총차 ’18.8.8. ~ ’24.12.31. (5차 ’24.2.1. ~ ’24.12.31.)

○ 공 사 비 : ************************************
*****************************

○ 시공사 / 감리 : 한신공영(주)외 1개사 / ㈜이산 외 3개사

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’18.08.08. : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 착공

○ ’19.01.25. : 중첩구간 공사 실 착수

○ ’19.11.25. ~ ’21.12.31.  : 2차 공사

○ ’22.01.01. ~ ’22.12.14.  : 3차 공사

○ ’22.12.15. ~ ’24.01.31.  : 4차 공사

Ⅲ		발주계획(5차)

○ 차수별 공사현황

구분	공사개요	도급액 (천원)	공사기간	비고
전체	- 중첩구간 : U1~U13, B1~B8 - 잔여구간 : B01~B12	111,609,300	’18.08.08 ~ ’24.12.31
전회 (1차~4차)	- 중첩구간 ∙ 토공 및 가시설 : U1~U5(인천방향), U6~U13, B1~B7 ∙ 구조물 : U1~U5(인천방향), U6~U13, B1~B6-1(기초, 벽체), B6~B6-1(슬라브) ∙ 토공 및 가시설 : B01~B012	54,048,900	’18.08.08 ~ ’24.01.31
5차	- 중첩구간(여의도방향) ∙ 토공 및 가시설 : U1~U5, B1~B2 ∙ 구조물 : B1~B2(슬래브) - 잔여구간 ∙ 토공 및 가시설 : B01~B12	6,022,000	’24.02.01 ~ ’24.12.31
잔여	- 중첩구간(구조물) : U1~U5(여의도방향), B3~B5(슬라브), B7~B8 - 잔여구간(구조물) : B01~B12 - 토공 및 가시설(중첩, 잔여구간)	51,538,400	-	공기연장필요

○ 5차분 요약도

Ⅳ		검 토 의 견

○ 책임건설사업기술자 검토의견

- 5차분은 배정된 예산현액에 맞추어 공정계획을 수립하는 등 발주 설계(내역서, 설계도면, 수량산출서)는 적정한 것으로 사료됨.

- 다만, 국회대로1단계 총차 공사기간이 ’24.12월로 되어 있는바 잔여물량 및 공사비 감안 시 당초 계획했던 공사기간내 사업의 준공(’24.12월)이 어려운바 현시점 잔여공사 물량을 소화하기 위한 공기연장이 필요할 것으로 판단됨.

○ 보고자 검토의견

- 5차분 발주내역 및 도면, 수량산출을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 계약부서에 계약의뢰하고자 함.

- 다만, ’24년 예산요구액의 감 조정을 반영하여 계획된 발주계획인 만큼 추가예산 편성 및 잔여공사 물량을 소화하기 위한 공기연장이 필요할 것으로 판단됨.

붙임 : 5차분 발주 설계도서 1부.  끝.