문서번호	시설개선과-432
결재일자	2024. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
박희영	김현곤	이균형	01/12
			정순은
협 조
	운영기획과장		임재선

잠실야구장 인조잔디 교체 추진계획

2024.   1.  12.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 인조잔디 교체 추진계획

잠실야구장내 노후화된 인조잔디를 교체하여 안전사고 예방 및 쾌적한 경기환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 서울특별시 체육진흥기금 설치 및 운영에 관한 조례 제4조(기금의 용도) 6항, 제8조(기금의 관리ㆍ운용) 3항

○ 서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례 제4조의 2(안전한 환경의 유지·관리 등) 1항

○ 2024년 잠실야구장 시설물개선 구단 요청(잠운본 제2023-16호, '23.5.17.)

Ⅱ		인조잔디 현황

○ 위    치: 잠실야구장(송파구 올림픽로 25)

○ 규    모: 1,847.4㎡(포수 뒤 백스탑 904㎡, 1,3루 라인 외곽 워닝트랙 683.4㎡, 불펜 260㎡ )

○ 최근 정비내역

시 설 명	정비시행	정비내용	사 업 비	비 고
그라운드 (잔디, 인조잔디)	‘18.6.26.~12.18.	잔디식재 9,796.5㎡ 인조잔디 교체 1,587.4㎡ MLB토사 교체 1,116㎡	829백만원
불펜지역 (인조잔디)	‘18.2.21.~3.16.	인조잔디 교체 260㎡	13백만원

○ 인조잔디 현황

- LG, 두산 2개 구단에서 홈구장 사용중으로 타구장에 비해 사용 빈도가 높아 인조잔디 파일의 마모 및 경화가 심함(설치년도 2018년)

- 경기 중 선수들의 미끄러짐, 충격 등으로 인한 부상 우려가 있어 교체 시급

○ 위치도 및 현황사진

위치도	백스탑	워닝트랙	불펜

Ⅲ		인조잔디 교체 추진계획

○ 사 업 명: 잠실야구장 인조잔디 교체

○ 사업기간: 2024. 1. ~ 3.

○ 사업내용: 인조잔디 교체 1,847.4㎡

○ 사 업 비: ******

*******			****	*******	******
*********	*********	*****	********	**	****
	***	*****	******	**
*****			********	**
**********************				**	****
******				***	*****

○ 인조잔디 분리회수 및 재활용처리용역 발주계획

****************************************

*********************************************************

***************************************************

*******************

******************

********************************************************************

○ 예산과목

- 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충(체육진흥기금), 야구장 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		특정제품선정심사 추진계획

○ 심사대상: ***********

- 서울특별시 특정기술 선정 심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례(‘19.11.17.)

[동일 특정제품의 제조․구매금액 합계가 2천만원 초과]

○ 심사위원회 개최 및 운영계획

- 위원회 구성

․ 심 사 일: ***************

․ 심사방법: ****

․ 심사위원 구성 : 5명(내부위원 2명, 외부위원 3명)

************************************

*************************************

********************************************************************

※ 외부위원 선정방법: 서울특별시 건설기술심의위원 및 조경기술사

*************************************

- 심사내용: 특정기술(제품) 선정 적정 여부 등 심의의결

- 사전검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	********************************************************************
성능 및 품질 우수성	******************************************************************
가격적정성	*********************
현장적용성 및 유지관리성	****************************************** **********************************
종합 검토의견	*************************************************

- 의결방법

******************************************************************************************

- 추진일정

기본방침수립 (1. 12)	➡	위원회 개최 통보 (1. 15)	➡	심사결정 (1. 18)	➡	심사결과보고 (1. 19)
․ 필요성, 시장조사 ․ 위원회 구성		․ 사전검토보고서 작성 및 송부 ․ 의견조회(3~5일)		․ 심사사항 결정		․ 기관장 보고 ․ 발주부서 → 계약 의뢰

○ 외부위원 심사수당 지급

- 소요예산: *********************

․ 예산과목: 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 사무관리비

․ 지급기준: 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급조례 시행규칙 2조

예산 및 기금운용계획 집행지침(위원회 참석비)

Ⅴ		추진일정

○ 2024. 1. 특정제품 선정 심사(인조잔디)

○ 2024. 2. 인조잔디 조달구매, 분리회수 및 재활용처리용역 발주

○ 2024. 3. 인조잔디 교체 완료 (프로야구 시즌 개막 전 사업완료)

※ KBO 프로야구 2024시즌 개막일: 2024. 3. 23.(토)

************************

****************************

******************************************