문서번호	공원시설과-411
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원시설과장	공원부장		미래한강본부장
신승민	양돈욱	허현수		전결 01/15
				주용태
협 조
	주무관		박근용

2024년 한강공원 수영장 보수공사 추진계획

2024. 1.

미래한강본부

공   원   부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 한강공원 수영장 보수공사 추진 계획

한강공원 야외수영장 및 물놀이장을 이용하는 시민의 안전확보 및 쾌적한 물놀이공간 조성을 위한 2024년 보수공사 추진 변경 계획을 보고 드림.

□ 시설현황

○ 수영장 5개소, 물놀이장 3개소

구 분	수 영 장					물놀이장
	뚝섬	잠원	여의도	광나루	망원	잠실	난지	양화
면 적(㎡)	21,000	23,325	20,000	9,630	22,293	27,945	7,040	7,800
수조면적(㎡)	4,640	4,800	5,200	1,806	5,300	5,102	3,500	1,700
수 조 수	4	3	4	2	3	3	1	1
수용인원(명)	3,500	3,000	3,600	1,200	3,300	3,400	1,100	600
조 성 년 월	2009.7	1989.8	2009.7	1991.8	1991.8	1990.8	2009.7	2015.4

※ 2024년 광나루, 망원 수영장 미운영

□ 공사개요

○ 공사명 : 2024년 한강공원 수영장 보수공사

○ 공사대상 : 수영장 3개소 (뚝섬, 여의도, 잠원), 물놀이장 2개소 (양화, 난지)

구 분		공사물량	사업비(천원)
계			2,499,000
실시설계용역		․ 수영장 보수공사 시설분야 실시설계	26,000
수 영 장 공사	소계	․ 한강공원 수영장 보수공사	842,000
	시설분야	․ 수조 도색 및 토사유입 방지 시설 ․ 휴게시설 설치, 수목식재, 배수로 정비 ․ 양화 계류정비 및 여의도 카페테리아 보수 ․ 노후 포장 교체, 음수대 수리 등	442,000
	기전분야	․ 여과기 분해, 조립 및 보수 ․ 샤워기 설치·분해정리 및 정비 ․ 기계실 배관 교체, 기전설비 시험가동 등	400,000
여과기교체		․ 수영장 여과기 교체 8대(여의도, 뚝섬, 난지)	1,600,000
폐기물 처리 용역		․ 폐콘크리트, 혼합폐기물 1식	26,000
건설재해예방 기술지도용역		․ 1억원 이상 도급공사 안전관리 기술지도	5,000

□ 세부추진 계획

실시설계용역

○ 용 역 비 : 26백만원 (시설분야 설계비)

○ 용역기간 : 착수일로부터 30일 이내

○ 과업규모 : 한강 수영장 및 물놀이장 5개소 유지보수 실시설계

○ 계약방법 : 수의계약

- 수영장 개장일 전 보수 완료를 위해 조속한 현장조사 및 설계 완료가 가능한 전문 엔지니어링 업체와 수의계약 시행

보 수 공 사

○ 공 사 비 : 842백만원

○ 공사기간 : 착공일로부터 2024.10.31.까지

- 수영장 개장 전 주요 공정 완료, 운영기간 유지관리 시행

○ 시행방법 : 효율적 사업관리를 위해 공종별 분리 발주

○ 발주방법 : 일반경쟁입찰

- 입찰참가자격

• 수영장 유지보수 : 조경공사업(442백만원)

• 여과기 등 기계설비 : 기계설비공사업(400백만원)

폐기물 처리용역

○ 용 역 비 : 26백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 2024.10.31.까지

○ 시행방법 : 수의계약

여과기 교체

○ 사 업 비 : 1,600백만원

○ 추진기간 : 2024. 2. ~ 6.(수영장 개장 전 교체)

○ 시행방법 : 조달구매(특정제품심사 후 구매)

건설재해예방 기술지도용역

○ 용 역 비 : 5백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 2024.10.31.까지

○ 시행방법 : 수의계약

□ 향후 추진일정

○ 2024. 1.      : 계획 수립, 기술용역 타당성 심사 의뢰

○ 2024. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행, 계약심사

○ 2024. 3. ~ 6. : 공사시행 및 주요공정 완료, 여과기 교체 설치

○ 2024. 6. ~ 8. : 수영장 개장 기간 유지관리

○ 2024. 9.       : 운영종료 후 시설 보수, 공사준공

붙임  1. 2024년 한강공원 수영장 보수내역 1부.

2. 여과기 교체 계획 1부.  끝.