문서번호	디자인산업담당관-435
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	공공미술사업팀장	디자인산업담당관	디자인정책관
박재은	강연태	김연주	01/15
			최인규

2024 노을공원 공공미술 프로젝트 기본계획

2024.  1

디자인정책관

(디자인산업담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024 노을공원 공공미술 프로젝트 기본계획

난지도 일대 활성화 계획과 연계하여, 노을공원을 대상으로 2024년 공공미술 프로젝트를 집중 추진하여 서울을 대표하는 공공미술 거점으로 활성화 하고자 함

1		추 진 개 요

□ 추진근거

ㅇ 서울은 미술관 2.0 기본계획 수립 및 정책발굴 연구용역 완료 (’22.12)

- 공공미술 프로젝트 핵심 대상지로 여의도공원, 상암동 일대, 가락시장 등 발굴

- 도시예술로의 영역 확대와 정기 전시를 진행할 거점(Venue)조성 필요

ㅇ「디자인서울 2.0」 공공미술 7대 명소 조성(’23~’27) 발표 (’23.6)

- 7대 명소 : 여의도(랜드마크), 노을공원(핵심거점), 5대 생활권별 명소

ㅇ 조각페스티벌 개최 등 조각매력도시를 위한 기획마련 시장지시(’24.10.4)

- 주요 대상지에 노을공원을 포함한 노들섬, 송현광장 등 조각전시 활성화

□ 추진경과

ㅇ 노을 조각 공원 활성화 시장 지시(68-4)           : '23. 4. 5. (수)

ㅇ 난지도 중심 종합구상을 위한 TF 참여             : ’23. 6. ~ 11.

- (TFT) ’23.6.27(화) / (실무TF 1차) ’23.9.5(화) / (실무TF 2차) ’23.11.28(화)

ㅇ 전문가 현장 자문회의                            : ’23. 9. 21.(목)

- 설치 대상지 현황 검토(위치,면적,지반구조 등) 및 기획방향, 규모 등 자문

- 유사사례 검토 및 사업 추진시 유의점 및 제안 사항 등

ㅇ 공공미술 정책 고도화를 위한 전문가 자문회의     : ’23. 12. 22.(금)

- 서울시 공공미술 철학과 탄소중립 지향점을 녹인 기획으로 추진

□ 사업개요

ㅇ 대 상 지 : 노을공원 잔디마당 조각공원 (약 23,000㎡)

- 반려견캠핑장 조성예정지 제외 면적

ㅇ 사업내용 : 탄소중립 예술의 핵심거점 조성

ㅇ 추진방법 : 2024년 공공미술 사업 대상지 일원화

- 대상 : ’24 권역별 공공미술 작품구현

’24 공공미술 작가발굴 및 전시

ㅇ 사업기간 : ’24. 1월 ~ 12월

ㅇ 개장시기 : ’24. 10월

ㅇ 사업예산 : 1,842백만원 (부가세 포함)

사업구분	공모방법	작품 형태	사업예산
권역별 공공미술 작품 구현	지명공모	대형 구조형 작품	1,442,000원
공공미술 작가발굴 및 전시	일반공모	신잔작가 발굴 시민참여 프로그램	400,000원

대상지 현황

‣ 위  치  : 서울특별시 마포구 상암동 481-6 (월드컵 공원의 일부)

‣ 공원면적 : 911,859㎡ (파크골프장, 캠핑장, 반려견 캠핑장, 조각공원으로 구성)

‣ 개 원 일 : 2002.5.1

‣ 유관계획 : 상암동일대 활성화 계획, 노을 전망대, 제2파크골프장, 반려견 캠핑장 조성

서울아트위크 조각전시 등

‣ 조각공원 현황 : 2009년 김영원, 최만린 등 대표 작가의 10개 대형 조각작품 배치

‣ 관리부서 : 서부공원여가센터

<노을공원 대형 작품 위치>	<자연+인간, 숨쉬는땅>김광우 作	<노을공원 토양층 구성>

2		추 진 전 략

		노을공원 프로젝트
파빌리온 프로젝트				작가 발굴·전시			유관(민간)자원 활용
’24 권역별 공공미술 작품구현 대상지로 노을공원 활용 ※ 2025년 노을공원 프로젝트 자체 예산 편성 요구				공공미술 작가발굴 및 전시 사업의 대상지로 지속 활용			민간 협력사업 유치 시 유관사업 협업 시민참여 프로그램
아트 파빌리온과 예술작품들이 조화된 탄소중립 도시예술 플랫폼

□ 추진방향

ㅇ (전략적 명소화) ’24년을 시작으로 한 전시 정례화로 명소화 지향

- 연차별 파빌리온 조성과 다양한 작품 전시로 공공미술 명소 및 축제화 추구

ㅇ (친환경 주제) 장소적 특성과 국제적 이슈를 반영한 주제 설정

ㅇ (장소특정성) 노을공원의 역사와 환경적 특성을 입체적으로 활용한 작품

□ 추진방법

ㅇ (운영체제 구축) 노을공원 운영위원회(5인) 구성으로 총괄 디렉팅 기능 강화

- 사업 기획부터 실행까지 컨트롤 타워기능을 수행할 운영위원회 구성·운영

□공공미술위원 및 외부 전문가(건축, 디자인, 조경, 디렉팅 등)으로 구성 (총 5인)

- 작가 추천 및 현장자문 등 성공적 운영을 위한 총괄 디렉터 기능 수행

ㅇ (사업 집중화) 일관된 주제 아래 개별사업 집중화로 프로젝트 효과 극대화

- 권역별 공공미술 작품구현과 작가발굴 사업 등 관련 사업 집중화로 효과 극대화

- 동일한 주제하에 서로 다른 구현방식을 활용하여 일관성과 다양성 동시 추구

ㅇ (민간 및 유관 사업 활용) 민간자원과 유관부서 가용자원 적극 활용

- (서울시) 난지예술창작스튜디오, 서울 아트위크 협력전, 제로웨이스트 프로젝트 연계

(민  간) 탄소중립 관련 기업 및 단체의 ESG 활동과 연계 및 참여유도

□ 기획방향

(총괄주제) 자연-도시-사람의 공존: Seoul Biophilic Public Art Project

‣난지도 일대 세계적인 환경 테마공간화와 연계한 선진적 예술 프로젝트 정례화

‣주제, 재료, 구조, 분해, 재활용, 공론화 과정 등에 탄소중립 실천으로 정체성 강화

‣쓰레기 산 위를 덮은 가상의 자연, 노을공원 일대에 조성된 대형 조각품 활용

2024				2025				2026				2027
	(구조와 조형)				(소재와 재료)				(분해와 폐기)				(과정과 메시지)
파빌리온 1 / 작가전시				파빌리온 1.2 / 작가전시 협력전 유치 / 축제				파빌리온 1.2,3 / 작가전시 협력전 / 축제 / 컨퍼런스				파빌리온 1(철거),2,3,4(검토) 작가전시/ 협력전/ 아카이브전

아트 파빌리온 프로젝트

- 그늘이 없는 노을공원에 대형 예술작품이자 거점이 되는 공간 조성

형태의 구성, 재료, 조경과의 결합 등 환경과의 조화를 위한 세부주제 설정

3점의 작품의 3년간 순차적 조성으로, 노을공원의 새로운 볼거리로 활용

< 에스티피엠제이 stpmj> 과천	<해슬리나인브리지> 반 시게루	<Milan Expo pavilion 2015, Wolfgang Buttress>

공공미술 작가 발굴 및 전시

- 잠시 만들고 폐기하는 방식에 대한 반성과 새로운 내일을 주제로 세부기획

- 기 조성된 조각품의 오마주와 신선한 예술 실험의 장소로(Venue) 활용

- 매년 10월 올해의 작가들이 펼치는 도전적인 작품 전시장이자 축제로 활성화

<호흡> 박봉기	<사색 없는 풍경_ 마곡, 물의 계절> 김예나	<당신의 낯선 땅> 2019 공공미술 축제

유관(민간)자원 활용

- (서울시립미술관) 난지예술창작스튜디오 입주작가 협력전시 추진

- (기후환경본부) 제로웨이스트 서울 프로젝트와 연계된 마켓 및 시민활동 유치

- (문화본부) 서울 아트위크 조각작품 전시 연계 추진

(민간기업) 탄소중립 관련 기업 및 단체의 ESG 활동과 연계 및 참여유도

□ 추진절차 및 일정

ㅇ 운영위원회 구성(1월), 후보작가 추천 및 선정 (2~3월)

ㅇ 개별사업 시행사 선정 발주(1월), 시행사 선정(2~3월), 작품공모 및 선정(3~5월말)

ㅇ 공공미술심의 및 도시공원 심의(6~7월), 제작 설치(6~9월), 개장 및 전시(10월)

<권역별 공공미술 작품구현>								⇨	<현장설치>	⇨	<전시개장>	⇨	<전시활용>
작가 추천 (2월)		⇨	참여작가 선정 (3월)	⇨	작품공모 (3월~5월)	⇨	최종작 선정 (5월)		공공미술 위원회 심의 (6월) ↓ 도시공원 위원회 심의 (7월) ↓ 작품설치 (8월~10월)		전시운영 프로그램 운영 협력전시 (10~12월)		파빌리온 1 활용 ※ 3년 존치
<공공미술 작가발굴 및 전시>												⇨		⇨
작가추천 (3월)	⇨		작품공모 (4월)	⇨	작품심사 (5월)	⇨	작품발표회 (5월)	⇨					작가 전시 철수 ※ 3개월 전시		순환 전시 (검토)

□ 기대효과

ㅇ 국제적 메시지에 동참하는 서울의 대표적인 도시예술 정례전시로 자리매김

ㅇ 시민들과 함께하는 다양한 예술의 실험으로 노을공원의 의미 지속 홍보

ㅇ 살아있는 도시예술의 핵심 거점화로 자연과 휴식이 있는 명소화

3		’24 사업별 추진계획

1. 서울 아트 파빌리온 프로젝트

포장된 자연을 끌어안는 대지의 그늘

- 온전한 땅이 되기 위한 기다림 -

□ 사업개요

ㅇ 사업내용 : 생태학적 구조원리와 조형을 활용한 경량형 파빌리온 구축

ㅇ 위    치 : 노을공원 잔디마당 중앙부

ㅇ 예상규모 : 550 ~ 650㎡ (지름 약 25m 범위)

ㅇ 추진방식 : 국제공모 당선작 구현

- 전문 시행사 선정 추진 (협상에 의한 계약)

ㅇ 사업기간 : ’24. 1월 ~ 12월

ㅇ 사업예산 : 1,442백만원 (부가세 포함)

1. 참여 작가 선정

□ 참여작가 추천 및 선정

ㅇ 참여작가 추천·선정 : ’24. 2월 ~ 3월 ※대행업체 선정 전 추천 완료

ㅇ 선정대상 : 지명공모 참여작가 4인(팀)

ㅇ 추천범주 : 설치미술, 디자인, 건축, 조경, 미디어아트 등 (복합예술 포함)

ㅇ 추천 및 선정방법(안) ※ 각 위원회 위원은 중복 역임 불가

① 노을공원 운영위원회 추천 5인(팀), 기획자 추천 3인(팀)으로 2배수 후보 구성

② 작가선정위원회(5명)의 포트폴리오 심사로 적합도 평가, 순위 결정

③ 고득점 작가부터 참여 의사 확인 후 4팀의 참여작가 최종 선정

※ 작가 추천 시 건축가+미술가 등 장르 복합, 협업팀 추천 가능, 융복합을 통한 시너지 창출

※ 기획사의 제안방향에 따라 작가 초대로 진행할 경우, 별도의 심의를 통한 적합성 검토

2. 작 품 공 모                             ※ 세부 공모계획 별도 수립

□ 공모개요

ㅇ 공모기간 : ’24. 3월 ~ 5월 (1.5개월)

ㅇ 실행방법 : 국제지명공모

ㅇ 참여대상 : 지명 작가 4명(팀)

ㅇ 공모주제 : 대지의 그늘

- 노을공원의 지반과 바람 등 자연환경 컨디션과 역사적, 사회적, 인문학적 맥락을 충분히 검토한 탄소중립 지향의 작품 제안

- 구조 자체가 조형작품이 되는 완성형 파빌리온으로, 생태학적 구조 원리를 활용하며, 경량 소재를 활용한 실험적인 예술공간 구성

※ 6개월 내 디자인~설치까지 완료 가능하며 3년간 존치와 활용 가능성 검토

ㅇ 제 출 물 : 기획의도와 예상 이미지를 포함한 기획안, 설명 영상

- 기본설계에 준하는 시뮬레이션을 포함한 기획안, 5분 작품 설명영상

ㅇ 접수방법 : 운영 사무국을 통한 보조자료 제공 및 작품접수

□ 작품 심사

ㅇ 심사시기 : ’24. 5월 말

ㅇ 심사방법 : 기획안 및 영상자료 심사

ㅇ 심사기준 : 작품성(독창성·조형성)40, 실행가능성 30, 공공예술성 30

ㅇ 심사위원 : 문화예술계 전문가 7~9인 ※ 작가 추천, 선정위원회 위원 제외

ㅇ 선정대상 : 최종당선작 1점, 후보작 1점

- 미당선작에 대한 제안보상금 지급 (각 5백만원(안))

※「서울시 공공건축물 설계발주 기준」제5절 제6호 라목 낙찰자와 계약을 체결하지 않는 경우 공모안의 작성에 소요된 실비 지급 사항 준용, 당선작가에 대한 창작료는 작품비에 포함

<Zephyr Pavilion> Marc Fones	Bedford Square Pavilion	<Serpentine Pavilion> Francis Kéré

□ 안전성 검토 및 실시설계

ㅇ 추진기간 : ’24. 6월 초

ㅇ 추진방법 : 각 안전성 검사 및 조사를 반영한 실시설계 진행

- (지반안전성) 깊이가 얕은(60cm) 인공지반 위 설치를 위한 테스트 선행

- (실측 및 보강) 적정면적, 위치 검토, 필요 시 지반보 및 바닥면 보강

※ 2022.7 서부공원녹지사업소 지반조사보고서를 근거로 현장실측 및 구조계산 진행

- (구조안전검토) : 작품 자체의 내구성과 안전성에 대한 전문가 검토

5. 작품 설치 심의

□ 공공미술위원회 심의

ㅇ 심의시기 : ’24. 6월 중 ※ 최종 당선작 기본설계 이후

ㅇ 심의내용 : 설치될 공공미술 작품의 적합성

- 최종 설계안 및 공공미술 자문위원을 포함한 작품안 심의 진행

- 심의결과에 따라 형상, 실행방법 등 일부 수정 보완 등 조치

□ 도시공원위원회 심의

ㅇ 심의시기 :  ’24. 7월 중 ※ 공공미술위원회 의견수렴 및 실시설계 안 포함

ㅇ 심의내용 : 공원설치 대상의 적합성 및 형상 변경 여부 등

ㅇ 진행방법

- 푸른도시국 사전협의(14일), 도시공원위원회 사전공고(14일)

- 심의결과에 따라 작품 설치, 전시기간, 실행방법 등 수정 보완 등

6. 작품 제작·설치

ㅇ 추진기간 : ’24. 7월 ~ 9월 (12주)

ㅇ 추진방법 : 전문 제작사에 의한 제작·설치 (협의과정 작가 참여)

- 작가발굴 및 전시, 문화본부 조각작품 설치와 일정 조율

- 우기(호우 및 태풍) 대비 현장 작업 최소화로 일정 지연 방지

2. 공공미술 작가발굴 및 전시

예술은 공존을 위해 무엇을 할 수 있을까?

- 기후위기에 대처하는 예술의 태도 -

□ 사업개요

ㅇ 사업내용 : 올해의 공공미술 작가 선발, 주제에 적합한 야외 전시 추진

ㅇ 위    치 : 노을공원 잔디마당 중앙부 (아트 파빌리온 인근 장소)

ㅇ 추진방식 : 신진작가 작품공모, 일반작가 선정, 작품설치, 참여 프로그램

- (신진작가) 작가발굴과 성장을 지원하는 육성 프로그램 및 작품 실현

- (일반작가) 공공미술을 처음 시도하는 중견작가의 참여 유도 및 확대

ㅇ 작 품 수 : 5점

ㅇ 사업기간 : ’24. 1월 ~ 12월

ㅇ 사업예산 : 400백만원 (부가세 포함)

ㅇ 추진방법 : 전문 시행사 선정 (협상에 의한 계약)

1. 일반작가 추천 및 신진작가 공모

□ 일반작가 추천

ㅇ 추천기간 : ’24. 3월

ㅇ 추천대상 : 공공미술 분야의 전시·설치 경험이 없는 다분야 중견작가

ㅇ 추천방법 : 외부 추천 6명(팀)

－ 난지창작스튜디오 추천 작가 2~3명, 용역사 추천 3명(제안서 포함 작가)

ㅇ 선정방법 : 작가 포트폴리오 심사를 통한 최종 선정

ㅇ 최종선정 : 2명(팀)

2. 신진작가 작품공모 및 워크숍

□ 신진작가 작품공모

ㅇ 공모기간 : ’24. 3월 ~ 4월 (1개월)

ㅇ 공모주제 : 예술은 공존을 위해 무엇을 할 수 있을까?

ㅇ 공모방식 : 일반공모 (자격, 장르. 경력제한 없음)

ㅇ 제출서류 : 작품 기획안, 시뮬레이션 이미지, 작품설명서, 작가설명서 등

□ 작품선정 심사

ㅇ 심사시기 : ’24. 4월 중

ㅇ 심사내용 : 작품 기획안, 작가 포트폴리오 등 검토

－ 주제 해석, 기획안, 작품에 대한 아이디어 스케치, 활용방식 등 심사

－ 노을공원의 조각작품들과의 조화로움을 고려한 작품 선정 진행

ㅇ 심사기준 : 작품성(독창성·조형성)40, 실행가능성 30, 공공예술성 30

ㅇ 심사방법 : 전문가 5~8인에 의한 집합 심사 ※ 작가 추천위원 제외

ㅇ 선정대상 : 최종 참여작가 3명(팀) 내외 선정

- 미당선작에 대한 제안보상금 지급 (각 1백만원)

※「서울시 공공건축물 설계발주 기준」제5절 제6호 라목 낙찰자와 계약을 체결하지 않는 경우 공모안의 작성에 소요된 실비 지급 사항 준용, 당선작가에 대한 창작료는 작품비에 포함

□신진작가 워크숍

ㅇ 추진목적 : 작품 실현성, 안전성, 대중성 확보를 위한 구체화 워크숍

ㅇ 추진시기 : ’24. 5월 중      ※ 일반작가는 별도 워크숍 없이 실시설계 진행

ㅇ 실행자문 : 기존 노을공원 작품전시 작가, 운영위원회, 분야별 전문가

ㅇ 주요내용

－ 신진 작가-전문가 분야별 매칭 및 작품 기획안 구현방안 구체화

－ 작품 실현을 위한 제작팀과의 미팅, 구조보강, 안전성 보강 진행

－ 제출 작품의 시민 이해증진을 위한 참여프로그램 기획 및 개발

3. 최종작품 발표회 (일반작가 + 신진작가)

ㅇ 개최시기 : ’24. 5월 말

ㅇ 추진방법 : 5명(팀) 작가들의 신작 발표회 공론화 ※ Youtube Live 활용

－ 작가의 작품설명 및 시민들의 실시간 질의응답을 통한 공론화 진행

－ 다양한 시민의견을 반영한 작품안 최종 결정

< 분야별 작가 워크숍 >		< 작품 발표회 >

4. 작품 심의·설치

□ 실시설계 및 안전성 검토

ㅇ 추진시기 : ’24. 6월 초

ㅇ 추진내용

－ 설치 지반검사 포함 작품의 구조, 현장상황을 고려한 작품별 안전 검토

－ 안전한 작품 제작과 구현을 위한 작품별 실시설계 진행

□ 공공미술위원회 심의

ㅇ 심의시기 : ’24. 6월 중

ㅇ 심의내용 : 설치될 공공미술 작품 및 참여 프로그램 등의 적합성

－최종 설계안 및 공공미술 자문위원을 포함한 작품안 심의 진행

－심의결과에 따라 형상, 실행방법 등 일부 수정 보완 등 조치

□ 작품 제작 설치

ㅇ 제작·설치기간 : ’24. 7월 ~ 9월

ㅇ 설치방법 : 작가 검수하에 전문 제작사에 의한 제작·설치

－ 집중호우 및 태풍시기를 고려한 안전한 작품설치 추진

5. 전 시 운 영

□ 작품 전시 운영

ㅇ 전시기간 : ’24. 10 ~ 12월 (최대 90일(안))

－ 작품 유형 및 시민참여 프로그램 맞춤 별도 전시 운영계획 수립

－ 작품설치/전시/철수 기간 중 상시 작품관리인력 및 시민안내 인력 배치 등

ㅇ 장 소 : 노을공원 잔디마당 중앙부

ㅇ 작품 수 : 5점  ※ 세부 설치위치, 규모, 유형 등 공모 결과에 따라 지정 설치

ㅇ 안전관리계획 수립

－ 사고에 대비한 보험 가입, 신속한 상황 대응을 위한 비상연락망 구축 등

－ 응급 발생 시 신속한 대처를 위한 안전요원 배치, 구조물 수시 안전 점검

<귀를 기울일 만한 가치가 있는 모든 것들>	Team233 <개울>	박봉기 <호흡>	이지성 <삶이 되는 꿈, 꿈이 되는 삶>

□ 작품별 참여 프로그램 추진

ㅇ 추진기간 : ’24. 10월 ~ 11월 중

ㅇ 추진목적 : 작품연계 프로그램 추진으로 시민참여 확대 유도

ㅇ 추진대상 : 현장 프로그램 운영

ㅇ 추진내용 : 신진작가가 직접 진행하는 작품연계 프로그램 활동

□ 시민이 뽑은 올해의 작품 (인기상) 선정

ㅇ 진행기간 : 현장전시 기간 내 ※약 4개월

ㅇ 진행방법 : 현장투표, 온라인 투표, 전문가 투표 병행

－ 프로젝트 인스타그램, 홈페이지, 현장투표 합산

ㅇ 선정대상 : 1명(팀)

－ 올해 시민이 뽑은 인기작품으로 대외 홍보

4		개장식 및 사업평가

□ 개장식 개최 ※ 별도 운영계획 수립

ㅇ 개최시기 : ’24. 10월 초

ㅇ 위    치 : 노을공원 잔디마당 중앙부 (작품 조성지 일대)

ㅇ 주요내용 : 2개의 공공미술 사업 합동 개장식 개최

- 문화본부 조각전시 및 기업, 민간 참여 추진

- 다양한 즐길거리와 시민프로그램 개최 등으로 구성

□ 사업평가

ㅇ 추진기간 : ’24. 12월

ㅇ 추진방법 : 참가자, 작가, 시민 대상 만족도 조사 및 전문가 비평

ㅇ 추진목적 : 차년도 프로젝트 발전을 위한 보완점 도출 및 환류 추진

5		노을공원 운영위원회 구성·운영

ㅇ 운영목적 : 작품의 질적 향상과 주제 일관성 유지를 위한 자문단 운영

ㅇ 운영기간 : '24. 2월 ~ 12월

ㅇ 역    할 : 노을공원 프로젝트 전반에 대한 작가 추천 및 실행자문

- 사업기획, 작가추천, 주요 시점에 맞는 수시 자문

ㅇ 위원구성(5명) : 디자인정책관, 서울시 공공미술위원(1), 외부 전문가(3)

ㅇ 비용지급 : 각 회 회의 및 자문 참석에 대한 수당 용역비 내에서 지급

ㅇ 위원 구성(안)

분 야	성 명	소 속 / 주 요 경 력
미 술	***	**************************************
건 축	***	*************************************************
조 경	***	***************************************
디 자 인	***	**********************************
예술기획	***	**********************************************

6		행정사항

□ 소요예산 : 1,842백만원 (vat. 포함)

ㅇ 예산(안)                                                            (단위: 천원)

구 분	세 부 내 역		금 액
사 무 관리비	************** ********	***********	*****
		***********	******
		************	*******
		************	******
	*************	***********	*****
시설비	************* **********	**********	******
		********************	*********
		******************	*******
합 계			*********

ㅇ 예산과목

- (공공미술 작가발굴 및 전시) 디자인산업 육성 지원, 공공미술 기반 구축,시민참여 공공미술 프로젝트 추진, 사무관리비(201-01)

- (권역별 공공미술 작품구현) 디자인산업 육성 지원, 공공미술 기반 구축, 권역별 공공미술 작품구현, 사무관리비(201-01) 및 시설비(401-01)

□ 유관부서 협조

ㅇ 작품기획, 공모, 구현, 작품 보수·관리  : 디자인산업담당관

ㅇ 서울 아트위크 조각작품 연계전시    : 문화본부 박물관과

ㅇ 작가발굴 및 전시 참여작가 추천    : 시립미술관 난지창작스튜디오

ㅇ 노을공원 장소제공 및 현장 관리     : 푸른도시여가국, 서부공원여가센터

□ 향후일정

ㅇ 사업계획 수립 및 운영대행사 선정           : ’24. 1. ~ 2.

ㅇ 사업별 참여작가 선정 및 작품공모           : ’24. 3. ~ 5.

ㅇ 공공미술위원회 및 도시공원위원회 심의     : ’24. 6. ~ 7.

ㅇ 작품 제작 및 현장설치                     : ’24. 8. ~ 9.

ㅇ 전체 개장행사 및 전시운영                 : ’24. 10. ~ 12.  끝.