문서번호	급수운영과-781
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
박상현	박상열	채재일		01/15
				김정윤
협 조	시설관리과장		권승계
	시설운영팀장		신동철
	시설관리팀장		김용섭
	급수관리팀장		신정우
	주무관		이연한

2024년 장기사용 상수도관 정비 추진계획

2024. 1.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목   차

Ⅰ		추진개요	1
Ⅱ		’23년 추진실적 및 문제점	2
Ⅲ		’24년 목표달성을 위한 주요 검토사항	3
Ⅳ		추진계획	4
Ⅴ		’24년 정비계획	5

2024년 장기사용 상수도관 정비 추진계획

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

관 내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 개연성이 높은 장기사용 상수도관의 선제적 정비를 통해 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 장기사용 상수도관 정비계획【누수대응과-12079(2023. 12. 15.)】

ㅇ 2024년 장기사용 배급수관 정비계획 알림【누수대응과-34(2024. 1. 2.)】

□ 정비대상

ㅇ ’84 ~ ’85년에 매설된 시멘트라이닝 덕타일주철관

ㅇ ’79년 이전에 매설된 에나멜콜타르 도복장강관

ㅇ 누수 및 수질사고 취약 상수도관

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: 2020년 ~ 2024년

ㅇ 연차별 정비계획

구 분		총 계	기투자(~’23)	추진 계획(’24)	비 고
정비연장 (㎞)	계	38.0	29.77	8.23
	송배수관 정비 (400㎜ 이상)	3.4	3.07	0.33
	배급수관 정비 (350㎜ 이하)	34.6	26.70	7.90
사업비(억원)		318	184	134	이월금액 포함

Ⅱ		’23년 추진실적 및 문제점

□ 추진실적

ㅇ 목표: 10.4㎞ / 15,933백만원

- 송배수관 (400㎜ 이상): 1.2㎞

- 배급수관 (350㎜ 이하): 9.2㎞

ㅇ 추진실적 (달성률): 10.15㎞ (97.6%)

- 송배수관 (400㎜ 이상): 0.87㎞ (72.1%)【사고이월 0.33㎞】

- 배급수관 (350㎜ 이하): 9.28㎞ (100.9%)

공 사 명	구경(㎜)	목표(㎞)	실적(㎞)	달성률(%)	비고
총 계	80~600	10.4	10.15	97.6
마포대로 장기사용 배수관 정비공사	500~600	1.2	0.87	72.1	사고이월
소 계	80~300	9.2	9.28	100.9%
홍은동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사	80~200	1.5	1.21	80.7
성산동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사	80~150	1.9	1.87	98.6
공덕동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사	80~200	1.7	1.70	99.7
역촌동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	80~300	1.3	1.15	88.7
서부수도사업소 관내 연간 단가 시행	80~300	2.8	3.35	119.6

□ 문제점

ㅇ 착공 전 사전절차 미이행 및 유관기관 협의 지연으로 절대공기 부족 → 사고이월 발생

ㅇ 사업계획 수립 시 적용한 예산책정 기준과 실제 공사 여건 상이

→ 사업비 과배정 및 불용액 증가

- 예산책정 기준: 주간 및 야간공사 m당 표준공사비 평균단가 적용

- 예산집행 현황

・배급수관정비공사【예산현액 / 지출액(집행률)】: 10,567백만원 / 6,123백만원(57.9%)

※ ’23년 단위공사: 주간공사 75%, 야간공사 25%

Ⅲ		’24년 목표달성을 위한 주요 검토사항

□ 착공 전 사전절차 이행 및 유관기관 협의 필요

예상문제점	교통소통대책 자문회의 결과 보완 및 재심의 시 착공 지연

ㅇ 교통소통대책 자문회의 결과, 보완요청 등 조건부여 시 재심의 완료까지 공사 착공 지연

- ’23년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사 교통소통대책수립 용역: 79일 소요

※ 교통소통대책 자문회의는 도시교통실 교통운영과 주관으로 월 2회 개최

예상문제점	굴착허가 보완 및 유관기관 추가 협의 시 착공 지연

ㅇ 도로굴착 허가 기간 조정・보완 및 유관기관 추가 협의 → 굴착허가 및 착공 지연

- 도로굴착 허가 신청 시 공사기간 협의 조정완료 후 굴착허가 신청

ㅇ 동절기 굴착 통제에 따른 조기 착공 불가

- ’23년 동절기 굴착통제 기간: ’23. 11. 15. ~ ’24. 2. 29.

□ 배정 예산 집행률 제고를 위한 사업계획 조정 필요

예상문제점	본부 시달 정비계획의 정상 추진 시에도 배정 예산 불용 가능

ㅇ ’24년 발주예정 단위사업 정비구간 대부분이 주간공사로 추진(예정)

→ 정비계획에 의한 정상적인 추진 시에도 예산 과배정으로 불용 우려가 있음

- ’24년 발주예정 단위사업 주간 및 야간 공사 현황

・주간: 2,503m(63%)

・야간: 1,460m(37%)

Ⅳ		추진계획

□ 추진방향

ㅇ 착공 전 사전절차 이행 및 유관기관 협의 완료 → 조기착공 및 준공기한 연기 방지

ㅇ 예산 과배정을 고려한 자체 사업계획 조정 → 예산 집행률 제고

□ 세부 추진계획

□ 교통소통대책용역 조기 발주 및 심의 완료

ㅇ 용역대상: 공사중 1개차로 이상 점용하고 점용기간이 20일을 초과하는 공사

ㅇ 대상공사: 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사

- 공사위치: 마포구 창천로 54 ~ 창천로 14(D=200㎜, L=438m)

ㅇ 추진계획

- 기술용역 타당성 심사: ’24. 1월

- 교통소통용역 발주 및 계약체결: ’24. 2월

- 교통소통대책 자문회의 심의: ’24. 3월

- 교통소통용역 준공: ’24. 4월

□ 도로굴착 사업계획 심의 및 유관기관 협의 철저

ㅇ 심의대상: 상수관 부설을 위해 30m 이상 도로 굴착을 수반하는 공사

ㅇ 굴착 신청 시 도로굴착 사업계획 심의 결과 준용

- 유관기관 병행굴착 필요 시 공사일정 협의 후 도로굴착 허가 신청

ㅇ 공사장별 굴착복구비 납부 철저 → 복구비 미납에 따른 허가 지연 예방

ㅇ 추진계획

- 상반기 도로굴착 사업계획 제출: ’24. 1월

- 도로굴착 허가 신청 및 복구비 납부: ’24. 2월 ~ 3월

□ 사업계획 조정을 통한 예산 집행률 제고

ㅇ 예산 과배정을 고려한 사업계획 변경 → 예산 집행 철저

- 단위공사 발주 후 사업별 과배정 예산 재조정을 위한 정비계획 변경 수립

※ 효율적인 업무 추진을 위하여 사업소 관내 장기계속 단가계약 업체를 활용한 변경 정비계획 수립

ㅇ 배정예산 지출집행률 모니터링

- 공사 착공 후 매월 예산 집행률 모니터링으로 배정 예산 집행 철저

Ⅴ		’24년 정비계획

□ 정비목표: 8.23㎞ / 13,406백만원

ㅇ 배급수관 (350㎜ 이하): 7.9㎞ (11,080백만원)

ㅇ 송배수관 (400㎜ 이상): 0.33㎞ (2,326백만원)

(단위: ㎞, 백만원)

구 분		계		단위사업			연간단가
		연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계		8.23	13,406	4	4.293	7,436	3.937	5,970
배급수관	소 계	7.90	11,080	3	3.963	5,110	3.937	5,970
	서대문구	2.63	3,700	1	1.059	1,410	1.571	2,290
	마 포 구	2.64	3,700	1	1.464	1,900	1.176	1,800
	은 평 구	2.63	3,680	1	1.440	1,800	1.190	1,880
송배수관 (사고이월)	마 포 구	0.33	2,326	1	0.33	2,326	-	-

ㅇ 정비 우선순위

- 1순위 : 누수가 많은 관로

- 2순위 : 혼탁수 및 이물질 발생 등 민원 발생 관로

- 3순위 : 간선배관 등 사고발생 시 큰 피해가 예상되는 관로

- 4순위 : 매설 연도가 오래된 관로

□ 단위사업 발주계획

구분	공 사 명	사업비 (백만원)	추진계획
			구경(㎜)	목표(㎞)
계		5,110	80 ~ 300	3,963
배급수관	2024년 대현동 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	1,410	80~300	1,059
	2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	1,900	150~200	1,464
	2024년 갈현동 외 3개동 장기사용 배급수관 정비공사	1,800	80~200	1,440

□ 추진일정

도면심사 (’24. 1월)		계약심사 (’24. 2월)		공사발주 (’24.3~4월)		계약 및 착공 (’24.4~11월)		공사준공 (’24. 12월)

□ 향후계획

ㅇ 계약심사: ’24. 2.

ㅇ 도로굴착 사업계획조정 및 굴착허가 신청: ’24. 1. ~ 2.

ㅇ 공사발주: ’24. 3. ~ 4.

ㅇ 공사시행 및 준공: ’24. 4. ~ 12.

□ 행정사항

ㅇ 공정·품질관리 및 예산 집행관리 철저

- 주간·월간 사업추진 실적관리

- 사전절차 이행 등 단계별 관리를 통한 사업 조기 완료 추진

- 세출예산 집행 철저

ㅇ 주민 불편 사항 해소 추진

- 공사 시행에 따른 소음, 생활불편 사항에 대한 사전 협의 시행

- 공사 완료 후 통수 과정에서 수질민원 최소화

ㅇ 매월 5일 추진실적 보고: 본부 누수대응과

붙임: 장기사용 배급수관 정비공사 위치도 각 1부.  끝.