문서번호	도로관리과-1129
결재일자	2024. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지하안전팀장	도로관리과장
이중호		천석기	01/17
			김만호
협 조
	재난안전정책과장			김희갑
	재난수습팀장			조현범
	주무관			윤진성
	주무관			이창민

지반침하 우려구간 '특별점검' 확대시행을 위한 재난관리기금 사용 계획

지반침하 우려구간 '특별점검' 확대시행을 위한

재난관리기금 사용 계획

2024.  1.

재난안전관리실

(도로관리과)

지반침하 우려구간 '특별점검' 확대시행을 위한 재난관리기금 사용 계획

도로관리과장 : 김만호☎2133-8150 지하안전팀장 : 천석기☎8180 담당 : 이중호☎8196

지반침하 우려구간 '특별점검' 공동(空洞)조사 확대 계획을 연내 완료하기 위하여 공동조사를 재난관리기금을 활용하여 시행코자 함.

□ 추진배경

ㅇ 우기철 극한호우 등 이상기후로 인하여 시 전역에서 불시 발생하는 지반침하에 선제적 안전관리 강화 필요

ㅇ 지반침하 우려구간 GPR 공동조사 확대 연내 완료

※ 지반침하 우려구간: 침수구간, 지하철역 주변, 노후 상·하수관 주변

□ 추진근거

ㅇ 집중호우 후에 도로 검사 확대 필요(’23.9.13. 아침 간부회의시 시장님 말씀내용)

- 도로 땅꺼짐 현상 방지를 위해 집중호우 이후 도로 검사 차량 24시간 가동 등 검사 확대 바람

ㅇ 우기철 긴급 조사 재난관련기금 지원(’23.9.14. 현안보고시 재난안전관리실장 지시사항)

- 침하우려구간에 대한 신속한 조사를 위해 재난관리기금을 활용하여 대응하기 바람

- 구체적인 지역 및 시설물 등 탐사방안을 조속히 마련하여 시행하기 바람

□ 재난관리기금 활용

ㅇ 지반침하 발생이 우려되는 지역에 대한 집중조사(특별점검) 확대

- 지반침하 위험지도에서 발췌한 침하우려구간(D, E등급) 5,000㎞

⇒ 위험지도 상 D등급 1,200㎞(2회): 2,400㎞, E등급 650㎞(4회): 2,600㎞

ㅇ 공동조사 확대에 따른 탐사장비, 전문인력 충원을 위해 탐사 공백기 발생

- 탐사장비, 전문인력 확보전 재난기금 활용 1,850㎞ 탐사용역 시행

□ 추진계획

ㅇ 사업위치: 지반침하 위험지도에서 발췌한 침하위험구간(D, E등급)

***********************************************

***************************************************************************************************

ㅇ 추진기간: 2024. 3. ~ 2024. 8.

ㅇ 추진내용: 인력, 장비 확충전 지반침하 우려구간 특별점검 공동(空洞)

조사 시행

ㅇ *********************************

ㅇ 산출근거

****		***	***	***	*******
****	*************	****	*****	**	***********
	**********	****	*****	**	***********
	*************	****	***	**	**********
	*************	******	***	**	**********
	*******	*****	***	**	**********
	*************	*	*	*	**********
************************			*	*	**********
*********************			*	*	***********
************************			*	*	***********
*********************			*	*	**********
****					*********
****					*************
*****					***********
***					*************

□ 조치계획

ㅇ 예산조치: 사회재난(지반침하) 사전 예방을 위해 재난관리기금을 활용, 지반침하 특별점검 공동조사 시행

************************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 재난관리기금 신청(도로관리과→재난안전정책과) 및 재배정(재난안전정책과): ’24. 1.

ㅇ 지반침하 우려구간 특별점검 공동조사(도로관리과): ’24. 3. ~ 8.

ㅇ 특별점검 결과보고 및 재난관리기금 정산(도로관리과): ’24. 10.

붙임  사업설명서 및 예산산출서 1부.  끝.