문서번호	시설과-235
결재일자	2024. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
이선영	이지영	이정환	01/19
			하재호
협 조

녹사평대로변 남산공원 정비사업 추진계획

2024. 1.

중부공원여가센터

(시    설    과)

녹사평대로변 남산공원 정비사업 추진계획

’91년 공원조성 이후 보도침하, 녹지화단 등 전반적으로 노후되어 시민 안전 및 경관 저해요소가 산재한 공간을 주민휴게시설 및 다채로운 화관목 식재 등 전반적인 시설을 개선하여 안전하고 쾌적한 공원으로 조성하여 시민편익에 기여코자 함.

□ 추진경위

ㅇ **********************************************

□ 사업개요

ㅇ 위    치: 남산(서울시 용산구 이태원동 728-1, 이태원주공아파트 인근)

ㅇ 사업기간: 2024. 01. ~ 08.

ㅇ 사업규모: 2,550㎡

ㅇ 사업내용: 기반시설(우배수,동선,지형)정비 및 녹지공간 재조성

- 기반시설: 산책로조성, 포장교체, 우배수체계 마련, 휴게시설 정비 등

- 조경시설: 녹지대 전면 재조성, 토양개선, 하부식생 및 매력정원조성   대형수목 전정, 기존수목 이식 등 재배치 등 전면 재조성

ㅇ 위치도 및 현황사진

이태원 주공아파트 남산2호터널 남산3호터널
사업대상지	대상지 전경	대상지 전경

ㅇ 사 업 비 : ***********************

- 예산과목 : 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

*********

내 용	물 량	단위	단 가	금 액 (단위:원)	비 고
*****				***********
****	**	***	***********	***************
****				***********
*********	******	*	********	***************
**********	****	*	********	***************
********	****	***	********	***************
**************	****	*	*******	***************
*********	**	***	***********	***************
**********	***	***	********	***************
*************	******	***	*******	***************
*********	***	***	********	****************
******	****	***	*******	****************
********	**	***	**********	****************
**************	***	***	********	***************
**************	**	***	*********	***************

□ 추진방법

ㅇ 설계용역 : 수의계약

ㅇ 시설공사 : 공개경쟁입찰(지역제한)

□ 추진일정

ㅇ 2024. 01.        : 기술용역타당성 심사 및 설계용역 발주

ㅇ 2024. 01. ~ 03. : 설계용역 시행(계약심사 포함)

ㅇ 2024. 04.        : 공사발주(입찰공고 및 적격심사 등)

ㅇ 2024. 04. ~ 08. : 공사시행

붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부

2. 용역설계서 1부(기술용역타당성 심사 전).  끝.