문서번호	토목부-1263
결재일자	2024. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
황태선		박운용	01/19
			이임섭
협조
	주무관		이재천

예비준공검사 시행계획 보고

- 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사 -

2024. 1.

도시기반시설본부

(토   목   부)

예비준공검사 시행계획 보고

- 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사 -

준공 예정인 "청계천~정릉천 자전거도로 연결공사"와 관련하여 유지관리부서와 합동으로 예비준공검사를 실시하여 향후 시설물 사무관리 위임에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

○ 건설기술진흥법 시행령 제60조의2(발주청의 업무범위)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

○ 건설공사 예비준공검사 시행 방법 개선[기술심사담당관-10083(2018.06.28.)]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

○ 공사규모 : 신설 자전거도로(연장 485m), 신설 교량(연장 30m, 폭 5.4m), 자전거도로 정비(연장 1,140m)

○ 공사기간 : '22.01. ~ '24.01.

******************

*************************************

***********************************

자전거도로 정비구간	자전거도로 신설구간

Ⅲ		예비준공검사 및 합동점검 개요

○ 일시 : '24.01.24.(수)  ※ 해당일 참석 불가한 유지 관리기관은 별도 협의하여 '24.01.26.(금)까지 점검 시행

○ 대상 : 공사 전 구간

○ 검사 및 입회자

- 도시기반시설본부 및 현장관계자

소 속	부 서	직 책	성 명	비 고
도시기반시설본부	토목부	공사관리관	***	총괄
		공사관리관	***
시공사 및 건설사업관리단	시공사	현장대리인(토목)	***
	건설사업 관리단	책임건설사업관리기술인	***
		분야별 건설사업관리기술인	***

- 시설물 유지관리기관

기 관	부 서		점검 내용	비 고
서울시	서울시설공단	청계천 관리처	자전거도로 및 산책로포장, 교량점검
			교통안전표지

○ 주요 점검사항

- 시설물 시공현황, 추가 보완사항 등

- 준공대비 미비사항 파악

Ⅳ		향 후 계 획

○ '24.01.26.까지 : 시설물 관리기관 예비준공검사 지적사항 제출

○ '24.01.29.     : 지적사항 조치결과 제출

○ '24.01.31.     : 시설물 사무관리위임 및 준공

○ '24.02.29.까지 : 준공도서 이관

붙임  1. 건설사업관리단 제출 공문 1부.

2. 예비준공검사 지적사항 제출양식 1부.  끝.