국회의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-1279
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		철도계획2팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통실장	결재
고동오		황대근	이진구	윤보영	01/22
					윤종장
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 118, 119번, 진선미의원, 기획재정위원회)

따로붙임  국회의원 요구자료 1부.  끝.

진선미 의원(기획재정위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 118번

1. 8호선 연장 사업 관련 자료요구

1. 사업 공정률 및 시운전 내역, 완료일자

- 개통 예정일

- 개통 후 이용률 예측 및 혼잡도 완화 방안 계획

- 구리시 및 남양주시 행 이전 서울시(암사) 구역 종점행 열차 운행여부, 운행 필요성 검토, 관련 민원접수 내역

요구번호 : 119번

1. 8호선 연장사업 관련 협의 요청

1. 지하철 8호선 연장 기본계획수립 내용 및 진행과정 내용

2. 8호선 연장선 관련 서울시-경기도의 각 추진 입장 및 세부 조율 등 논의 내역(추가 협의 필요사항 등)

* 서울시와 경기도의 각 부서의 해당 요구 자료를 정리 후 동일한 일자에 본 의원실 대면 설명 및 협의 요청(가능 일자 회신 요망)

□ 의원님께서 요구하신 '지하철 8호선 연장(별내선)' 사업 관련 현황을 아래와 같이 제출합니다.

1. 사업개요

ㅇ 구  간 : 서울시 강동구 암사 ~ 경기도 남양주 별내

ㅇ 규  모 : 12.91㎞, 정거장 6개소(서울 1, 경기 5)

- 서울시와 경기도가 각 사업구간 공사중(서울시 3.72㎞, 경기도 9.19㎞)

※ (서울시 구간) 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동(서울시계 2.57km + 경기도 1.15km)

ㅇ 사업비 : 1조 2,806억원 (국비 7,329, 지방비 3,842(서울 1,226, 경기 2,616), 부담금 1,635)

2. 추진현황(개통 예정일 포함)

ㅇ ’01.12	: 지하철 8호선 연장계획 발표 (건교부)

ㅇ ’06. 7	: 별내지구 광역교통개선대책 확정 (건교부)

ㅇ ’06.10	: 별내선 광역철도 예비타당성조사 완료 (기획예산처)

ㅇ ’14.12	: 기본계획 고시(국토부)  ※ 경기도가 전체노선 일괄 수립후 국토부 승인

ㅇ ’15. 9	: 기본 및 실시설계 (서울시, 경기도)

ㅇ ’16. ~ 현재	: 공사중    ※ 23. 12월말 공정율 97.1%

ㅇ ’24. 하반기	: 개통 예정

3. 혼잡도 관련(기본계획, 관계기관 논의내용, 향후계획 등)

① 그간 추진내용

ㅇ 기본계획(수요분석) 관련 서울시와 경기도간 이견

- 경기도에서 시행한 기본계획 수요분석 결과는 연장으로 인한 기존 8호선 구간의 혼잡도 증가에 대한 영향과 대책이 고려되지 않음

※ 서울시(교통공사)는 열차 증차 및 운행 횟수 증회 요청함

ㅇ 혼잡도 해소방안 수립 요청(’22.11 서울시 → 경기도, 남양주시, 구리시)

- 서울시 요청으로 경기도에서 시행한 ‘혼잡도 영향분석 용역’결과(’24. 1월) ’30년 최대 혼잡도 161.3%로 추정

② 향후 추진계획

ㅇ 경기도 시행 ‘혼잡도 용역’ 결과를 관련 전문가 자문회의 개최를 통해 검증하고, 검증결과 예비타당성조사 지침에서 정하는 혼잡도 기준(150%)을 초과하는 경우 경기도(남양주, 구리시 포함)에 혼잡도 해소를 위한 대책을 요구할 계획임

ㅇ 또한 서울시 자체적으로 암사역에서 출발하는 열차의 투입여부도 검토 예정

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	황 대 근
	☎2133-2243	주 무 관	고 동 오
	작 성 일 : 2024. 1. 19.

끝.