문서번호	도시철도설비부-771
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
강신영	배수웅	성호준	이승석		01/22
					최진석
협 조
	도시철도토목부장			윤병헌
	도시철도건축부장			박신규
	토목3과장			조규영
	궤도과장			허동
	건축공사과장			김광기
	송변전과장			문학준
	차량과장			배광희
	설비공사과장			이광주
	정보통신과장			김이곤

별내선(8호선 연장) 건설사업 철도종합시험운행 시설물검증시험 계획(안)

2024. 1.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목    차

1.	시설물검증시험 개요	1
2.	시설물검증시험의 방법 및 절차	3
3.	평가항목 및 평가기준	5
4.	시설물검증시험 일정	6
5.	시설물검증시험팀 구성	6
6.	시험차량 운행계획	7
7.	교육훈련 계획	8
8.	안전관리 계획	9
9.	비상대응 계획	14
10.	관계기관 협조사항	18

별내선(8호선 연장) 건설사업 철도종합시험운행 시설물검증시험 계획

별내선 사전점검을 완료하고 철도종합시험운행 시행지침에 따라
시설물검증시험 시행계획을 수립하고 보고드림

1				시설물검증시험 개요

□ 관련근거

ㅇ 철도안전법 제38조(종합시험운행) 같은 법 시행규칙 제75조(시기․절차 등)

ㅇ 철도종합시험운행 시행지침(국토교통부고시 제2023-705호)

ㅇ 별내선(8호선 연장) 건설사업 철도종합시험운행 계획(도시철도설비부-4752호, 2023.5.15.)

□ 시행목적

ㅇ 철도시설물의 정상작동 상태 및 안전 상태 확인

ㅇ 철도차량의 운행적합성, 철도시설과 차량 간의 연계성 검증

	사업개요
- 사 업 명: 별내선(8호선 연장) 건설사업 - 위 치: 강동구 암사동(8호선 암사역)~경기도 남양주시 별내동 - 사업규모: 연장 12.91km, 정거장 6개소(서울 1, 구리 3, 남양주 2), 시스템 분야 신설 및 개량(전력․통신․신호보안․기계․소방설비 등) - 사업기간: '16.6.~'24.6.

□ 시험개요

ㅇ 시험기간: '24.1.22.~'24.2.26.

ㅇ 시험대상: 연장 12.91km, 정거장 6개소, 현장시설물

- 대상구간 약도

- 주요 시설물

구 분	주요 시설물 현황	비 고
토 목	터널구간 : 10.513km 정거장구간 : 0.873km 기타구간(환기구, 수직구 등) : 0.898km
궤 도	본선 L=12.91km 총연장 25.964Km-서울 7.6Km, 경기도 18.364Km 분기기 : 13틀(서울 3틀, 경기도 10틀)
건 축	정거장 6개소(BN1~BN6)
송변전	인입 수전선로 19.55km 송배전선로 15.71km 22.9kV 변전소 : 4개소
전차선	본선 강체전차선로 26.8km, 정,부 급전선 4.05km Air Section 8개소, Expansion Joint 109개소
역사전기	변압기반, 배전반, MCC반 분전반, 조명제어반

구 분	주요 시설물 현황		비 고
신 호	종합관제실 개량 1식 신호기계실 6개소 신호케이블 260.966km, 신호기 26기 케이블트레이 10.848km 궤도회로 233개소, 선로전환기 20대
통 신	광케이블 47.531km 철도통합무선통신망(LTE-R), 복합통신설비 관제전화설비, 자동요금징수설비 방송설비, 화상설비, 행선안내설비, 음성안내기
기계설비	정거장 6개소 E/V, E/S, PSD, 소방 설비
차 량	6량 9편성(54칸) 최고운전속도 : 80Km/h(다만, 특히 지정한 구간에는 90운전 가능-하저터널구간)

2				시설물검증시험의 방법 및 절차

□ 항목 및 주요 시험 내용

ㅇ 항  목

총 계	선로구조물			전철전력설비	송변전	신 호	통 신	관제설비
	궤 도	기 계	PSD	전차선
37	4	2	2	2	3	5	6	13

ㅇ 주요 시험내용

시험항목	시험내용	비고
가. 선로구조물 (궤도/기계/PSD)	궤도선형검측, 레일탐상 배연 풍속시험, 대피공간 차압시험 승강장안전문 설치상태 및 기능
나. 전철전력설비 (전차선)	전차선/팬터습동 비디오 모니터링 아크측정시험

시험항목	시험내용	비고
다. 송변전	전철변전소특성시험 귀선(레일 등) 전위측정시험 유도 장해시험
라. 신호	열차검지 기능시험 자동열차감시장치 기능시험 연동장치 기능시험 자동열차제어장치(ATC) 기능시험 자동열차운전장치(ATO) 기능시험
마. 통신	교환설비 기능시험 광전송설비 기능시험 열차무선시스템 기능시험 여객안내설비 기능시험
바. 관제설비	관제실과 현장 연동장치 간 인터페이스 열차운행 제어상태 확인 관제설비 간 인터페이스 시험 관제전화설비 열차무선시스템 SCADA설비 기능시험

ㅇ 항목별 시험조건, 절차, 소요인원 및 기간, 시험기기 및 장비 등

※ 붙임 1 시설물검증시험 항목 및 시험절차서 참조

□ 상세절차

ㅇ 시험열차를 운행하면서 시험항목별 시험절차서에 의거 시설물과 차량 간의 운행적합성, 시설물 기능‧성능 등을 확인

ㅇ 전차선 급‧단전은 시설물검증시험팀장 승인을 득한 후 시행

ㅇ 착수회의 및 종료회의

구 분	착수회의	종료회의
일 시	'24.1.22(월) 14:30	'24.2.26(월) 15:00
장 소	서울시 시스템감리단 안전교육장	서울시 시스템감리단 안전교육장
참석자	시설물검증시험팀장 시험자 및 지원자	시설물검증시험팀장 시험자 및 지원자
회의내용	시설물검증시험 방법, 절차 등 협의 안전관리방안 및 안전교육 시행 기타 시설물검증시험에 관한 사항	분야별 시설물검증시험 결과 검토 보완사항 검토 및 조치계획 협의

3				평가항목 및 평가기준

□ 시험 항목 및 시험 결과 판정 기준

ㅇ 시험 항목

총 계	선로구조물			전철전력설비	송변전	신 호	통 신	관제설비
	궤 도	기 계	PSD	전차선
37	4	2	2	2	3	5	6	13

ㅇ 시험 결과 판정 기준

- 적  합: 평가 기준에 적합한 경우

- 부적합: 평가 기준에 부적합한 경우

- 보  완: 평가 기준에 미치지 않으나, 열차안전운행에 지장이 없는 경미한 사항으로 영업개시 이전에 보완이 가능한 경우

□ 부적합 및 보완 사항 처리

ㅇ 부적합: 조치완료 후 재시험

ㅇ 보  완: 영업개시 이전에 조치(시설물검증시험팀장 확인)

※ 부적합 및 보완 사항은 그 기준(관련 규정, 지침 등)과 필요성 등을 쉽게 파악할 수 있도록 기록(필요한 경우 현장사진, 도면 등 첨부)

4				시설물검증시험 일정

□ 시험 일정 및 추진계획

ㅇ 시험기간: '24.1.22.~'24.2.26.(주간/야간, 휴일 포함 32일)

※ 붙임 2. 시설물검증시험 세부일정(양식)

ㅇ 시험결과 정리 및 보고

- 시험자(분야별)는 당일 시험 종료 후 시험일지에 서명하고, 시설물검증시험팀장에게 제출

※ 붙임 3. 시설물검증시험 일지(양식) 참조

- 시험자(분야별)는 당일 시험 종료 후 시설물검증시험 결과 점검표와 부적합 및 보완사항이 있으면 조치계획서 및 세부내용을 시설물검증시험팀장에게 제출

※ 붙임 4. 보완사항 조치계획서(양식), 붙임 5. 보완사항 세부내용(양식) 참조

5				시설물검증시험팀 구성

□ 조직 및 임무

ㅇ 팀  장: 서울시 도시기반시설본부 도시철도설비부장

ㅇ 구  성: 서울시, 경기도 26명, 서울교통공사 22명

			시설물검증시험팀장 (도시철도설비부장)
시험반			체계공학 감리					지원반
❍ 반장 : 신호과장 ❍ 분야 : 토목, 궤도, 기계, 송변전, 전차선, 통신, 신호, 관제 등 ❍ 서울시, 경기도 26명, 서울교통공사 22명			❍ 시설물검증시험 조정 및 지원 ❍ 시스템 성능/요구사항 확인 ❍ 시험운행 인터페이스 상황 조정					❍ 분야 : 토목, 궤도, 기계, 송변전, 전차선, 통신, 신호, 관제 등 ❍ 감리단, 시공사, 협력업체

※ 붙임 6. 시설물검증시험팀 명단 참조

ㅇ 임  무

구 분	담 당 업 무	비 고
팀 장	시설물검증시험 총괄
시험반장	시설물검증시험 시행계획 수립 및 시행 시설물검증시험 결과 보고 등 종합 관리 시설물검증시험 운전 관련 기관별/분야별 인터페이스 협의 및 조정	업무지원:체계공학 감리원
시험반원	철도운영자와 시설물검증시험 관련하여 협의 시설물검증시험 참여자 교육 시행(항목별 시험 방법 및 안전 교육) 시설물검증시험 시험열차 고장 및 이례사항 발생 시 관계기관 연락 및 시설물검증시험팀장에게 보고 시설물검증시험 시험열차 운행 전 취급자와 시험열차 운행에 관한 협의 탑승자 통제 등 운행 전 시험열차 안전상태 확인 시설물검증시험 시험열차 운행 전 급전상태 및 운행진로 확인 시설물검증시험 일지(사진 포함) 작성 및 제출 시설물검증시험 점검표 작성 및 제출 시험열차 기관사에게 시험 개요, 운전취급 특이사항 등 사전 설명
지원반원	시설물검증시험 시행 시 시험자에게 현장 안내, 시스템 설명, 설계도서 및 각종도면 제공 등 지원

※ 탑승일정 및 명단이 변경될 경우, 시험반원은 시설물검증시험팀장에게 승인 요청하고 시설물검증시험팀장은 국토교통부(한국교통안전공단)에 제출

※ 붙임 7. 탑승자 명단(양식) 참조

※ 시험분야: 선로구조물(궤도/기계/PSD 등), 전철전력설비(전차선), 송변전, 신호, 통신, 관제설비 등

6				시험차량 운행계획

□ 시험열차 종류 및 운행횟수, 운행속도

ㅇ 시험열차: 전동차 6량 1 또는 3편성(3편성은 송변전 부하시험 시)

ㅇ 운행횟수: 총 148회 왕복

※ 시험열차 운행횟수는 시설물검증시험 항목 및 시험 여건, 상황 등에 따라 탄력 조정‧시행

ㅇ 운행속도 : 선로 최고 속도 90km/h 이하

□ 시험열차 기본운행계획

ㅇ 시험열차 운행, 차량 유지보수 및 관리 등은 철도시설관리자와 차량 제조납품 업체인 우진산전에서 실시한다.

※ 붙임 8. 시험열차 행로표 및 운행계획 참조

7				교육훈련 계획

□ 시설물검증시험 교육 시행

ㅇ 교육일시: 2024. 1. 22.(월), 14:30∼16:00(1.5시간)

※ 일정은 현장여건 및 시험 진행상황에 따라 다소 변경될 수 있음.

ㅇ 일반교육, 분야별 전문교육으로 구분하여 시행

구 분	교육시간	세부 교육내용	교육시행자	교육대상자
시설물검증시험 일반교육	45분	시설물검증시험 시행계획 시험열차 운행계획 시험결과정리 방법 등 * 착수회의 시 시행	시설물검증 시험 팀장	시험팀, 지원자
분야별 전문교육	45분	분야별 시험방법, 시험절차, 시험기준, 판정방법 등	분야별 시험책임자	시험팀 (분야별 시험자)

ㅇ 시설물검증시험팀 중 교육불참자 발생 또는 시험자가 변경되었을 경우, 시설물검증시험 철도시설관리자 및 철도운영자 주관 부서장이 전파 교육을 시행하고, 시설물검증시험팀장에 보고

□ 안전교육 시행

ㅇ 교육일시: 2024. 1. 22.(월), 16:00∼17:00(1시간)

※ 일정은 현장여건 및 시험 진행상황에 따라 다소 변경될 수 있음.

ㅇ 일반교육, 분야별 전문교육으로 구분하여 시행

구 분	교육시간	세부 교육내용	교육시행자	교육대상자
안전교육	1시간	안전관리계획 비상대응상황에 대한 대응방안 등	안전관리 책임자	시험팀, 지원자
현장 안전교육	시험 시행 전 30분	당일 시험계획 및 안전교육 시행	안전관리자 (분야별 교육 시행)	시험팀 (분야별 시험자)

※ 위험요소에 대한 확인방법 및 대책 등을 포함하여 교육시행

ㅇ 안전관리책임자(책임감리원)는 관계직원(감리단, 시공사)에 대해
안전교육 시행

ㅇ 서울교통공사 시설물검증시험 담당부서장은 관제사, 기관사 등에
대한 안전교육을 시행하고, 그 결과를 시설물검증시험팀장에게 제출

8				안전관리 계획

□ 안전관리 개요

ㅇ 안전관리 기본원칙

- 시설물검증시험 운행열차 안전운행 확보

- 분야별 시설물에 대한 안전 확보

- 사고‧장애 등 이례상황 발생을 대비한 비상복구체제 수립 및 신속한 대처

- 시험열차 운행에 지장을 주는 선로작업 원칙적 금지

- 이례사항 발생 시 신속한 보고체계 확립

- 시설물검증시험 시험자에 대한 안전교육 등 안전관리

ㅇ 적용 범위

- 별내선(8호선 연장구간 본선 및 정거장 6개소) 시설물검증시험 운행 안전 관리 업무

- 적용 기간  : 시설물검증시험 시행기간 동안

- 적용 시간대: 시설물검증시험 운행 시간(시험열차 운행계획에 따름)

ㅇ 안전관리 업무 범위

- 철도시설관리자

▷ 시설물검증시험 운행 안전관리 업무 지휘, 통제 및 감독

▷ 별내선(8호선 연장) 철도시설물 안전관리 및 작업 통제

- 철도운영자

▷ 시험열차 운행관리

▷ 시설물검증시험 구간 사고‧장애 등 발생 시 사고 복구체계에 의한 조치

▷ 시설물검증시험에 참여하는 운영 직원(관제사, 기관사 등)에 대한 직무사고예방 자체 교육 시행

□ 안전관리 조직 구성

ㅇ 안전관리 조직 및 책임

구 분	시설물검증시험 안전관리				안전관리 지원
안전관리 조직
		시설물검증시험 안전관리책임자				안전관리책임자
		안전통제반장				공구별 책임감리원 시스템 책임감리원
						안전관리자
						현장대리인
		시설물검증시험 안전관리자				분야별 안전관리자
		안전담당자				시공사 안전담당
안전관리 책임범위	시설물검증시험 안전관리 추진 시설물검증시험 참여자 안전조치 및 안전교육 시설물검증시험 시험열차 통제				공구별 비상연락망 체계유지 종합시험운행 안전관리책임자 지시사항 이행

※ 붙임 6-1. 시설물검증시험 안전관리 및 지원조직 명단 참조

ㅇ 안전관리자 역할

- 시설물검증시험 안전관리책임자(안전통제반장: 차량과장)

▷ 시설물검증시험 운행 안전관리업무(교육, 고장, 사고, 비상대응 등) 총괄

- 시설물검증시험 안전관리자(안전보건담당자)

▷ 시설물검증시험 운행 안전관리 사고방지대책 수립 시행

▷ 시설물검증시험 참여자에 대한 안전교육 시행 및 탑승관리

▷ 비상연락망 체계 확인 및 정비

- 안전관리책임자(분야별 책임감리원)

▷ 철도건설 현장 안전관리 전반에 대한 총괄

▷ 현장시설물(운행선로 확인, 출입 통제) 점검 결과 보고

- 안전관리자(현장대리인)

▷ 종합시험운행 안전관리 추진

▷ 철도시설‧장비의 안전 확보와 안전사고 예방 관리

▷ 시설물검증시험 중 이례사항 발생 시 신속한 안전조치를 시행

▷ 이례사항 발생 시 신속조치

- 분야별 안전관리자(시공사 안전담당)

▷ 사고발생 시 보고체계에 따라 신속한 보고

▷ 시설물검증시험기간 중 작업을 시행한 개소의 현장점검에 따른 시설물검증시험 착수 전 매일 불완전 요소 제거(열차운행 장애물, 화재발생 우려 요소 등)

▷ 시설물검증시험 시험자 개인보호장구 준비(안전모, 안전조끼, 안전화 등)

▷ 작업인력 및 작업차량 통제 및 철도시설물 기능 확보

□ 운전취급 절차

ㅇ 시험열차는 관제센터 관제사의 통제 하에 운전

ㅇ 기관사는 시설물검증시험팀장 및 시험자의 통제에 따라 시험열차 운전

ㅇ 시험열차에 대한 진로제어 등 운전취급은 시험자의 통제 하에 관제센터 및 신호 운전취급실에서 실시

□ 급‧단전 절차

ㅇ 시설물검증시험 시간에 급‧단전 실시

ㅇ 안전관리책임자는 전 구간 현장 안전성 확인 후 보고

ㅇ 상황실에서 운영사(서울교통공사) 입회 직원이 관제센터에 급전 요청

ㅇ 시험 완료 후 상황실에서 운영사(서울교통공사) 입회 직원이 관제센터에 단전 요청

ㅇ 급‧단전 가능 여부 확인 담당자(운영사 입회 직원) 임무

- 전차선로의 단전은 반드시 시험열차 운행 종료를 확인한 후 단전 요청

- 급‧단전 여부 등에 대한 정보를 관제센터 및 시설물검증시험팀장에게 통보

□ 작업 승인 및 통제 절차

ㅇ 선로 확인 및 출입통제 관리

- 시설물검증시험 시간에 선로 내 모든 작업 및 점검 금지

- 안전관리책임자는 매일 시설물검증시험 착수 전 시험열차의 안전운행 확보를 위해 시설물의 상태를 점검하고 그 결과를 시설물 검증시험팀장에게 보고(유선 및 무선 활용)

※ 붙임 9. 안전점검 일일보고서(양식) 참조

ㅇ 작업 승인 절차

- 긴급작업(선로작업 불가능 시간 대)

시험열차 운행 여부 등 안전에 지장이 없음을 시험팀장에게 확인 받은 후 승인 신청	➡	작업 승인(시설물검증 시험팀장)	➡	관계 직원(감리단, 시공사 포함) 선로 출입 통제 및 관련 안전조치 시행

- 일반작업(선로작업 가능 시간 대)

시험열차 운행 여부 등 안전에 지장이 없음을 확인 및 승인 신청	➡	작업 승인(시설물검증 시험팀장)	➡	관계 직원(감리단, 시공사 포함) 선로 출입 통제 및 관련 안전조치 시행

- 별도시험항목 작업

시험열차 운행 여부 등 안전에 지장이 없음을 확인 및 승인 신청	➡	안전관리 대책 등 안전관리 계획 적정성 확인	➡	관계 직원(감리단, 시공사 포함) 선로 출입 통제 및 관련 안전조치 시행
		작업 승인(시설물검증 시험팀장)

※ 붙임 9-1. 별도시험항목 안전관리계획서 참조

- 시설물검증시험팀장은 당일 모든 시험열차를 안전한 곳에 대피시키는 등 시험열차의 안전이 확보된 것을 확인 후 작업 승인

- 작업책임자는 시설물검증시험팀장에게 열차운행이 없음을 확인 후 작업에 착수하고, 작업완료 후 시설물검증시험팀장에게 작업완료 및 시설상태가 열차운행에 지장 없음을 통보

※ 붙임 10. 긴급작업 승인 요청서(양식) 참조

□ 열차 운행속도 제한 및 운행 전 확인사항

ㅇ 운행속도: 일반 시험시 25Km/h, ATO 시험시 설계속도 90km/h 이하

ㅇ 운행 전 확인사항

- 시설물검증시험 안전관리자 ➡ 안전관리책임자

▷ 전차선로 가압에 따른 감전사고 등 시험에 지장을 주는 위험요소 확인 및 관리 조치

- 안전관리책임자 ➡  시설물검증시험팀장

▷ 매일 시설물검증시험 착수 전 시험열차의 안전운행 확보를 위해 현장시설물 상태점검 실시 및 결과 보고

▷ 시험열차 운행에 지장을 주는 사항 발생 시 원인 및 조치계획 보고

※ 시설물검증시험 안전관리자는 사고가 재발되지 않도록 대책 수립 및 시행

※ 붙임 11. 위험요소 확인방법 및 대책(양식) 참조

□ 시설물 기능 확보 및 장애 발생 시 조치 절차

ㅇ 분야별 안전관리자는 시설물 기능 및 성능 확보

ㅇ 시설물검증시험 기간 중 발생된 장애에 대해 최초 발견한 시설물검증시험 관계자(시험자, 기관사 등)는 즉시 유선 또는 무선으로 관제센터 관제사 및 시설물검증시험팀장에게 보고 후 서면 제출

※ 붙임 12. 시설물검증시험 장애발생 조치 보고(양식) 참조

ㅇ 시설물검증시험팀장은 보고받은 장애, 사고 등 이례사항에 대하여 안전관리자에게 통보하고, 안전관리자는 점검 및 조치 후 시설물검증시험팀장에게 조치결과 통보

ㅇ 시설물검증시험팀장은 발생된 장애에 대해 장애현황기록부에 기록 및 관리

※ 붙임 13. 장애발생현황 기록부(양식) 참조

9				비상대응 계획

□ 사고 처리 및 복구 등 비상상황 대응계획

ㅇ 사고 종류

- 안전사고: 철도건설공사와 관련하여 사상자가 발생된 사고

- 열차운행사고: 시험열차 운행 관련 인명의 사상 또는 시설물의 파손 등에 대한 사고(시험열차의 충돌, 탈선, 파손 등)

- 열차운행장애: 시험열차 운행에 지장을 주는 장애(차량 파손, 차량 화재, 선로 장애, 신호 장애, 기능 이상 등)

ㅇ 사고 보고 및 수습

- 시설물검증시험 중 사고발생 시 보고 체계에 따라 조치

- 최초발견자는 사고 즉시 시설물검증시험 안전관리자 및 관제센터 관제사에게 구두(전화) 보고 또는 초동 보고

※ 붙임 14. 사고장애보고(양식) 참조

ㅇ 보고 종류

- 초동보고: 시험열차 운행 관련 사고는 시설물검증시험팀장이, 관련되지 않는 사고는 분야별 안전관리자가 발생 30분 이내에 유선 및 무선으로 일시·장소·사고개요·피해내용 등을 간략하게 보고

- 초기보고: 사고 발생 후 1시간 이내에 사고내용을 서면으로 작성하여 e-메일, SNS 등으로 하는 보고

- 중간보고: 사고수습 및 복구사항 등을 사고 수습·복구기간 중에 1일 2회 또는 수습상황 변동 시 서면으로 작성하여 하는 보고

- 종결보고: 시설물검증시험 안전관리책임자가 원인조사 후 최종적으로 하는 보고

□ 사고보고 및 복구 체계

ㅇ 보고 체계

		서울시 도시기반시설본부
		본부장 02-6438-2008
		도시철도국장
		사업주관국장 02-6438-2505
		도시철도설비부장		안전관리	안전관리책임자
				지원
		사업주관부장 02-6438-2708			책임기술자 이재룡 *************
유관기관		사고현장			철도운영자
소방서, 경찰서, 병원 등	필요시	건설현장의 장 (관제센터, 시설물검증시험팀)		철도사고 등	역, 관제실

- 유관기관, 철도운영자 연락처

유관기관		철도운영자
암사119안전센터	02-3426-2119	부장	김기준	*************
강동소방서	02-6981-7679	부장	양용석	*************
구리소방서	031-570-6119	부장	최찬옥	*************
남양주소방서	031-590-0119	부장	박준홍	*************
강동경찰서	182	차장	임소희	*************
구리경찰서	182	차장	정재봉	*************
남양주경찰서	182	과장	손진석	*************
강동연세병원	02-3426-7575	대리	남승현	*************
강동성심병원	02-2224-2358
한양대학교구리병원	031-560-2051
윤서병원	031-553-6650
다산바른본정형외과	031-553-5566
한양병원	031-519-0119

ㅇ 복구 체계

				대책본부장
				도시철도국장
상황반				복구반							지원반
도시철도설비부장				도시철도토목부장							공구별(시스템) 책임감리원
				현장복구지휘자
				건설현장의 장 - 책임건설사업관리자 - 현장대리인
상황조			장비 동원조					인력 동원조					지원조
시공사 공무담당자			시공사 장비담당자					시공사 공사담당자					시공사 자재담당자

□ 비상상황 대응절차

ㅇ 인명사고 발생 시

- 사고보고체계에 따라 즉시 보고 및 필요시 유관기관(경찰서, 소방서, 병원 등)에 신고(시설물검증시험 안전관리책임자, 시설물검증시험 안전관리자)

- 부상자 구조 및 구호 활동(기관사, 시험자)

- 시험열차 차량구름방지 조치 등 안전조치(기관사)

ㅇ 시험열차 탈선ㆍ충돌 발생 시

- 철도공사의 운전 및 안전관리 규정에 따라 사고 처리

- 사고보고체계에 따라 즉시 보고 및 필요시 유관기관(경찰서, 소방서, 병원 등)에 신고(시설물검증시험 안전관리책임자, 시설물검증시험 안전관리자)

- 부상자 구조 및 구호 활동(기관사, 시험자)

ㅇ 차량화재 발생 시

- 시험열차에 비치된 소화기로 화재 초기진압(발견자, 시험자 등)

- 사고보고체계에 따라 즉시 보고 및 필요시 유관기관(경찰서, 소방서, 병원 등)에 신고(시설물검증시험 안전관리책임자, 시설물검증시험 안전관리자)

- 초기 화재진압 실패 시 차내 안내방송을 통해 화재발생 전파 및 탑승자 안전대피 유도(기관사, 시설물검증시험 안전관리자)

- 후속사고 예방 : 인근 운행 차량 통보 등(기관사)

ㅇ 차량고장 발생 시

- 관제사(또는 운전취급자)에게 즉시 무선 또는 유선으로 연락하고 시험열차 정차 및 주차제동 등 차량구름방지 조치(기관사)

- 차량고장 응급조치 및 운행 불능 시 구원 요청(기관사)

- 구원열차 운전 통보 후 시험열차의 이동을 금지하고, 구원열차 도착 전 복구하여 시험열차의 운전이 가능할 경우 관제사(또는 운전취급자)의 지시에 따라 조치

- 차량탑승자는 가까운 교량 끝단 토공부 또는 터널 출입구로 도보 대피 (기관사, 시설물검증시험 안전관리자)

ㅇ 장애 발생 시

- 열차운행이 불가한 장애 발생 시 기관사에게 통보(운전취급자)

- 안전한 곳에 시험열차 정차 및 주차제동 등 차량구름방지 조치(기관사)

- 장애현황 시설물검증시험팀장에게 보고(안전관리자)

- 장애요소 파악 및 분석, 조치 후 시설물검증시험팀장에 통보(시설물검증시험 안전관리자)

ㅇ 지진 발생 시

- 지진 위험을 통보 받았을 때 긴급 정차조치(기관사)

- 팬터그래프 하강 및 제어회로 차단 등 응급조치(기관사)

- 차량 탑승자 대피 유도(기관사, 시설물검증시험 안전관리자)

□ 철도운영자 등의 규정 및 절차와 안전관리계획 준수여부 확인 절차

ㅇ 시험열차 안전관리 및 탑승관리

- 시험자는 시설물검증시험 시험열차 운행 전 운행에 관한 사항을 사전 협의

- 시설물검증시험 안전관리자는 탑승자를 통제하며, 시험자가 탑승하지 않을 경우 시험을 중단하고 시설물검증시험팀장에게 즉시 보고

- 승인되지 않은 자의 시험열차 무단 탑승을 금지하며, 시설물검증시험팀장에게 사전승인 후 시험열차 탑승

※ 붙임 15. 시험열차 탑승 승인요청서 및 승인서(양식) 참조

- 시험자는 시험열차 고장 및 이례사항 발생 시 관계기관 연락 및 시설물검증시험팀장에게 보고

- 시험자는 시험열차 운행 전 탑승자 및 지원자에게 시험 개요, 시험 방법, 시험과 관련된 특이사항 등을 설명

ㅇ 안전관리계획 준수여부 확인 절차

- 안전관리책임자는 선로 상태 확인, 운전취급자와 통신 상태 확인, 전차선 급‧단전 상태 확인, 시험관계자 탑승 확인, 시험준비 상태 확인 후 안전점검 일일 보고서를 작성하여 시설물검증시험팀장에게 매일 보고

※ 붙임 9. 안전점검 일일보고서(양식) 참조

10				관계기관 협조사항

□ 서울교통공사

ㅇ 시험열차 운행에 따른 운전 명령 처리 방법 및 안전교육 실시

ㅇ 시험열차 운행계획 검토 및 확인

ㅇ 시험열차 운행은 관제센터 관제사 통제하에 취급

□ 안전관리책임자 및 안전관리자

ㅇ 시설물검증시험 시 안전점검 일일 보고서 제출(당일 08:30까지)

※ 심야시간 차량운행시에는 전일 18시까지 네이버 밴드에 공지

ㅇ 시설물검증시험 안전관리 추진

ㅇ 철도시설‧장비의 안전 확보와 안전사고 예방 관리

ㅇ 시설물검증시험 중 이례사항 발생 시 신속한 안전조치를 시행

ㅇ 현장시설물(운행선로 확인, 출입통제) 점검 결과 보고

□ 분야별 안전관리자

ㅇ 사고발생 시 보고체계에 따라 신속한 보고

ㅇ 작업을 시행한 개소의 현장점검에 따라 시설물검증시험 착수 전 매일 불완전 요소 제거

ㅇ 시설물검증시험 관계자 개인보호장구(안전모, 안전조끼, 안전화 등) 준비 여부 확인

ㅇ 작업인력·작업차량 통제 및 철도시설물 기능 확보

붙임  1. 시설물검증시험 항목 및 시험절차서 1부

2. 시설물검증시험 세부일정 1부

3. 시설물검증시험 일지(양식) 1부

4. 보완사항 조치계획서(양식) 1부

5. 보완사항 세부내용(양식)

6. 시설물검증시험팀 명단 1부

6-1. 시설물검증시험 안전관리 및 지원조직 명단 1부

7. 탑승자 명단(양식) 1부

8. 시험열차 운행 행로표 1부

9. 안전점검 일일보고서(양식) 1부

9-1. 별도 시설물검증시험 점검항목 안전대책(안) 1부.

10. 긴급작업 승인 요청서(양식) 1부

11. 위험요소 확인 방법 및 대책(양식) 1부

12. 시설물검증시험 장애발생 조치 보고(양식) 1부

13. 장애발생현황 기록부(양식) 1부

14. 사고장애보고(양식) 1부

15. 시험열차 탑승 승인요청서 및 승인서(양식) 1부.  끝.