문서번호	급수운영과-1093
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
박기련	양재덕	이규희	01/22
			박기용
협 조
	행정지원과장		최광운
	시설관리과장		성기옥
	주무관		김지훈

'24년 소블록 배수관 세척사업 추진계획

2024. 1. 19. (금)

강동수도사업소

(급수운영과)

'24년 소블록 배수관 세척사업 추진계획

시설관리과장 : 이규희☎3146-5140 시설운영팀장 : 양재덕☎5141 담당 : 박기련☎5150

관세척 법제화 시행 및 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급하고 수질사고를 방지하기 위한 소블록 배수관 세척 추진계획을 보고 드림

Ⅰ		추진배경

□ '19년 문래동 수질사고로 인한 상수도관 세척 및 관망 관리 필요성 대두

□ 수도법 개정·시행('21. 1. 4.)

ㅇ 수도법 제21조의2(상수도관망의 관리) 및 동법 시행령 제34조의 3

- 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부고시 제2021-43호)

제2조(정의) 2. 관세척이란 상수관로 내부에 기존 도장재의 손상없이 침전물, 녹, 슬라임 또는 부식생성물 등을제거하여 수질을 개선하는 것을 말한다.

제4조(상수도관망시설의 운영 및 유지관리계획의 수립)

② 제1항제1호에 따른 관세척은 송수 및 배수관로에 대해 최초 매설 후 10년 이내 1회 이상 시행해야 한다.

Ⅱ		사업개요

□ 사업기간: '24. 1.~ '24. 11.

□ 사업내용: 소블록 배수관 세척으로 관내면에 침적된 물 때(슬라임) 제거

□ 사업대상: 33개 소블록(기간제노동자 32개 소블록, 세척용역 1개 소블록)

□ 총사업비: ******

□ 추진방법 ┌ 기간제노동자를 통한 소블록 면단위 물세척 추진

└ 관망관리대행업을 통한 세척 용역 시행

Ⅱ		'24년 추진계획

□ 기간제노동자를 통한 소블록 면단위 물세척 추진

ㅇ 채용인원: ****************

ㅇ 사업기간: '24. 4. ~ '24. 11.

ㅇ 사업대상: ******************

ㅇ 사업비: ******

일반 물세척 개념도		공기주입 물세척 개념도

ㅇ 공기주입 배수관 물세척: 20개소

- 공기주입구를 설치하여 고압의 공기를 관 내부에 주입하여 세척

<공기주입 장치를 통한 관세척 개념도>

공기방울

압축공기

수돗물

제수밸브(잠금)

소화전(퇴수)

제수밸브 조절

(세척수 공급)

H

공기주입구

(새들설치)

공기주입장치

ㅇ 관말 정체수 수질관리(취약관로 12개소, 3.3km)

- 추진방법: 주기별 반복퇴수(기간제노동자 시행)

- 기존 대상 30일에 1회 퇴수 실시

<관말 정체지역 예시>

ㅇ 중점관리지역 관리

- 선정방법: 수도법 제21조의 3 제1항 및 2항에 의거 노후관 매설비율, 수질민원, 수질조사 결과 등, 사고발생 우려지역 등을 선정

· 기존 취약관로에서 중점관리 대상 선정(5개소)

- 주요내용: 월 2회 수질검사 실시

- 행정지원과 수질팀: 국가상수도 정보시스템 입력·관리

※ 검사항목: 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 동, 아연, 철, 망간, 염소이온, 잔류염소, 탁도(11항목)

□ 관망관리대행업을 통한 세척용역 시행

ㅇ 기    간: '24. 1. ~ '24. 11.

ㅇ 대    상: **************************

ㅇ 사 업 비: ******

ㅇ 세척방법: 관망관리대행업 관세척 전문업체를 통한 세척

ㅇ 세척공법: 피그 및 맥동류

ㅇ 발주방법:「협상에 의한 계약」으로 사업소에서 용역 발주

- 상수도관망관리 대행업 면허 보유자로 제한

- 제반공사: 사업소 계약되어 있는 연간단가 업체

※ 사업소 실정에 따라 누수복구, 급수공사, 시설물 업체 활용

- 감리수행: 상수도공사 건설사업관리용역사

Ⅲ		향후계획 및 행정사항

□ 향후계획

ㅇ 기간제노동자를 통한 소블록 면단위 물세척 추진

- 기간제노동자 채용 및 차량임차 계약             : '24. 3.

- 소블록 배수관 물세척 시행                      : '24. 4. ~ 11.

- 소블록 배수관 물세척 추진결과 보고             : '24. 12.

ㅇ 관망관리대행업을 통한 세척 용역 시행

- 용역발주 및 계약체결                           : '24. 1. ~ 3.

- 작업구 등 시설물 설치                          : '24. 4. ~ 6.

- 세척작업 시행                                  : '24. 6. ~ 10.

- 용역 성과품 작성 및 준공                       : '24. 11.

□ 행정사항

ㅇ 업무협조 사항(행정지원과 수질팀)

- 수질검사 교육(4월 1일)시행 협조

- 수질검사 장비 대여

- 취약관로 대상 월별 수질검사 시행하여 통보(급수운영과, 시설관리과)

ㅇ 급수운영과 및 시설관리과(업무분담)

- 물세척 추진계획 수립 및 기간제노동자 채용, 임금지급, 등 총괄(급수운영과)

- 과별 물세척담당 지정 관리 운영

- 물세척 사업추진시 취약관로, 물세척 퇴수수량은 공공용수에 반영

- 각 과별 지역 담당자(물세척관리)시스템에 추진실적 입력

ㅇ 소블록 물세척 및 취약관로 실적 매월 10일 본부 보고

붙임  1. '24년 소블록 배수관 세척사업 추진계획 1부.

2. 소블록 물세척 대상(32개소) 1부.

3. 취약관로 관리대상 1부.  끝.