문서번호	정수시설과-816
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		김영준	01/23
			전종원
협조
	주무관		박소현

풍납취수장 환경개선 소방공사 계획

2024. 1.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 환경개선 소방공사 계획

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5677

풍납취수장 환경개선 공사의 일부인 풍납취수장 소방시설물 설치공사를 실시하여 시설물의 화재를 예방하고 근무자의 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 소방시설공사업법 제12조

ㅇ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제11조

ㅇ 풍납취수장 사무실 환경개선 계획(정수시설과-5600, '21. 6. 24.)

※ 소방공사는 장기계속공사인 건축, 전기공사와 별개로 단년도 공사임.

□ 추진배경

ㅇ (현  황) 준공 당시(1991년 8월)의 소방관련 법령에 의거 소방시설이 현행 법령 대비 대부분 미설치 되어있음

ㅇ (개  선)「풍납취수장 환경개선 리모델링 공사」추진시 개정된 최신 소방설비의 법적 기준을 충족할 수 있도록 소방공사 추진

□ 추진경위

ㅇ '21. 6. 24. : 풍납취수장 사무실 환경개선 계획 수립(예산요구방침)

ㅇ '22. 5. 26. : 풍납취수장 환경개선 및 전기설비교체 실시설계용역 착수

ㅇ '22. 10. 22. : 실시설계용역 준공

ㅇ '23. 6. 1. : 풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사 착공(~'24. 5.)

ㅇ '23. 11. 1. : 풍납취수장 환경개선공사(건축) 착공(~'24. 4.)

Ⅱ		사업개요

□ 풍납취수장 소방설비 현황(기존)

ㅇ 전기소방분야

- 자동화재탐지설비 : 화재감지기 12EA, 소화가스 방출표시등 1EA

ㅇ 기계소방분야

- 소화설비 : ABC 수동식 소화기 30EA, 청정소화기 3EA

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 풍납취수장 환경개선 소방공사

ㅇ 공사위치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 41길 108, 풍납취수장

ㅇ 공사규모 : 풍납취수장 지하1층~지상2층 (연면적: 2,661.8㎡)

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 120일 이내

ㅇ 공사내용 : 자동화재탐지설비, 옥내소화전설비 신설, 소화기 신설 및 이설 설치

□ 소방설비 설치 계획(신규)

전기소방	자동화재 탐지설비	·화재수신반(P형 1급 30회로) ·발신기(P형 1급 발신기 Set) ·화재감지기(연기감지기, 열감지기, 불꽃감지기)
	피난설비	·유도등(피난구 유도등, 통로유도등) ·비상조명등
기계소방	소화설비	·소화기(분말소화기, 자동확산소화기) ·옥내소화전(주펌프, 충압펌프, 저수조 포함)

Ⅲ		시행계획

□ 공사 시행

ㅇ 건    명 : 풍납취수장 환경개선 소방공사

*******************

********************************

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 정비, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

ㅇ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 입찰참가자격 : 소방시설공사업법에 의한 [전문소방시설공사업] 또는 [일반소방시설공사업(기계)] 면허와 [일반소방시설공사업(전기)] 면허를 동시에 보유한 업체로 입찰공고일 전날(낙찰자는 계약체결일, 적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 주된 영업소가 서울특별시 소재인 업체

□ 관급자재 구매

ㅇ 소화용수 물탱크(부속자재 포함) 구매

******

***************************************************************************************************************************************************

***************************

**********************

**************

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 정비, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

□ 예산현황

(단위: 천원)

***************************************************************************************

□ 향후일정

ㅇ '24. 1. : 본부 계약심사 의뢰 및 공사 발주

ㅇ '24. 2. : 공사 계약 및 착공

ㅇ '24. 2. ~ 5. : 공사 시행 및 준공

붙임  설계도서 1부.  끝.