아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연장 의뢰[로봇과학관 건립 정화조공사]

우리 본부에서 시행 중인『로봇과학관 건립 정화조공사』와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 로봇과학관 건립 정화조공사

2. 변경내용

계약건명 (계약번호)	계약자	차수	계약금액(원)	준공납품기한
				당초	변경(연장)
***** ****************	*********	**	***********	***********	***********

3. 변경사유

- 선행공종(건축)인 건축공사 지연에 따른 후속공종(정화조공사) 준공기한 연장

붙임  1. 방침서 각 1부.

2. 합의서 각 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김세익		도로설비과장	곽용길		설비부장	01/30
신용휴
협조자
시행	설비부-1919	(	2024. 1. 30.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2344	/전송	02-6438-2399	/	openland88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)