아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경에 따른 계약의뢰(2023년-1 중구 관내 상수도공사, 2회)

우리 사업소에서 시행하는 『2023년-1 중구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 계약물량 증감 발생에 따라 다음과 같이 설계변경(2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2023년-1 중구 관내 상수도공사(장기계속 단가계약)

2. 계 약 자: **************

3. 공사개요: 관로부설(D=15mm ~ 300mm, L=1,110 m)

4. 계약기간: 2023. 10. 19. ~ 2024. 6. 30.

5. 설계변경 내역                                                      (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	***********	***********	-	물량 변경 (계약금액 변경 없음)
공급가액	***********	***********	-
부 가 세	**********	**********	-

※ 설계변경 세부내역 : 따로붙임 참조

6. 설계변경 사유: 시공물량 증·감, 신규 공종 및 신규 자재 발생

7. 예산과목

가. 물 전문기관 역량강화-세입증대 및 시민편익 증진-급수공사(33201)-신설공사비(배급수비)

나. 안전하고 안정적인 아리수공급-맑은 물 길 조성-장기사용 송배수관(400㎜이상)정비(구축물)

다. 안전하고 안정적인 아리수공급-맑은 물 길 조성-장기사용 배급수관(350㎜이하)정비(구축물)

라. 안전하고 안정적인 아리수공급-맑은 물 길 조성-노후밸브 정비(구축물)

마. 안전하고 안정적인 아리수공급-시설물 관리 최적화-배수지 내부방식(배급수비)

바. 안전하고 안정적인 아리수공급-세계 최고 수준의 유수율 유지관리-상수도관 누수복구(배급수비

붙임  1. 설계변경 시행 품의 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 합의서 1부.

5. 설계변경 심의 의결서 1부.

6. 중구 관내 상수도공사 설계변경 계획(안) 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	성영한		급수관리팀장	代이한수		급수운영과장	01/29
김상웅
협조자	주무관	정은희
시행	급수운영과-1540	(	2024. 1. 29.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2179	/전송	02-3146-2189	/	chak2524@seoul.go.kr	/	부분공개(5)