문서번호	정수시설과-1113
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		김영준	01/30
			전종원
협조

풍납취수장 환경개선 통신공사 계획

2024. 1.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 환경개선 통신공사 계획

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5678

풍납취수장 환경개선 공사의 일부인 통신공사를 실시하여 취수장의 통신설비 개량 및 직원의 근무환경을 개선하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

ㅇ 정보통신공사업법 제25조(도급의 분리)

ㅇ 풍납취수장 사무실 환경개선 계획(정수시설과-5600, '21. 6. 24.)

ㅇ「2024년 투자사업」풍납취수장 전기설비 교체(정수시설과-8009, '23. 7. 24.)

□ 추진배경

ㅇ 통신공사는「정보통신공사업법」제25조에 의거 분리발주 하여야 하므로, "풍납취수장 환경개선 리모델링 공사(2차수)" 일정에 맞추어 2024년 통신공사(단년도) 추진

□ 추진경위

ㅇ '21. 6. 24. : 풍납취수장 사무실 환경개선 계획 수립(예산요구방침)

ㅇ '22. 5. 26. : 풍납취수장 환경개선 및 전기설비교체 실시설계용역 착수

ㅇ '22. 10. 22. : 실시설계용역 준공

ㅇ '23. 6. 1. : 풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사 착공(~'24. 5.)

ㅇ '23. 11. 1. : 풍납취수장 환경개선공사(건축) 착공(~'24. 4.)

Ⅱ		사업계획

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 풍납취수장 환경개선 통신공사

ㅇ 공사위치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 41길 108, 풍납취수장

ㅇ 공사규모 : 풍납취수장 지하1층~지상2층 (연면적: 2,661.8㎡)

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 120일 이내

ㅇ 공사내용 : 통신단자함, 시스템박스 등 통신설비 철거·신설

□ 시행계획

ㅇ 건    명 : 풍납취수장 환경개선 통신공사

******

*****************************************

***********************************

**********************

******************************************************************

******************************************

*****************

******************

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 정비, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

□ 향후일정

ㅇ '24. 2. : 공사 발주 및 계약

ㅇ '24. 2. ~ 5. : 공사 착공 및 준공

붙임  1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

2. 설계도서(설계내역서, 도면, 시방서) 1부.  끝.