문서번호	급수운영과-1546
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
박기련	양재덕	이규희	01/30
			박기용
협 조
	시설관리과장		성기옥
	시설운영팀장		代송정호
	급수관리팀장		김종섭
	주무관		김병국

'24년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획

2024. 1. 30. (화)

강동수도사업소

(급수운영과)

'24년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획

급수운영과장 : 이규희☎3146-5140 급수운영팀장 : 양재덕☎5141 담당 : 박기련☎5150

상수도 블록시스템을 체계적으로 구축하여 효율적인 관망관리와 재해·재난 등 비상 상황 시에도 피해지역을 최소화함으로써 안정적 급수 환경 조성

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

ㅇ 2040 서울시 수도정비기본계획 및 무단수급수체계 구축사업 추진계획

ㅇ 배수지 유효공급시간 개선계획(배수과-20203, ’22. 4. 4.)

ㅇ 공동구 상수관로 정비 등 복선화 계획(배수과-24042, '22. 8. 24)

ㅇ 2024년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획(배수과-11659, '23. 12. 29)

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: '24. 1.~24. 11.

ㅇ 사 업 비: ********

ㅇ 사업내용: 관로 부설(D300mm, L=0.6km), 시설물 설치등

- 중블록 구축: 시설물 설치등

- 공동구 상수도관로 복선화: 가락동동구 대체관로 부설

□ '23년 추진실적

ㅇ 사업기간: '23. 1.~11.

ㅇ 총사업비: ********

ㅇ 추진결과

구 분	공 사 명	구경 (㎜)	연장 (km)	사업비 (백만원)	사업 기간	비 고
계		*******	****	*****
수도관망 블록시스템	********************	***	****	*****	********	시설관리과
공동구 복선화	***************	***	***	*****	********	급수운영과

****************************************************************

Ⅱ		'24년 추진계획

□ 추진개요

ㅇ 정비계획: 관로부설(D300mm, L=0.74km), 시설물 설치등

ㅇ 소요예산: ********

ㅇ 사업내용

구분	사업내용	구경 (㎜)	연장 (km)	사업비 (백만원)	사업 기간	비 고
계		***	****	*****
중블록 구축	*******	*	*	***	********	*********** *********
공동구 대체관로	***** **********	***	****	*****	********	******* *****

□ 추진일정

구분	추진계획	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	도면 및 설계 심사
2	교통소통대책 용역 및 도로굴착 승인
3	공사발주, 관급자재 구매
4	공사계약 및 착공(시행)
5	공사준공

ㅇ 설계도면 심사(사업소 → 본부) : '24. 1. 30.

- 배급수관정비공사 설계지침 반영, 과다설계 등 적정성 여부

ㅇ 교통소통대책 용역 발주, 공동구 인접공사에 따른 유관부서 협의,

도로굴착 승인 : '24. 1.~2.

- 교통소통대책 기술용역 타당성 심사(사업소 → 기술심사담당관), 계약심사

- 공동구 인접공사에 따른 구조물 영향 검토 : 시설공단공동구 관리처

- 도로굴착 심의 조정 및 굴착승인(사업소 → 송파구청)

ㅇ 공사발주, 관급자재 구매 : '24. 2.~3.

- 계약심사(사업소 → 본청 계약심사과), 공고의뢰(사업소 → 본청 재무과)

- 관급자재 구매(사업소 → 수도자재관리센터)

ㅇ 공사시행(공사계약 및 착공) : '24. 3.~11.

- 매월 초 월간 정비실적 보고 및 공정관리(사업소 → 본부)

ㅇ 공사준공(설계변경 및 준공시행) : '24. 11.

Ⅲ		행정사항

□ 공정·품질 등 관리

ㅇ 사업추진 실적 관리를 통한 성과 달성

- 추진실적 보고: 본부 배수과 월보 제출

ㅇ 공사장별 월 1회 이상 점검 시행

- 공사자재(KC인증), 품질시공, 안전 등 공사장 관리 실태 순회 점검

ㅇ 공사 중 안전사고 예장을 위한 교육 시행(시공사, 감리사)

ㅇ 공사시행 전·후 필요한 선행절차 이행 철저

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 기간 최소화

- 도로굴착 승인 및 유기관기관 협의 등 병행 추진

- 사전절차 이행 등 단계별 관리를 통한 사업 조기 완료 추진

□ 효율적 예산 집행

ㅇ '24년 상반기 내 조기 집행 시행

- 조기 발주 및 계약 이후 상반기 내 선급금 제출

- 조달청 하도급지킴이를 통한 월별 노무비 등 지급

- 기타 도로복구비 선납

****************************

붙임  1. 본부 방침서 1부.

2. 2024년 상수도 블록시스템 공급체계 사업현황 1부.  끝.