문서번호	급수운영과-1521
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
전소영	김윤환	代김윤환		01/31
				김정선
협 조	시설관리과장		조임남
	시설운영팀장		오영진
	주무관		장준혁
	주무관		권희선
	주무관		홍성미

2024년 상수도관 세척 추진계획

2024. 1.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 상수도관 세척 추진계획

급수운영과장 : 이용구☎3146-4540 급수운영팀장 :김윤환☎4554 담당 : 전소영☎4552

고도정수 처리된 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급하고 수질사고를 방지하기 위한 선제적인 상수도관 세척 추진 계획을 보고드림

Ⅰ		추진근거

ㅇ 수도법 제21조의 2(상수도 관망의 관리) 및 같은법 시행령 제34조의 3(상수도관망관리에 관한 업무)

- 수도사업자는 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지․관리하여야 함

ㅇ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부고시 제2021-43호)

ㅇ ’24년 대형 상수도관 세척사업 추진계획(본부 급수운영과-11103(’23.12.28.))

ㅇ ’24년 소블록 배수관 세척사업 추진계획(본부 급수운영과-11104(’23.12.28.))

Ⅱ		2023년 추진실적

□ 대형 상수도관 세척

ㅇ 본부 추진사업으로 ’23년 비대상(서부, 강서, 강동, 동부, 북부, 강남 시행)

****************************************************

□ 소블록 배수관 세척

ㅇ 기간제노동자를 통한 소블록 면단위 세척

구분	소블록 세척	공기주입 세척	취약관로 세척
목표	****	****	****
실적	****	****	****
집행률	****	****	****

ㅇ 관망관리대행업 전문업체를 통한 세척 용역

대상	사업개요	추진실적	집행률	공법
낙성대03-03 소블록	********************	********************	****	******

Ⅲ		2024년 사업개요

□ 대형 상수도관 세척

ㅇ 사업기간 : ’24. 1. ~ 12.

ㅇ 세척규모 : ***************************

ㅇ 소요예산 : ******(현장 여건에 따라 추가 배정)

- 예산과목 : 안전하고안정적인아리수공급, 맑은물길조성, 대형상수도관세척, 수선유지교체비

□ 소블록 배수관 세척

ㅇ 기간제노동자를 통한 소블록 면단위 세척

- 사업기간 : ’24.4.1. ~ 11.30.(8개월)

- 소요예산 : ******

‣ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 맑은물길 조성, 소블록 배수관 세척

- 사업목표 : *** 소블록 내 배수관(D=80~350mm)

구분	소블록 세척	공기주입 세척	취약관로 세척
목표	****	****	****

※ 연차별 추진계획(5년 주기 시행)

구분	계	2021	2022	2023	2024	2025
소블록(개소)	***	**	**	**	**	**
사업비(백만원)	*****	***	***	***	***	***
기간제 노동자(명)	**	*	**	**	*	*

ㅇ 관망관리대행업 전문업체를 통한 세척 용역

- 사업기간 : ’24.1. ~ 12.

- 소요예산 : ******

‣ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 맑은물길 조성, 소블록 배수관 세척

- 사업대상 : 상도03-07소블록 내 배수관(D=80~300mm, L=4,357m)

※ ’22년 본부 시범사업, ’23년 4개 사업소(중부, 북부, 남부, 강동) 시범운영 후 ’24년부터 추진

Ⅳ		세부 추진계획

① 대형 상수도관 세척

□ 세척대상 관로(*********************)

연번	구 간	관로현황			부설 년도	중블록	비고
		관경	연장(m)	관종
	**		*****
1	******************	***	***	**	***	****	관악
2	**********************	***	*****	**	***	***	금천
3	****************	***	***	**	***	***	영등포
4	***********	***	***	**	***	***	영등포
5	*************	***	*****	**	***	***	영등포
6	*************	***	***	**	***	***	동작
7	*************	***	***	**	***	***	동작

□ 추진절차

ㅇ 공사․용역 분리 시행

- 본  부 : 세척 용역 발주 및 세척 시행 등 전반적인 사업관리

- 사업소 : 수계전환(사전 배관공사 포함) 및 작업구 설치공사 등

→ 사업소 연간단가 업체 활용하여 지역담당 협의 및 작업지시

ㅇ 세척작업 세부절차

계 획			착 수									준 공
본 부			본 부			사업소			용역사			본 부
		‣			‣			‣			‣
· 사업계획수립 · 용역 발주			· 세척계획 검토 · 추진일정 점검 · 용역 계약 등 관련 사항			· 수계전환및단수 · 도로굴착허가 · 작업구 설치			· 세척계획서 작성 · 단수계획 및 홍보 · 세척시행 및 수질검사 · 완료보고			· 결과보고 · 용역준공

② 소블록 배수관 세척

□ 기간제노동자를 통한 소블록 면단위 세척

ㅇ 대   상 : *** 소블록 내 배수관(D=80~350mm)

- 소블록 : 대상 소블록(붙임2) 내 배수관 세척

구분	계	관악구	금천구	동작구	영등포구
소블록	**	**	*	**	**

- 공기주입 세척 : 대상 소블록 내 구별 10개소씩 세척(총 40개소)

․ 대상구간 : 지역 담당별 현장조사 후 상반기 선정

	〈 대상구간 선정 시 검토사항 〉
‣ 공급관로 양단에 제수밸브, 퇴수밸브 등 시설물이 설치된 곳 ‣ 세척구간에 분기된 수요가가 없거나 적은 곳 ‣ 공기주입구(새들분수전 등) 설치가 용이한 곳(공기밸브실 등 필요) ‣ 세척 중 발생되는 세척수의 처리가 용이한 곳(하수도 변실 인근 등)

- 취약관로 : 선정된 취약구간*****) 세척

구분	계	관악구	금천구	동작구	영등포구
개소	**	*	*	**	*
연장(m)	*****	***	***	***	***

․ <붙임2>의 취약구간에 대하여 세척주기별 반복 세척(20~60일 주기)

	〈 취약구간 추진내용 〉
‣ 새로운 관말 정체구간 발생 시 5단계(20, 30, 40, 50, 60일 등) 시범세척을 통해 주기 산정 ‣ 선정기준 : 관말 정체지역, 잔류염소 미달지역 ‣ 세척방법 : 퇴수시설을 이용하여 관말 정체구간 끝단에서 단방향 세척

ㅇ 추진방법

․ ****************** 소블록별 물세척 및 공기주입 세척

일반 물세척 개념도		공기주입 물세척 개념도

***************

**************

**************************

*********************************************

ㅇ 배수관 구별 세척 세부계획

(2024.1.31. 기준)

구분	소블록(개소)	연장(m)				대상(m) (’75~’96년)
		총계	’75~’85년	’86~’96년	’97~24년
계	**	*******	*****	******	*******	******
관악구	**	******	***	******	******	******
금천구	*	******	**	*****	*****	*****
동작구	**	******	****	******	******	******
영등포구	**	******	****	******	******	******

‣ 금년 기간제근로자가 전년도 대비 1/2 감소(’23년 16명 → ’24년 8명)하여 전년도 세척 연장에서 1/2 감소

※ 전년도 세부 추진실적 :****************** 세척

‣ 부설기간 오래된 ’75~’96년 배수관 세척

‣ 기타 이물질 출수 민원 등 비상시 추가로 투입하여 세척

□ 관망관리대행업 전문업체를 통한 세척 용역

ㅇ 용역개요

- 용 역 명 : 상도03-07소블록 배수관 세척 용역

- 개    요 :*********************

ㅇ 발주방법 : ‘협상에 의한 계약’으로 발주 시행

- 제안서 평가에 의해 아래 공법 중 적용하여 시행

피그세척	맥동류세척	기타공법
‧ Pig를 관내에 삽입한 후 수압을 이용하여 주행시키면서 약하게 부착된 침전물, 미생물 막, 슬라임, 녹 등을 세척하는 공법	‧ 관내에 흐르는 수돗물에 압축공기를 일정 간격으로 주입하여 water slug를 통해 높은 유속으로 난류를 발생시켜 이물질 등을 제거하는 세척 공법	[공기 등 주입세척] ‧ 물빼기 후 관내에 공기 또는 다른 물질을 주입하여 세척하는 공법 [기계세척] ‧ 관 내부에 세척기계를 넣어 물리적으로 세척하는 공법

ㅇ 추진방법 : 용역과 공사로 분리 시행

┌ 제반공사 : 연간단가(누수복구, 급수공사, 시설물) 업체 통한 작업구, 퇴수구 등 설치

└ 세척용역 : 관세척 시행

Ⅴ		행정사항

ㅇ 행정지원과

- 수질검사장비(탁도, 잔류염소계) 대여 및 수질검사 교육 : 수질팀

- 기간제노동자 출퇴근 확인을 위한 지문인식기 등록 : 행정관리팀

ㅇ 급수운영과, 시설관리과

- 해당 소블록에 대한 세척 위치확인 및 도면 제출

- 당일 작업(세척, 취약관로 세척) 실시결과 확인 후 복명(과별 총괄담당 협조)

- 세척용역 발주시행(시설관리과)

ㅇ 본부 실적보고

- 매월 5일까지 소블록 세척 실적보고

Ⅵ		향후계획

□ 대형 상수도관 세척 협조

ㅇ ’24.4월     : 용역발주 및 계약체결(본부)

ㅇ ’24.5~9월   : 수계전환 및 작업구 설치 작업(사업소)

ㅇ ’24.6~10월  : 관세척 시행(용역사)

ㅇ ’24.11~12월 : 세척사업 완료

□ 기간제노동자 채용 및 세척 시행

ㅇ ’24.3월     : 기간제노동자 채용 및 차량임차 계약

ㅇ ’24.4~11월 : 소블록 배수관 세척 시행

ㅇ ’24.12월    : 소블록 배수관 세척 추진결과 보고

□ 관망관리대행업을 통한 세척 용역 시행

ㅇ ’24.1~3월   : 용역발주 및 계약체결

ㅇ ’24.4~6월   : 작업구 등 시설물 설치

ㅇ ’24.6~10월  : 세척작업 시행

ㅇ ’24.11월    : 용역 성과품 작성 및 준공

붙임 1. 대형 상수도관 세척구간 위치도 1부.

2. 소블록 물세척 추진대상 1부.

3. 소블록 배수관 세척 용역 대상 1부.  끝.