문서번호	급수운영과-2134
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
급수운영팀장	급수관리팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
강무진	황대룡	신근호		02/01
				정한호
협 조
	주무관		김왕근

동북선 도시철도 건설공사(1공구) 102정거장  원인자 상수도관 이설공사에 따른 조치계획 보고

동북선 도시철도 건설공사(1공구) 102정거장

원인자 상수도관 이설공사에 따른 조치계획 보고

2024.  2. 1.(목)

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

동북선 도시철도 건설공사(1공구) 102정거장

원인자 상수도관 이설공사에 따른 조치계획 보고

급수운영과장 :신근호☎3146-2740 급수운영팀장 :강무진☎2741 담당 :강무진☎2741

동북선도시철도(주)에서 시행하는 1공구 102정거장 주변 상수도관 이설공사에 따른 조치계획을 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ「102정거장 상수관로(기존 D1200 → 이설 D900) 시·종점 연결공사 세부 일정 제출」동북선 시공-24-0141(’24. 1. 29.)

□ 처리경과

ㅇ「저촉 상수도관 이설 최종 협의 결과 알림」배수과-23362(’22. 7. 28.)

- 이설 승인조건 및 최종 시공계획안(설계도면 등) 준수하여 이설 시행

ㅇ「착공계 제출」금건동북 제 2022-0440호(’22. 7. 29.)

- 본부 최종 협의 결과 내용(이설 승인조건, 안전계획 등) 반영하여 제출

□ 공사개요

ㅇ 공사명: 동북선 1공구 102정거장 원인자 상수도관 이설공사

ㅇ 위  치: 성동구 마장동 522-3 일원

ㅇ 기  간: 2022. 10. 17.~2024. 12. 31.

ㅇ 시행사: 동북선도시철도(주)[도급사: 금호건설(주), 전문 시공사: 삼조건설(주)]

ㅇ 내  용: D=900 L=130m 이설 ※ 금회 시행공사: 잔여 구간 시·종점부 15m 이설

□ 이설공사 현황

ㅇ 일자별 작업내용(세부 작업내용 붙임1 참조)

- ’24. 2. 2.(금) 22:00~2. 3.(토) 05:00	: D1200mm 무단수차단 사전작업
	(천공, 샌드위치밸브 사전 설치)
- ’24. 2. 3.(토) 22:00~2. 4.(일) 13:00	: D1200mm 무단수차단 시행 및
	시·종점 상수도관 연결공사

ㅇ 공사 위치도

ㅇ 상세도

금회 시행공정(적색 표기)

□ 사업소 사전조치 및 검토내용

ㅇ 사전조치: 수계전환 완료

- 성동구 → 동대문구 청계천 횡단 D900mm 차단 등 수계전환 완료
[붙임2 시설관리과-1655(2024. 1. 26.)호 참조]

※ ************************************** 동일하게 수계 전환하여 비상 급수 운영 시행한 바 있으나 급수 불편 미발생[붙임3 참조]

ㅇ D1200mm 무단수차단 안전성 검토결과 적정

- 상수도 전문 건설사업관리 용역사에서 제출한 ‘무단수차단 구조안전성 검토서’ 확인 결과 적정[붙임5 동북선 시공-23-1234(2023. 8. 25.)호 참조]

ㅇ 공사인근 다량급수처 담당자 지정 및 비상연락망 체계 구축으로 안정적인 급수환경 조성

- 마장동 등 금회 공사 주변 다량급수처 사전 파악, 비상 연락체계 유지·긴급 상황 전파를 위해 담당자 지정(붙임4 참조)

- 다량급수처 현황(12개): APT 4개 단지 및 마장축산물 시장 등 일반건물 8개소

· 신성미소지움 아파트 등 937세대 및 일반건물(연면적 70,093㎡)

□ 향후계획

ㅇ 공사 관계자(시공사, 감리단 등)와 비상 연락체계 상시 운영하여
특이사항 발생 시 긴급 공유

ㅇ 공사 시행 예정에 따른 낙산배수지 급수구역 수질 모니터링 협조 요청 공문 발송(중부수도사업소)

ㅇ 공사 시행 시 현장 입회하여 이설 승인조건·착공계 시공계획안 등 준수 여부 감독 및 지도

ㅇ 긴급 상황 대비 일자별 대기조 편성하여 현장 및 사무실 등 비상대기

(향후 대체휴무 또는 초과근무 인정)

붙임  1. 이설공사 세부내역 제출[시행사] 1부.

2. 수계전환 완료보고[동부 시설관리과] 1부.

3. 비상급수운영 결과보고[본부 배수과] 1부.

4. 다량급수처 담당자 지정 및 비상연락망 현황 1부.

5. 구조안전성 검토서[시행사] 1부.

6. 비상대기자 명단 1부.  끝.