문서번호	배수과-989
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	배수과장	급수부장	서울아리수본부부본부장
안효준	유양현	백광인	02/01
			박진순

2024년도 소블록 배급수관망 개선 사업 계획

2024. 1.

서울아리수본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년도 소블록 배급수관망 개선 사업 계획

급수부장 :백광인☎3146-1401  배수과장 : 유양현☎1430  담당 :안효준☎1438

소블록 배급수관망 형성을 통하여 적정 수압유지, 수질관리, 출수불량 개선

등 공급 유지관리에 기여하고 돌발사고 등에 선제적 대응하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(변경)(배수과-25457, '22.10.12.)

- 사고시 비상급수대책, 평상시 안정적인 급수공급을 위한 조기 정비 필요

- 잔여 대상에 대해 정비 목표 및 예산을 확대하여 선제적 정비 실시

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: ′17 ~ ′25년(계속사업)

ㅇ 총사업비: 33,868백만원(기투자 27,750백만원)

ㅇ 정비대상: 734개소

- 609개소 완료(83%), 잔여 125개소(17%)

ㅇ 사업내용

	➡

- 단일배관 구간에 비상시 연결관로(이중화)를 설치하여 비상시 급수공급이

가능한 무단수 급수체계 구축

- 단절관 연결을 통한 순환관망 형성으로 안정적인 유량과 적정수압을

공급하고, 아리수 수질환경에 기여 및 신뢰성 제고

<’23년 추진실적>

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	100	15	13	11	9	10	14	20	8
단일배관 이중화	6		5	-	-	-	-	1	-
단절관 순환관망	94	15	8	11	9	10	14	19	8

ㅇ 사업기간: ’23.1. ~ 12.

ㅇ 사 업 비: 5,100백만원

ㅇ 정비실적: 100개소, D80~500㎜, L=4.6㎞

□ ’24년 사업추진계획

ㅇ 기    간: ′24.1.  ~ 12.

ㅇ 사 업 비: 4,600백만원

ㅇ 정비대상: 71개소 (D80㎜ ~ D300㎜, L=3.1㎞)

- 잔여 구간 중 24년도 도로굴착 통제 없이 공사 가능한 구간 위주 선정

- ’23년 누수 발생 건 중 단일 유입 배관의 누수로 인해 복구 시간동안 단수가 발생했거나 향후 단수가 우려 되는 구간 선정

- 단절 구간의 관말 정체수로 인해 수질 저하 등 민원이 접수 되었거나 수질 관리가 어려운 구간 선정

ㅇ 사업소별 추진 계획

- 단일배관 이중화:  6개소 (D150㎜~D300㎜, L=0.3㎞)

- 단절관 순환관망: 65개소 (D80㎜ ~D300㎜, L=2.8㎞)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계(건)		71	11	7	9	5	5	12	18	4
	단일배관 이 중 화	6			2	-	1	1	2	-
	단 절 관 순환관망	65	11	7	7	5	4	11	16	4
사 업 비 (백만원)		4,600	318	393	418	702	434	1094	974	267

□ 행정사항

ㅇ 사업소별 예산 재배정 요청 (→기획예산과)

ㅇ 예산의 조기 집행을 위해서 도로굴착 등 유관기관 협의 사전 완료

ㅇ 월별 사업 추진실적 제출(사업소) 등 주기적 공정관리

ㅇ 공사 불가 대상지(민원 등) 발생시 대체구간 선정, 사업추진

붙임: 24년 소블록 배급수관망 개선 사업 정비대상 1부. 끝.