문서번호	도시정비과-1326
결재일자	2024. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	공공개발2팀장	도시정비과장	균형발전기획관		균형발전본부장
최정훈	유장원	오승민	임춘근		02/02
					김승원
협 조

장안평 일대

도시재생활성화계획 변경 추진계획

2024. 2.

균형발전본부

(도시정비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

장안평 일대

도시재생활성화계획 변경 추진계획

도시정비과장 : 오승민☎2133-8485 공공개발2팀장 : 유장원☎8642 담당 : 최정훈☎8643

*******************************************************************************

1		추진개요

□ 변경목적

ㅇ 기수립(고시)된 장안평 일대 도시재생활성화계획(제2016-228호,'16.8.4.) 현행화를 통한 도시재생 마중물사업의 마무리

- 실제 사업기간을 반영한 목표연도 변경, 마중물 사업 일부 폐지(신설) 등 사업계획 변경, 완료된 마중물 사업의 정산내역을 반영한 총 사업비 조정

□ 변경근거

ㅇ 도시재생법 제19조(도시재생활성화계획 수립)

ㅇ 도시재생법 제20조(도시재생활성화계획 확정 및 승인 등) 제1항 및 제5항

ㅇ 도시재생법 시행령 제26조(도시재생활성화계획의 경미한 변경)

ㅇ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 제6조(도시재생위원회 구성ㆍ운영)

□ 변경개요

ㅇ 위    치 : 성동구 용답동, 동대문구 답십리동·장안동 일대

ㅇ 유    형 : 근린재생 중심시가지형

ㅇ 사업기간 : 2017년~2020년(※면적 508,390㎡)

ㅇ 주요 변경내용

- 사업기간 : (기존) 2017년~2020년 → (변경) 2017년~2021년

- 사업계획 : 가로환경 정비 1개 폐지 및 1개 신설

- 총사업비 : (기존) 196.4억원 → (변경) 166.9억원

⇒ ********************************************************************************************

2		추진경위

ㅇ ’15.12.10. : 도시재생활성화지역 지정(근린재생 중심시가지형)

ㅇ ’16.08.04. : 장안평 일대 도시재생활성화 계획 고시(제2016-228호)

ㅇ ’21.06.29. : 서울시 도시재생 재구조화 추진계획(균형발전정책과)

ㅇ ’21.12.31. : 가로환경정비 사업 등 마중물 사업 완료

ㅇ ’22.07.12. : 자동차산업종합정보센터 전문부서 이관(일자리정책과)

ㅇ ’23.11.17. : 공청회 개최(별도의견 없음)

ㅇ ’23.11.20.~24. : 관련부서 의견조회(주요의견 없음)

3		도시재생활성화계획 변경(안)

□ 변경내용

**************************************************

***************************************

*********************************************

******************

***************************

*********************************************

********************************************

도시재생법 시행령 제26조(도시재생활성화계획의 경미한 변경) 법 제20조 제5항에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외한 경우를 말한다.<개정 2022. 12. 6.>

2. 도시재생사업을 폐지하거나 신설하는 경우

***********************************************

**	*******	*******	**	*******
*	**********		*	**********
*	*****************
			*	********
*	********
			*	*********
*	*********
			*	***********
*	***********
			*	**************
*	*********
			*	*********

**************************************************

*****************************

***********************************

*****************************************************

도시재생법 시행령 제26조(도시재생활성화계획의 경미한 변경) 법 제20조 제5항에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외한 경우를 말한다.<개정 2022. 12. 6.>

4. 도시재생활성화계획에 대한 총 사업비를 10퍼센트 이상 증액 또는 감액하는 경우

4		향후일정

□ 도시재생법 제20조에 따른 후속절차 이행

*****************************

*********************

******************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임 : 사업비 변경내역 1부.  끝.

붙 임		사업비 변경내역

□ 사업비 변경 세부내역

(단위 : 천원)

**** *****************************			*******
			**	**	**
*********			**********	**********	**********
************	*******************		*********	*********	**********
	*********************
********	*************	*************	*	*	*
		*************	*	*	*
		***************	*	*	*
	**************	***************	*********	*********	********
		**********
********	*************	*****************	*******	******	********
		*******************
	**** **** ******	**********	*********	*******	**********
		*************
********	**** **	***************	*********	*********	**********
		******************	*******	*	********
		************	*******	*********	********
		*************	*********	*******	********
		**************	*********	*********	********
		******************	*	*******	********
	*********	*************	*********	*******	**********
		**************	*******	*******	********
*******	*****************		*******	*******	********
	*************		*******	*******	********
	*****************		*******	*******	*******
	***************		*******	*******	********
**********			*******	*******	*******

*******************************