문서번호	계획설계과-1195
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
민경석		김근용	02/05
			백광인
협조

“까치산 배수지 기본 및 실시설계”

설계경제성(VE) 검토 실행계획

2024. 2. 5. (월)

급  수  부

(계획설계과)

“까치산 배수지 기본 및 실시설계”

설계경제성(VE) 검토 실행계획

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401   계획설계과장 : 김근용 ☎1410   담당 :민경석☎1414

「까치산 배수지 기본 및 실시설계」에 대한 설계경제성(VE)를 시행하여
건설될 시설물의 경제성·시공성·안정성·편의성 향상을 도모하고자 함.

※ 설계경제성 운영협의회 결과(기술심사담당관, ’23.11.21.)  : 발주기관 직접수행

Ⅰ		추진근거 및 사업개요

□ 추진근거

ㅇ 건설기술진흥법 시행령 제75조

ㅇ '24년 설계경제성 검토 운영계획 (행정2부시장 방침 제20호, '24.1.31.)

ㅇ 설계경제성(VE) 운영협의회 결과 통보 (기술심사담당관-20818, '23.11.21.)

- 기술심사담당관 대행을 의뢰(’23.11.7.)하였으나, 운영협의회 결과 발주기관 직접수행 하도록 결정

□ 사업개요

ㅇ 사업 기간 : 2019 ~ 2026년

ㅇ 사업 위치 : 동작구 사당동 산32-81 외 1필지 (5,221㎡)

ㅇ 사업 규모 : 배수지(5,000㎥), 송·배수관 부설(D400~600㎜, L=2.9㎞)

*******************************************************************

Ⅱ		설계경제성(VE) 검토 계획

□ 주요 검토내용

ㅇ 건설공사의 계획부터 유지관리까지 전 분야의 경제성 분석

ㅇ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성, 현장적용의 타당성

ㅇ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성

ㅇ 설계예산서의 도서 간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 설계VE 팀 구성

ㅇ 설계경제성 검토 소위원회, 발주부서, 설계사 등 10명 내외 참여

						위원장 : 급수부장
																간 사
설계VE 리더							진행 보조요원				설계VE 위원					설계VE 담당자

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸ 위원장 백광인 급수부장 ▸ 간 사 김근용 계획설계과장 ▸ 설계VE 담당 민경석 주무관	․ 설계경제성(VE) 검토 계획 ․ 회의 지원 등 ․ 사업설명, 제안서 검토
****	***************************	****************** ****************
진행보조요원	▸ 유대한 연구원 한국가치기술연구소(주)	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (4개 분야)	********************* ********************** *********************** **********************	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 및 평가 ․ 제안서 작성
설 계 자	▸ ㈜삼안, ㈜유신	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

❖ 설계VE리더 : 설계VE 관련 전문 자격증을 보유하고 실무 경험이 풍부한 자

❖ 외부 검토위원 : 관련 기술사 및 박사학위 소지자, 실무 경험이 풍부한 자

□ 설계VE 회의 세부일정

일 시	내 용
'24.2.22.(목) 10:00~17:00 (워크숍 1일차)	- 사업설명 및 질의응답, 현장답사, 성능평가, 기능분석
'24.2.23.(금) 10:00~17:00 (워크숍 2일차)	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가
'24.3.05.(화) 10:00~17:00 (워크숍 3일차)	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가

Ⅲ		행정사항

□ 위원 수당지급 : 9,214천원

ㅇ VE리더 (특급기술자+보고서작성)	: 2,988천원 (2,988천원 × 1명)

ㅇ VE검토위원 (특급기술자)	: 5,203천원 (5,203천원 × 4명)

ㅇ 진행보조요원 (중급기술자)	: 1,023천원 (1,023천원 ×1명)

※ 산출근거 : 서울특별시 설계경제성(VE) 검토 운영지침(2024.1.)

□ 향후계획

ㅇ 기술심의 등	’24.2. ~ ’24.7.

설계 VE (자체시행)	⇒	기술 심의 (기술심사담당관)	⇒	공사기간 적정성 검토 (기술심사담당관)
'24.2. ~ '24. 3.		'24. 4. ~ 5.		'24. 6. ~ 7.

ㅇ 사업추진	’23.12. ~ ’26.12.

도시계획시설 결정	⇒	실시계획 작성	⇒	토지 보상	⇒	공사시행
~'24.1.4 (완료)		'24. 1. ~ 3.		'24. 4. ~ 12.		'25. 1. ~ '26.12.

붙임   설계경제성 검토 소위원회 위원 명단 1부.  끝.