문서번호	기전과-1715
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
곽영두		최경주	02/05
			손경철
협 조
	주무관			권의현

「월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치사업」 추진계획

「월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치사업」

추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

서부도로사업소

(기  전  과)

「월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치사업」

추진계획

서부도로사업소장 : 손경철☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 곽영두☎8328

돌발성 호우 등 위험요소에 대비하여 선제적으로 시민 안전을 확보하기

위한 월드컵, 서빙고, 증산지하차도의 진입차단시설 설치 계획을 보고함

1		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 지하차도 풍수해 재난대응 강화대책(행정2부시장-198, 23.8.3.)

ㅇ '24년도 지하차도 침수대응시설 설치계획(시 도로시설과-1285, 24.1.23.)

□ 추진경위

ㅇ '21. 11. : 성산지하차도 진입차단시설 설치 완료

ㅇ '22. 6. : 증산, 의주로지하차도 진입차단시설 설치 완료

ㅇ '23. 12. : 모래내, 퇴계로지하차도 진입차단시설 설치 완료

문주형 차단시설(차단막)	편주형 차단시설(차단막)

2		지하차도 진입차단시설 개요

구분	도로형태	연장 / 박스 길이	설치 차단막 (설치연도)
월드컵지하차도	4차선 왕복	250m / 60m	(신설) 문주형 차단막 2
서빙고지하차도	2차선 왕복	340m / 127m	(신설) 편주형 2
증산지하차도	6차선 왕복	575m / 221m	(신설) 편주형 1 (기설치) 편주형 2 (2022년)
성산지하차도	3차선 편도	366m / 110m	편주형 차단막 1 (2021년)
의주로지하차도	2차선 편도	250m / 70m	편주형 차단막 1 (2022년)
퇴계로지하차도	4차선 왕복	250m / 70m	문주형 차단막 2 (2023년)
모래내지하차도	2차선 왕복	325m / 146m	편주형 차단막 2 (2023년)

※ 의주로(자연배수) 1개소 외 나머지 지하차도는 강제배수

3		사업 개요

□ 사 업 명 : 월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치사업

□ 사업대상

ㅇ 월드컵 및 서빙고지하차도는 현재 (신호지주+문자전광판) 형태로 구성되어 있으나, 차단막 진입차단시설로 신설 교체하고,

ㅇ 증산지하차도는 P자형 교차로에 합류구간에 차단막 진입차단시설 신설

월드컵지하차도 - 신설 2개소(문주형) : ○	서빙고지하차도 - 신설 2개소(편주형) : ○	증산지하차도 - 신설 1개소(편주형 1) : ○ - 기존 2개소(문주형 1, 편주형 1) : ○

□ 사업기간 : '24. 2. ~ 5.

□ 사업내역 (총 사업비: 950백만원)

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	계약방법
월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치공사	********************************	***	제한경쟁
지하차도 진입차단시설 구조안전성 검토 용역	************************	**	제한경쟁
지하차도 진입차단시설 UPS 구매설치	*************** *******************	**	조달구매 (제3자단가)
지하차도 진입차단시설 문자전광판 구매설치	*********** *******************	***	조달구매 (총액수의계약)
지하차도 진입차단시설 CCTV 구매설치	**************************	**	조달구매 (제3자단가)

□ 예산사용 계획

ㅇ 재난관리기금 및 국비 특교세로 1,050백만원 재배정 예정이며,

그중 950백만원 사용하여 사업 추진

ㅇ 예산과목 : 재난안전정책과, 재해 및 재난 예방, 재난예방 및 복구,
재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비

4		사업 세부계획

ㅇ 월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치공사

- 사업내용 : 진입차단시설 제작 및 설치, 부대장비 함체 설치, 기초공사 등

※ 월드컵, 서빙고는 '23년도 기초 설치 완료되어, 증산지하차도만 기초 공사 수행

******************

**********************

*********************************************

*****************************

- 사전절차 : 계약심사 필요 - 5억원 이상 종합공사

ㅇ 월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 구조안전성 검토용역

- 사업내용 : 진입차단시설 구조물에 대한 구조계산 및 안전성 검토

- 사 업 비 : 10백만원

- 계약방법 : 수의계약

- 계약근거 : 지방계약법 시행령 25조1항5호나목 - 추정금액 2천만원 이하 용역

*****************************

ㅇ 진입차단시설 무정전전원장치(UPS) 구매설치

- 사업내용 : 정전시 비상전원 공급장치(UPS) 5개 설치
**********************************************************

ㅇ 문자전광판 구매설치

- 사업내용 : 지하차도 및 진입차단시설 상태 알림 문자전광판 5대 설치

*******************

************************

************************************

**********************************

***************************************************************

- 사전절차 : 특정기술심사 필요 - 5천만원 이상 물품

※ 조달구매로서 계약심사 및 일상감사는 요구되지 않음

ㅇ CCTV 구매설치

- 설치목적 : 지하차도 진입차단시설 작동 여부 및 지하차도 상태 감시

- 구매제품 : CCTV, 네트워크스위치, 암대, 서지흡수기 등 5조

******************

- 계약방법 : 조달구매(제3자단가)

5		향후계획

ㅇ '24. 2. 13. : 예산재배정 예정

ㅇ '24. 2. 14. : 공사 계약심사 의뢰, 구조안전성 검토용역 계약체결

ㅇ '24. 2. 28. : 문자전광판(물품) 특정기술심사위원회 개최 완료,
공사 및 물품 발주

ㅇ '24. 3. : 공사 및 물품 착공

ㅇ '24. 5. : 공사 준공. (수방기간 전 준공 도모)

붙임  '24 지하차도 진입차단시설 사업계획(서울시) 1부.  끝