문서번호	급수운영과-2192
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이시은		정수용	02/06
			권오정
협조	기전팀장		김진수
	주무관		김민호

「상수도 블록시스템 공급체계 구축 사업 관련」

신정02중블록 유량계실 설치계획

2024. 02.

강서수도사업소

(급수운영과)

신정02중블록 유량계실 설치계획

누수, 수질사고 등 비상 상황 대비 블록시스템을 통해 안정적인 급수 체계를 구축하기 위해 신정02중블록에 유량계실 설치와 관로부설 공사를 하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거 : 2024년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획

[본부 배수과-27765(2023.12.27.)]

ㅇ 유량계 설치 목적 : 구로구, 양천구 경계 분리 및 유량측정

□ 유량계 설치(신정02중블록)

ㅇ 위    치 : 구로구 고척동 38-8 부근

ㅇ 관로현황 : 1987/DCIP/D400mm, 2006/DCIP/D200mm

ㅇ 위치도

Ⅱ		추진 계획

□ 추진개요

ㅇ 공사내용 : 블록 구축 배관 신설 10m, 유량계실 설치 1개소

- 신정01중블록과 신정2중블록 분리를 위한 유량계 설치 : 신정01중블록 경계밸브 조절(개→폐)을 통하여 신정02중블록의 분리된 유량값을 계측

ㅇ 공사일시 : '24년 3월 ~ 4월

ㅇ 소요예산 : 100백만원

ㅇ 공사위치도

공사구간	구경(mm)	개소/연장	소요예산(백만원)
고척동 38-8 부근	400(유량계)	1개소	100
	200(연결관로)	10m

□ 세부계획

ㅇ 공사내용

ㅇ 안전관리계획

- 유량계실 설치 시 굴착면 및 흙막이지보공의 상태를 주의하여 작업

- 흙막이 상부, 굴착단부에는 안전난간대 설치 후 작업

- 근로자는 안전모, 안전화 등 개인보호구 착용 철저

유량계실 설치도 : 최소 2,000*2,000*2,000mm

□ 추진일정

ㅇ 설치계획 수립 : '24년 2월

ㅇ 횡단굴착 공사 : '24년 3월

ㅇ 유량계실 설치 및 관로부설공사 : '24년 3월

ㅇ 유량계 설치(시설관리과 기전팀) : '24년 4월

Ⅲ		조치 계획

□ 유량계 설치공사 지역 연간단가 업체 시행

ㅇ 구로구 관내 연간단가『2023년 고척1동 외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』업체인 (주)탄탄컨스텍에게 작업지시하여 안정적인 급수체계를 구축하고자 함.

붙임 : 1. 2024년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획(본부) 1부.

2. 유량계실 및 관부설 위치도 1부.  끝.