의원 요구 자료 제출

시 행	치수안전과-2301	(	2024. 2. 6.	)
접 수		(		)
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 수변감성도시과장

주무관	하천생태팀장	치수안전과장	물순환안전국장		결재
박운희	代박운희	김지환	02/06
			안대희
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 403, 김민석 의원, 보건복지위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김민석 의원(보건복지위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 403

1. 관악구 봉천천 복원사업 설명자료

□ 의원님께서 요구하신 관악구 봉천천 복원사업에 대한 설명자료를 아래와 같이 제출 합니다.

ㅇ 사업개요

- 위    치 : 봉천천 당곡사거리~도림천 합류부

- 사업규모 : 하천복원 0.62km, 복원구간 도로 재구조화 10~12→6차로

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2028.12.

- 총사업비 : 약 750억원

【 봉천천 현황 】

▸위    치 : 도림천 합류부 ~ 서울교육청 과학전시관(총 연장 5.02km)

▸이용현황 : 1988년 복개 이후 도로로 이용 중(봉천로, 낙성대로 등)

ㅇ 추진현황

- ’23. 2. 22.	: 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수

- ’23. 3.~11.	: 교통현황 조사 및 분석, 수요 예측, 하천 복원형식 검토

- ’23. 11.	: 중간보고 및 자문회의

- ’23. 12. ~ 3.	: 사업 타당성 분석, 관계기관 협의 등

ㅇ 향후계획

- ’24. 4.	: 타당성 조사 및 기본계획 완료

- ’24. 4. ~ 12.	: 지방행정연구원 타당성 조사(총사업비 500억원 이상), 市 투자심사

- ’25. 1.~ ’26. 3.	: 기본 및 실시설계

- ’26. 4. ~	: 하천 복원공사 추진.  끝.

<위 치 도>

<조 감 도>

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (치수안전과)	담당사무관	전병일
	☎2133-3881	주무관	박운희
	작 성 일 : 2024. 2. 6.