아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울아리수본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	『암사초록길 조성사업 구간내 송수관로 이설공사』실정보고 회신(사토장 변경)

1. 공사감독2처-803('24.02.06)관련입니다.

2. 서울시설공단에서 위탁 감독중인『암사초록길 조성사업 구간내 송수관로 이설공사』      실정보고 사항에 대하여 다음과 같이 회신하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기      바랍니다.

가. 검토내용 : 사토장 변경

구 분	사 토 장
	운 반 경 로	거 리	수 량
당 초	*******************	****	*******	***** ******
변 경	*****************	****	*******

○ 개략공사비(잔토처리비) : 변동없음(계약단가적용)

※ 수량변동 발생시 설계변경 반영

나. 검토결과 : 사토장 변경 승인***************************

다. 행정사항(지시사항) :

○ 당초 예정된 사토장********** 활용을 위한 소유지의 지속적 협의추진 및

대체부지 확보 강구*******************

○ 실정보고 회신(승인)에 따른 설계변경시 "설계변경 심의위원회" 개최로 설계변경

내용에 대한 타당성 및 객관성 확보. 끝.

	서울아리수본부장
주무관	김영수		배수과장	유양현		급수부장	02/08
백광인
협조자
시행	배수과-1306	(	2024. 2. 8.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 급수부 배수과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	부분공개(3)