문서번호	친환경건물과-1941
결재일자	2024. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		친환경건물정책팀장	친환경건물과장
김응균		이홍석	02/08
			이주영A
협조

『북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사』

건설폐기물 추가발생 및 조치계획

기후환경본부

(친환경건물과)

『북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사』

건설폐기물 추가발생 및 조치계획

북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사」지열공사와 관련, 건설폐기물 추가발생 및 조치계획에 대한 감리 실정보고서가 제출되어 이에 대한 검토결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: 북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링공사 건설폐기물 처리용역

○ 규     모: 폐아스팔트(234톤), 건설폐재류(365톤), 혼합폐기물(21톤) 처리 등

○ 용역기간: 2023. 7. 10. ~ 2024. 3. 5.

○ 용 역 비: **************************

○ 계약업체: *****************************

○ 공사감리: ***********************

□ 실정보고 내용

○ 보고내용

- 지열 천공작업 현장에서 지열배관 굴착 공사중 매립폐기물 발생

*************************	*************************

▸ 매립폐기물 발생 : 337.4톤(당초 448.5톤 → 변경 337.4톤)

▸ 폐기물 성상 분석 결과 매립 혼합폐기물로 반출 가능

○ 조치계획(의견)

- 지열을 통한 냉난방공사의 지연 방지를 위하여 신규 발생된 매립 혼합폐기물에 대하여 선처리하는 것이 타당하다고 판단되며, 최종 변경계약 물량 확인을 위해 반출 후 설계변경 반영하는 것이 필요하다고 판단됨

□ 검토결과

○ 지열공사로 인한 매립 혼합폐기물 발생량이 *************으로 확인 되었으며, ****************************************************코자 함

□ 조치계획

○ 매립 혼합폐기물 처리업체는 기 계약되어 있는「북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사 **************************************************

○ 설계변경 계약에 따른 추가 소요비용은「북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 *******************

□ 예산과목

○ 기후환경본부 친환경건물과, 저탄소 도시환경조성, 건물 온실가스 감축방안 마련, 노후 공공건물 에너지성능 개선, 시설비및부대비, 시설비

붙임  감리 실정보고서 1부. 끝.