문서번호	도로시설과-2326
결재일자	2024. 2. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
장호		조창길	02/13
			고영준
협조
	도로조명팀장		진종구

가로등 점소등시스템 개선(SW개발)

공정회의 결과 보고(1월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  2.

도로시설과

[시설기획팀]

가로등 점·소등시스템 개선(SW개발)

공정회의 결과 보고(1월)

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 시설기획팀장 : 조창길☎1652 담당 :장호☎1656

가로등 점·소등시스템 개선(SW개발) 용역과 관련하여 용역 품질 향상 및 내실화를 위해 자문회의를 개최하고 결과를 보고드립니다.

Ⅰ		공정회의 개요

□ 일  시 : 2024. 1. 23.(화) 10시

※ 대상기간 : '23. 12. 20.(수) ~ '24. 1. 19.(금)

□ 장  소 : 본관3층 소회의실

□ 참석자

ㅇ (서울시) 담당사무관 박기춘 등 3명

ㅇ (용역사) 다인정보기술 최혜승 소장 등 3명

□ 주요 보고내용

ㅇ 사업추진현황 및 공정율 보고, 사업 참여인력 변경

ㅇ 플랫폼 화면 디자인 확정

ㅇ 초기데이터 회신 분석 및 적재 결과 보고

	< 용역 개요 >
○ 용 역 명 : 가로등 점․소등시스템 개선(SW개발) 용역 ○ 용역기간 : '23. 4. 19. ~ '24. 3. 14. (331일) ○ 용 역 사 : (주)다인정보기술, (주)서경산업 ○ 용 역 비 : 1,131,119천원 ○ 사업내용 - 클라우드(CLOUD) 기반 지능형 가로등 통합관제시스템 구축(32개기관, 약28만개) - 양방향점멸기 서울형 표준 통신규약(프로토콜)개발, 적용모델 도입 - 한국전기안전공사 전기원격점검 정보연계 추진(분전함 3,009개)

Ⅱ		용역 수행 내용

□ 공정율 보고 (공정률 89.0%)

***		***	******	********			**** ******
				****	****	**
****		***	****	****	***	****	***
***** ********	****	**	***	***	*	***	***
	****	***	****	****	*	****	***
	****	***	****	****	***	****	****
	*****	**	***	***	***	***	*****
	******	**	*	*	*	*	***
*****		****	****	****	***	****	****

□ 사업추진 현황 보고

ㅇ 서울형 가로등 표준점멸기 테스트 환경 구축 및 대응(계속)

ㅇ 플랫폼 화면디자인 및 퍼블리싱 진행(계속)

ㅇ 데이터센터 데이터베이스 작업(테이블 생성 및 초기데이터 적재)

ㅇ 제조사 연계 라이선스 계약 및 발주 추진

ㅇ 서울형 가로등 점멸기 프로토콜 제조사 요구사항 추적표 관리

ㅇ 인증키관리계획서, 분전함관리번호 정의서 제출

ㅇ 추가 점멸기 제조사************* 표준프로토콜 배부 추진

업무화면(도로사업소 탭)	업무화면(한강교량 탭)	세부 업무화면(도로사업소)

Ⅲ		주요 질의 응답

연번	서울시 의견(질의)	용역사 답변
*	*********************	*************************************************************
*	*********************	*********************************************************
*	*******************************	************************************************************************************
*	*************************	*****************************************************************************************************************
*	******************************** ***********	**************************************** ********************************************
*	****************** *************************	************************** ************* ********************** *************
*	**************	********************** ************************* ********************* ************************ ************************

붙임  1. 월간업무현황보고서(1월) 1부

2. 회의록(공정회의) 1부.  끝.