문서번호	급수운영과-2229
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김다솜	김종섭	02/14
		이규희

급수공사 작업기간 연기 보고

(신설-61)

2024. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

급수공사 작업기간 연기 보고 (신설-61)

「2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(연간단가)」업무 수행 중 급수공사 작업기간 연기 신청서가 접수되어 다음과 같이 보고함.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 공사기간: 2023. 6. 15. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약금액: ************

○ 계약업체: **************

□ 접수내역

○ 급수공사 현황

연번	지시번호	주 소	수요가	당초	변경	비고
1	*****	*********	***	************ **************	************ **************

○ 연기사유: 수요가 측 신축공사 일정 지연으로 인한 급수공사 연기

□ 지연배상금 부과 여부

○ **********************************

□ 조치사항

○ *********************

붙임  공사 작업기간 연기신청서 1부.  끝.