문서번호	건축부-2477
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화시설과장	건축부장
박영우	김선경	02/14
		소영수

『서울 어울림체육센터 건립공사』 가림벽 디자인 추가설치 실정보고 검토보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』

가림벽 디자인 추가설치 실정보고 검토보고

2024.  2. 14. (수)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

가림벽 디자인 추가설치 실정보고 검토보고

공통가설공사 가림벽 디자인 추가설치 실정보고가 책임건설사업관리기술인으로부터 제출되어 적정 여부를 검토하여 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡
(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ 계약금액: ************************************

ㅇ 공사기간: ’22. 7. 25. ~ ’25. 7. 7.(36개월)
(2차: ’23. 9. 18. ~ ’24. 3. 31.)

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 률: 32.1%

□ 추진경위

ㅇ ’19. 12. ~ ’21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ ’22. 07. 29.   : 공사 계약

ㅇ ’22. 07. 25.   : 공사 착공 (건축, 토목, 조경)

ㅇ ’22. 08. 23.   : 착공식

ㅇ ’23. 09. 18.   : 1차수 공사 완료

ㅇ ’24. 02. 현재  : 가시설 공사중

□ 실정보고 내용

ㅇ 관련근거 등

-「공통가설공사 가림벽 디자인 추가설치 실정보고 검토보고」(어울림 제2402-014호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약일반조건 제6절(공사설계 변경)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 실정보고 적용기준 협의요청(가림벽 디자인 추가설치)(어울림 제2402-011호)

ㅇ 보고 내용

- 공통가설공사 가림벽 디자인 추가설치

‧ ‘서울 신규 도시브랜드’ 홍보 목적으로, 기존 가림벽 일부에 노원구 경관사진을 배경으로 활용하여 서울 신규 브랜드 디자인 추가 설치

‧ 현장 가설울타리 중 북서측 모서리 약 7.2M구간에 추가설치(높이 6M)

************

*******	**	**	**	*************
**************	**	**	*******	*******************
********				*******************

****	****	****	*******	**
*****	**	**********	*********************	***************
*****	**	********	********************
****	**	**********	**********************
*****	**	********	********************
***	**	**********	*********************
*****	**	**	*
********	**	**********	*********************

ㅇ 책임건설사업관리기술인 의견

- 노원구청 및 서울시 협의결과에 따라 디자인 1안 적용

□ 적정여부 검토

ㅇ 관련법에 의거 설계변경 대상이며, 원활한 공정관리를 위하여 선시공 후, 관련 절차 이행시 최종 금액을 확정하고자 함

붙임: 공통가설공사 가림벽 디자인 추가설치 실정보고 1부.  끝.