문서번호	도로보수과-1727
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박정길		신준식	02/15
			하현석
협조

2024년 맨홀 유지관리 계획

2024. 2.

동부도로사업소

(도로보수과)

2024년 맨홀 유지관리 계획

맨홀의 구조안전성을 확보하고 차도의 평탄성을 향상시켜 시민이 도로를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 맨홀 유지관리 계획을 수립하여 시행코자 함.

1		관련근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리 지침(국토교통부 지침 제17호, 2015.9.1.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울특별시, 2020.2.3.)

○ '23년 회계연도 재난관리기금 사고이월 확정내역 알림(도로관리과-928,2024.1.16.)

- 예산재배정 : 금1,252백만원(도급비 1,252)

○ '24년 포장도로 유지관리사업 추진계획(도로보수과-1852,2024.1.26.)

- 불량맨홀정비공사 기본뱡향 및 예산집행 계획 수립 : 금1,241백만원

2		현황

○ 맨홀 관리현황                                        (단위 : 개소)

계	상수도	하수도	통신	전기	가스	난방	소화전	기타
20,609	6,449	4,716	5,239	2,377	1,120	240	334	134

3		맨홀 관리계획

□ 추진방향

○ 맨홀점검 : 정기적인 맨홀 점검으로 불량맨홀 적기 정비

○ 불량맨홀 정비 : 신속한 불량맨홀 정비로 도로평탄성 확보

□ 맨홀 점검

○ 점검대상 : 사업소 관리노선(시도), 20,609개

○ 점검주기

- 정기점검 : 상·하반기 각각 1회 점검 시행(2회)

- 수시점검 : 평시 순찰 및 해방기, 우기, 겨울철 대비 등 점검 시행

○ 점검방법 : 외관상태 육안점검

- 맨홀 뚜껑 균열, 단차, 이탈 등

- 맨홀 주변 포장 손상 및 평탄성 등

○ 점검자 및 점검노선 : 점검조 편성(2인1조, 노선담당별 점검 시행)

점검조	점검자	점검노선
**	*** ***	***********************************************************************************
**	*** ***	****************************************************************************************************
**	*** ***	******************************************************************************

○ 조치계획

- 경미한 사항은 직영반에서 조치 후 불량맨홀 정비공사 시행

- 맨홀 구체 및 뚜껑 파손은 맨홀 관리기관에 조치 요청 후 협의하여 불량맨홀 정비공사 시행

- 불량맨홀 정비는 『관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』업체에 작업지시하여 조치

□ '24년 불량맨홀 정비 계획

○ 공사 현황

사업명	공사기간	소요예산	정비대상	비고
'23/'24년 맨홀 평탄성 개선공사 1,2구간	2023.11.4. ~ 2024.5.31.	1,252백만원	688개소	사고 이월
2024년 맨홀 평탄성 개선공사 1,2구간	2024.3. ~ 12.	1,241백만원	660개소	발주 예정

○ 정비기준 및 내용

- 도로순찰 및 민원발생 등에 따른 긴급정비 필요 맨홀 및 '23년 노후포장정비공사에서 발생된 불량맨홀 미정비분 우선 정비

- 맨홀 정비 우선 순위 : 동부(659개소)

※ 특별시도 도로상 맨홀외부상태 조사 평가 용역 기준 : 동부(659개소, D·E급)

- 맨홀뚜껑 파손(소음, 균열 등) 및 구체 파손 맨홀 관리기관 정비 유도

4		향 후 계 획

□ '23~'24년 맨홀 평탄성 개선공사 1,2구간

○ '23. 11. ~ 24. 5. : 맨홀 평탄성 개선공사 시행

○ '24. 5. 31. : 맨홀 평탄성 개선공사 준공

□ '24년 맨홀 평탄성 개선공사 1,2구간

○ '24. 3. : 맨홀 평탄성 개선공사 발주

○ '24. 4. : 맨홀 평탄성 개선공사 계약 및 착공

○ '24. 12. 26. : 불량맨홀 정비공사 준공

5		행정사항

○ 맨홀 관리기관에 2024년 맨홀 관리계획 수립내용 통보

○ 점검계획이 수립된 맨홀 관리기관에 대해서는 조기 점검토록 독려

○ 한정된 예산으로 인해 미정비되는 불량맨홀은 교통사고 예방을 위해 맨홀 관리기관에 통보하여 정비 요청

○ 점검이 완료된 맨홀 관리기관은 점검결과를 도로관리시스템에 조기에 등재토록 하여 공유 관리 등

붙임  1. 2023년 맨홀 관리계획(관리기관 배부용) 1부.

2. 서울시 도로상 맨홀 정비 및 관리지침 1부.

3. 도로상 작업구 설치 및 관리지침 1부.  끝.