문서번호	도시철도설비부-1903
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
강창진		문학준	02/19
			성호준
협 조

- 별내선(8호선연장) 1-2구간 송변전공사 -

실정보고 검토보고

2024.  2.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 별내선(8호선연장) 1-2구간 송변전공사 -

실정보고 검토보고

우리 본부에서 시행하고 있는『별내선(8호선 연장) 1-2구간 송변전공사』와 관련하여 터널구간 케이블 직선접속개소 보강 및 횡단개소 설비 추가 설치에 대한 실정보고 검토 보고임

※ 관련문서: ´24.2.14. 별내선시감 제24-045호『직선접속개소 및 횡단개소 설비설치 실정보고 제출』

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1-2구간 송변전공사

□ 계 약 자 : (주)금강전설외 2개사

□ 계약금액 : (총차)5,487,332천원 / (3차)3,089,320천원

□ 공사기간 : (총차)´21.04.01. ~ ´24.03.30.

(3차)´23.04.01. ~ ´24.03.30.

□ 감 리 단 : 세종기술(주) 대표 송진호 외 4개사(체계공학 포함)

Ⅱ		실정보고

□ 터널구간 수전·연락송배전선로 직선접속 부위 열수축튜브 및 차화커버 설치

ㅇ 열수축튜브 추가 설치에 따른 신규 물량 증가

*********************************

**********************************************

ㅇ 차화커버 추가 설치에 따른 신규 물량 증가

*********************************

*******************************************

********************************************

□ 터널내 파스콘트러프 횡단개소에 삼각표시대 설치

ㅇ 삼각표시대 추가 설치에 따른 신규 물량 증가

**************************************

***************************************************

*********************************************

□ 물량변경내용

품명	규격	단위	당초 수량	변경 수량	증감량	비고
************
********************
*****	********	**	*	***	***********
*******	*******	**	*	**	***********
*******	*******	**	*	***	***********
*****	**************	**	*	**	***********
*****	********	**	*	**	************

□ 공사비 증감내용

구분	당초금액	변경금액	증감액	비고
*********	************	************	*
************	**************	**************	***************
*********	************	************	*
***	**************	**************	***************
****	**************	**************	***************
*******	************	************	*
**********	************	************	*
*****	**************	**************	***************

Ⅲ		검토의견

□ 감리단 검토의견

ㅇ 케이블 접속부위에 열수축튜브 및 차화커버 설치 : 적정

***************************************************************************************************

ㅇ 횡단개소 삼각표시대 설치 : 적정

**********************************************************************

□ 보고자 검토의견

ㅇ 케이블 접속부위에 열수축튜브 및 차화커버 설치 : 적정

******************************************************

ㅇ 횡단개소 삼각표시대 설치 : 적정

********************************************************

Ⅳ		행정사항

□ 실정보고 승인 통보(도시철도설비부 → 감리단)

*******************************************

붙임 1. 감리단 실정보고 및 검토의견서 각 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 케이블 ROUTE 평면도 1부.

4. 사전점검보완사항 조치계획서 1부.