문서번호	친환경건물과-2363
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		친환경건물정책팀장	친환경건물과장
김응균		이홍석	02/19
			이주영A
협조

「북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사」

공사 및 용역 준공기한 연장 조치계획

2023. 2.

기후환경본부

(친환경건물과)

북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

공사 및 용역 준공기한 연장 조치계획

북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사와 관련하여 공사 및 용역 준공기한 연장 조치계획에 대한 감리 실정보고서가 제출되어 이에 대한 조치계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

ㅇ 공사기간: '23. 7. 3. ~ '24. 2. 27.

ㅇ 공사금액: *********************************************

ㅇ 공사업체: ****************************************

ㅇ 감 리 사: **********************************

ㅇ 공 정 율: 85%(지열 시운전 및 건축 외장판넬 설치 작업 중)

□ 검토내용

ㅇ 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건 제8절(계약기간의 연장)

ㅇ 건축공사 및 건설폐기물처리용역 준공기한 연장 사유

- 지열공사가 현재 시운전 등 마무리 작업이 당초보다 다소 지연되어 이에 따른 지열공사장(주차장) 포장·복구 작업에 대한 공사기간 연장 필요

- 지열공사 관련하여 발생된 매립 혼합폐기물 처리 등 건축공사 공기연장에 따른 건설폐기물처리용역 연장 불가피

- 지하층 기전실 및 작업자 휴식공간 바닥 에폭시 도장, 각 창호 블라인드 설치, 2층 교육실 기계청소 등 북부기술교육원측 추가 요청사항 발생

- 건축공사 연장에 따른 건축감리용역 연장 필요

ㅇ 전기공사 준공기한 연장 사유

- 태양괄발전장치가 현재 공장제작 진행으로 태양광 설치후 케이블 접속공사 및 사용전 검사 입회 등으로 태양광 설치공사 완료시까지 전기공사 연장 필요

- 전기공사 연장 및 태양광 설치공사 완료시까지 전기감리용역 연장 필요

ㅇ 준공기한 연장 현황

**	***	********		**** ******	***
		***	***
*	****	********************	********************	*************
*	****	********************	********************	***********	*************
*	******	********************	********************	**********
*	******	********************	********************	**********
*	***** ****	********************	*********************	**********
*	****** ******	********************	********************	*********

□ 조치계획

ㅇ 위와 같이 준공기한을 연장하여 마무리 공사 시행에 만전을 기하고자 함

- 향후 증·감사유가 발생되는 계약건은 준공전 설계변경 및 정산처리

- 상기 계약건 외 공사, 용역, 관급자재는 당초 계약기간으로 준공처리

- **************************************

- **************

□ 행정사항

ㅇ 계약변경 내용(계약기간 연장)을 재무과에 계약의뢰 요청

붙임 감리 공사(용역)기간 연장 실정보고서 5부(건축, 전기). 끝.