문서번호	도로보수과-2103
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	서부도로사업소장
김한별	代정병구	유은중	02/20
			손경철
협 조

『스마트 도로결빙방지 시스템 및 전기시설 설치공사』

준공기한 연기 검토보고

2024. 2.

서부도로사업소

(도로보수과)

『스마트 도로결빙방지 시스템 및 전기시설 설치공사』

준공기한 연기 검토보고

우리 사업소에서 시행 중인 스마트 도로결빙방지시스템 및 전기시설 설치공사와 관련하여 동절기 도로굴착통제에 따른 준공(납품)기한 연기 실정보고가 접수되어 이를 검토 보고함.

□ 추진근거

○ 스마트 도로결빙방지 시스템 구매-서부의 납품기한 변경 관련 실정보고

- (주)태현이엔지-TH2024-0205-007(2024. 2. 5.)호

○ 스마트 도로결빙방지 시스템2개소 전기시설 설치공사 실정보고서(1회) 제출 건

- 동현전기건설(주)-DH 20*******01(2024. 2. 7.)호

□ 사업개요

사 업 명	스마트 도로결빙방지 시스템 구매-서부	스마트 도로결빙방지 시스템 2개소 전기시설 설치공사
사업기간	2023. 11. 29. ~ 2024. 2. 27.	2023. 12. 8. ~ 2024. 3. 6.
도 급 자	******	*******
계약금액	**************	*************

□ 준공(납품)기한 연기 검토

○ 연기사유 : *****************************************************************************************

- 스마트 도로결빙방지 시스템 구매-서부

******************************************************

*******************************************************

- 스마트 도로결빙방지 시스템 2개소 전기시설 설치공사

****************************************************

******************************************************

○ 준공기한 연기에 따른 귀책 소재 : ****

○ 실정보고 검토 : **

****************************************************************************************

□ 향후계획

○ ‘24. 2. : 준공기한 연장 의뢰 및 변경계약 시행

○ ‘24. 3. : 공사 착공

○ ‘24. 5. : 공사 준공

붙임  실정보고 공문 각 1부.  끝.