문서번호	재난관리과-1187
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
소방교	구조팀장	재난관리과장
최석영	전기옥	전결 02/20
		김용철

다목적 인명구조 훈련장 설계 계획

2024. 2.

광진소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

다목적 인명구조 훈련장 설계 계획

재난현장 인명피해 최소화 및 화재진압을 위한 출동대원의 현장

대응능력 향상을 위한 다목적 인명구조 훈련장 설계 계획임

Ⅰ		추 진 근 거

○「119구조·구급에 관한 법률」제25조(구조대원의 전문성 강화 등)

○  재난관리과-671(2024. 1. 29.)호「다목적 인명구조 훈련장 설치계획」

Ⅱ		추 진 목 적

○ 소방서 단위 다목적 인명구조 훈련장 조성으로 상시 소방전술교육훈련을 통한 재난현장 대응역량 강화 및 구조서비스 품질 향상

○ 실제 상황을 가장한 유형별 교육훈련으로 위기상황 대처능력 제고

○ 계획에 의거 설계수준 향상 및 효율적인 추진

○ 용역 발주시 명확한 과업 범위를 제시하여 공사중 발생 리스크의 최소화

Ⅲ		설 계 개 요

○ 사 업 명: 광진소방서 다목적 인명구조 훈련장 설계

○ 사업내용: 지상 3층 이하 다목적 인명구조 훈련장

○ 설치면적: 연면적 185㎡내외

(건폐율 및 연면적은 설계 및 구청 협의에 따라 변경 될수 있음)

○ 설치장소: 광진구 광나루로 480(광진소방서 후정 주유기와 수관건조대 위치)

(첨부3 도면 참조)

○ 사업기간: 2024. 1월 ~ 4월 / 약 4개월

○ ********************************

*******

***************************************************************

○ 관련사진(훈련장 설치 예정지)

Ⅳ		설계 세부계획

□ 설계 용역 발주

○ 기    간: 착수일로부터 60일 이내

○ 소요예산: ************************************

○ 자격기준: 건축사 면허 소지자로 서울특별시에 건축사사무소를 개업한 자

○ 대상업체: 추후 선정후 전자수의계약 예정

○ 예산과목: 소방특별회계 / 구조장비 보강 및 유지관리 / 시설비

□ 주요 과업내용

○ 훈련대원들의 의견을 다목적 훈련장 내부 시설 설계 적극 반영

○ 전문적인 설계 업체를 통해 인명구조 훈련장 설계

○ 설계용역 착수기간 중 사업부서 및 출동부서(TF팀)과 설계 내용에   대한 세부회의 개최

○ 공사 발주를 위한 설계도서, 시방서, 설계내역서 등 작성 및 납품

○ 관할 구청 건축 허가 및 철거신고등 대관업무

□ 기술용역 필요사유

○ 자체설계 시행인력 미확보로 인하여 전문업체 설계 필요

○ 현장 출동부서의 의견 반영 가능한 전문 설계 필요

○ 인명구조 훈련장으로 전문기술을 요하는 설계 필요

○ 건축공사시 공종별 산출물량의 누락 및 과다 산출을 검토할 자체 기술 인력 없음

Ⅴ		설계 추진일정

○ 2024. 01. 15. ~ 02.29: 발주계획 및 설계계획 수립

○ 2024. 03. 01. ~ 03.31: 설계 및 설계 완료

○ 2024. 04. 01. ~ 04.30: 광진구청 건축 인허가 및 심의완료

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 광진소방서 평면도 및 설치 부지 도면 1부.

4. 다목적 인명구조 훈련장 설치계획 1부.  끝.