아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 구조버스(중형, 2대) 납품연장 심의회 결과보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-3916(2024.2.19.)호 "2023년 구조버스(중형, 2대) 제조납품 기한 연장 심의위원회 개최 계획"

나. *********6-01호(2024.02.6.)호 “2023년 구조버스(중형, 2대) 제조구매 계약 변경 요청건”

다. 지방계약법 제31조(부정당업자의 입찰참가 자격 제한) / 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약 일반조건 제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지

2. 구조버스 2대에 대한 납품연기 요청에 대한 적정성 여부 심의회 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 구조버스 2대 계약 개요

1) 건    명 : 2023년 구조버스(중형, 2대) 제조, 구매

2) 계약기간 및 납품기한 연장 요청내역

구분	최초 계약	1차 변경 후	2차 변경 요청
****	*********** ***************	*********** **********************	*********** ********* ************
	*********** *************	************ ************	*********** ************
	*********************************** *****************

***************

*********************************************************

나. 심의회 결과

1) 일  시 : 2024.2.19.(월) 14:00 ~ 15:00

2) 장  소 : 안전지원과장실

3) 목  적 : 구조버스 계약연장 요청에 대한 적정성 검토

4) 위  원 : 5명(간사 : 장비관리팀장 / 서기 : 차량담당)

연번	구 분	소 속	직 위	성 명	비 고
*	***	*****	******	*****
*	****	*****	****	*****
*	****	*****	******	*****
*	****	*****	******	*****
*	****	*****	******	*****
*	****	*****	*****	*****

********

********************************************************

*********

*******************************

**************************************

붙임 1. 구조버스 계약연장 연기의뢰서 및 연장서류 각 1부.

2. 구조버스 계약연장 검토내역 및 관련법령 1부.

3. 계약연장 심의의결서 1부.  끝.

소방위	김성환		장비관리팀장	황영호		안전지원과장	02/20
윤득수
협조자	소방경	안우석
시행	안전지원과-4027	(	2024. 2. 20.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방재난본부 안전지원과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1612	/전송	02-3706-1619	/	ksh0465@seoul.go.kr	/	부분공개(5)