아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부도로사업소
수신	서울아리수본부장(시설건설과장)
(경유)
제목	긴급 상수도공사 관련 도로복구 변경요청 회신

1. 서울아리수본부 시설건설과-1584호(2024.02.16.)와 관련입니다.

2. 위와 관련 긴급 상수도공사 도로복구 변경요청 건에 대해 공사의 시급성을 감안하여 다음과 같이 조건부 승인하오니 도로관리청에서 제시한 조건 및 관련기준(시방)을 철저히 준수하여 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 건설사업관리단으로 작업일보 제출 후 공사 시행

나. 도로 임시복구는 포장두께 10cm이상 유지 및 포트홀, 침하 등이 발생치 않도록 1일 1회이상 점검 및 보수 시행하고, 관리청복구 업체에 포장층(두께 80cm) 철거하여 인수인계 조치

다. 물다짐 철저로 굴착구간 침하 방지조치 시행.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	박해웅		도로보수과장	02/20
신준식
협조자	실무관	김경식
시행	도로보수과-1900	(	2024. 2. 20.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33, (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0340	/전송	02-2040-0307	/	glassky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)