문서번호	시설보수과-1692
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영현		이화신	02/21
			김만호
협조	도로보수과장		김순수
	기전과장		이상연

2024년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검‧정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

북부도로사업소

- 2024년 수해안전대책 관련 -

수방시설 및 수해취약지역 일제점검‧정비 계획

2024년도 우기대비 수방시설 및 수해취약지역(지하차도, 옹벽 등) 일제점검 시행 및 지적사항에 대하여 보완·정비하여 수해대비에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 2024년 수해안전대책 관련 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비 시행요청(치수안전과-2429호, 2024.02.08)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상

○ 수방시설

- 지하차도 배수펌프(7개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2‧3, 담터

※ 자연배수 제외 : 솔샘지하차도, 정릉지하차도, 인수봉로지하차도

○ 수해취약지역

- 도로시설물

‣ 지하차도(7개소) : 수방시설과 동일

- 도로사면

‣ 옹벽(11개소) : 방학동 520-1 등 11개소 (※ 붙임 점검대상 현황 참조)

□ 점검기간

○ 1차점검 및 정비

- 점검 책임자 : 시설물 담당 부서장

- 점검 기간 : 2024. 2. 26. ~ 2024. 3. 22.

‣ 시설물 담당자 및 외부전문가 합동점검

- 지적사항 정비 : 2024. 3. 4. ~ 2024. 3. 26.

○ 2차점검 및 정비

- 점검 책임자 : 도로사업소장

- 점검 기간 : 2024. 4. 01. ~ 2024. 4. 19.

‣ 1차 점검 미조치 사항 위주 집중 점검

- 지적사항 정비완료 : 2024. 4. 8. ~ 2024. 4. 26.

□ 점검방법

○ 해빙기대비 점검과 병행하여 외부전문가, 공무원 합동점검 (2~3인/1조)

※ 수방시설 : 기전과 자체점검 방침 후 점검시행 예정

○ 중점 점검 사항

- 지하차도 : 배수펌프 시험가동, 집수정 토사 퇴적 등 점검

- 옹    벽 : 옹벽상태 등 점검

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 직영반(공무직) 즉시 조치

○ 보수 규모가 크며 긴급을 요하는 사항은 담당부서에서 별도 계획수립 후, 연간단가업체 등 활용하여 우기전까지 조치 완료

Ⅲ		행 정 사 항

○ 협조사항 : 도로보수과, 기전과

- 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과(1차) 시설보수과 제출(2024.3.27.한)

- 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과(2차) 시설보수과 제출(2024.4.30.한)

○ 점검 계획 및 1,2차 지적사항 및 조치결과를 치수안전과 제출

-  수방시설 및 수해취약지역 점검계획 치수안전과 제출(2024.2.23.)

-  1차 지적사항 및 조치결과 치수안전과 제출(2024.3.29.)

-  2차 지적사항 및 조치결과 치수안전과 제출(2024.5.03.)

붙임 : 1. 점검대상 현황 1부.

2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과보고 양식 1부. 끝.