문서번호	기전과-2319
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
곽영두		최경주	02/21
			손경철
협 조
	주무관			이동열
	주무관			권의현

「월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치사업」 추진계획 변경 보고

「월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치사업」

추진계획 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

서부도로사업소

(기  전  과)

「월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치사업」

추진계획 변경 보고

서부도로사업소장 : 손경철☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 곽영두☎8328

증산지하차도 1개소는 재난관리기금 추가 심의가 필요하여 이를 보류하고,

월드컵, 서빙고지하차도를 대상으로 하는 사업 계획을 아래와 같이 보고함

1		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 지하차도 풍수해 재난대응 강화대책(행정2부시장-198, 23.8.3.)

ㅇ '24년도 지하차도 침수대응시설 설치계획(시 도로시설과-1285, 24.1.23.)

ㅇ (당초 방침) 월드컵지하차도 2개소 진입차단시설 설치사업 추진계획

(기전과-1715, 24.2.5.)

2		추진계획 변경 개요

□ 설치계획 변경개요

구분	도로형태	연장 / 박스 길이	설치 계획
월드컵지하차도	4차선 왕복	250m / 60m	(신설) 문주형 차단막 2 (변경 없음)
서빙고지하차도	2차선 왕복	340m / 127m	(신설) 편주형 차단막 2 (변경 없음)
증산지하차도	6차선 왕복	575m / 221m	(신설) 편주형 차단막 1 → 0 (추진 보류) (기설치) 편주형 2

□ 변경사유

ㅇ 국비 특교세 지원 사업으로 월드컵, 서빙고 지하차도에 한해 예산 배정되어 행안부 승인 절차 별도 필요하여, 증산지하차도 P턴 합류구간 1개소는 금번 발주 보류하고 추후 승인 거쳐 다시 발주하고,

ㅇ 월드컵 및 서빙고지하차도 차단막 진입차단시설 설치사업은 당초 계획대로 신속히 발주

3		사업 개요

□ 사 업 명 : 월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 설치사업

□ 사업대상 : 월드컵지하차도(문주형 2), 서빙고지하차도(편주형 2)

□ 사업기간 : '24. 2. ~ 5.

□ 사업내역 : 총 사업비 750백만원

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	계약방법
월드컵지하차도 외 2개소 진입차단시설 설치공사	진입차단시설 제작 및 설치, 부대장비 함체 설치, 기초공사	450	제한경쟁
지하차도 진입차단시설 구조안전성 검토 용역	진입차단시설에 대한 구조계산 및 안전성 검토	10	제한경쟁
지하차도 진입차단시설 UPS 구매설치	비상전원용 UPS 4대 설치 (월드컵2, 서빙고 2)	25	조달구매 (제3자단가)
지하차도 진입차단시설 문자전광판 구매설치	문자전광판 4대 설치 (월드컵2, 서빙고 2)	220	조달구매 (총액수의계약)
지하차도 진입차단시설 CCTV 구매설치	CCTV 4대, 네트워크장치 등 부대장비 설치	45	조달구매 (제3자단가)

□ 예산사용 계획

ㅇ 재난관리기금으로 1,050백만원 재배정 예정이며, 그중 750백만원
사용하여 사업 추진

ㅇ 예산과목 : 재난안전정책과, 재해 및 재난 예방, 재난예방 및 복구,
재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비

4		사업 세부계획

ㅇ 월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 설치공사

- 사업내용 : 진입차단시설 제작 및 설치, 부대장비 함체 설치, 기초공사 등
- 사 업 비 : 450백만원
- 계약방법 : 제한경쟁(지역제한)
- 입찰자격 : 서울 소재, (전문) 금속구조물 또는 (종합) 토목공사업
- 사전절차 : 계약심사 미대상 (추정금액 5억원 미만 일반공사)

※ 조경,전기,통신,설비 분야 전문공사 아님

ㅇ 월드컵지하차도 외 1개소 진입차단시설 구조안전성 검토용역

- 사업내용 : 진입차단시설 구조물에 대한 구조계산 및 안전성 검토

- 사 업 비 : 10백만원

- 계약방법 : 수의계약

- 계약근거 : 지방계약법 시행령 25조1항5호나목 - 추정금액 2천만원 이하 용역

- 계약업체 : 제일구조안전기술 (대표 박준형)

ㅇ 진입차단시설 무정전전원장치(UPS) 구매설치

- 사업내용 : 정전시 비상전원 공급장치(UPS) 4개 설치
- 사 업 비 : 25백만원
- 계약방법 : 조달구매(제3자단가)
- 구매제품 : UPS 10kVA x 4대

ㅇ 문자전광판 구매설치

- 사업내용 : 지하차도 및 진입차단시설 상태 알림 문자전광판 4대 설치

- 사 업 비 : 220백만원

- 계약방법 : 조달구매(총액수의계약)

- 구매제품 : 진입차단시설 부착 문자전광판 x 4대(2종)

**********************************

- 사전절차 : 특정기술심사 필요 - 5천만원 이상 물품

※ 조달구매로서 계약심사 및 일상감사는 요구되지 않음

ㅇ CCTV 구매설치

- 설치목적 : 지하차도 진입차단시설 작동 여부 및 지하차도 상태 감시

- 구매제품 : CCTV, 네트워크스위치, 암대, 서지흡수기 등 4조

- 사 업 비 : 45백만원

- 계약방법 : 조달구매(제3자단가)

5		향후계획

ㅇ '24. 2. 22. : 공사 발주

ㅇ '24. 2. 28. : 문자전광판(물품) 특정기술심사위원회 개최

ㅇ '24. 3. : 공사 착공, 물품 발주 및 착공

ㅇ '24. 5. : 준공 (수방기간 전 준공 도모)

붙임 1. 당초 방침 1부.
2. '24 지하차도 진입차단시설 사업계획(서울시) 1부.  끝