문서번호	총무과-2191
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		총무과장		서울물연구원장
임승용		양연화		02/20
				윤희천
협 조

설 계 용 역 계 획 보고

(별관 분전반(속판) 및 간선 교체 공사)

2024.   2.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

설 계 용 역 계 획 보고

(별관 분전반(속판) 및 간선 교체 공사)

총무과장 : 양연화☎3146-1720                 담당 :임승용☎1712

2024년 「청사 별관 분전반(속판)외 간선 교체 공사」의 원할한 사업 추진을 위한 설계용역 추진계획을 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 전력기술관리법 제11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등) 제1항

- 전력시설의 설계도서는「국가기술자격법」에 따른 전기분야 기술사가
작성하여야 한다.

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 청사 별관 분전반(속판)외 간선 교체 공사

ㅇ 사업위치 : 광진구 천호대로 716-10(별관)

ㅇ 사업일정 : 2024. 3 ~ 6

ㅇ 사업규모 : 별관 전기 설비 교체 공사 1식

ㅇ 총사업비 : 금300,000천원

- 실시설계용역비 : 약13,557천원(금일천삼백오십오만칠천원)

ㅇ 예산과목 : 행정장비확충 및 환경개선, 건물, 시설비 및 부대비, 기계

장치, 시설비

□ 발주계획

ㅇ 용 역 명 : 청사 별관 분전반(속판)외 간선 교체 공사 설계용역

ㅇ 용역기간 : 착수일로부터 25일
ㅇ 소요예산 : 금13,557,000원(금일천삼백오십오만칠천원)

- 기술용역타당성 심사

※ 추정가격 15백만원 이하 기술용역 : 자체 심사

ㅇ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목(추정가격 2천만원 이하 용역)

ㅇ 계약상대자 : 효성전기TCS(주)

- 업체주소 : 인천 남동구 성말로 53번길 27-17

□ 향후계획

ㅇ `24. 2월말 : 기술용역타당성 심사의뢰(본청 기술심사담당관)

ㅇ `24. 3월초 : 설계용역 계약

ㅇ `24. 3월말 : 결과품 수령

ㅇ `24. 4월초 : 공사 계약 심사의뢰

ㅇ `24. 4월중 : 본 공사 발주 및 사업착수 등

붙임  1. 기술용역타당성심사요청서 1부.

2. 과업지시서 1부.

3. 설계용역비 산출내역서 1부.  끝.