문서번호	방재시설부-2272
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	02/21
			이동훈
협 조

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

추가 사토장(5차) 선정 검토 보고

2024. 2.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

추가 사토장(5차) 선정 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사」와 관련하여 사용중인 연천군 장남면 반정리 사토물량이 완료되어 추가 사토장 위치를 검토하고 그 결과를 보고드림

※ 관련문서 : 이산2023-국회대로(건)-300호 (2023. 11. 7)

1		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 화곡 지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 도로연장 1.22km, 왕복4차로 (지하차도 신설 995m)

ㅇ 공사기간 : 2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31. (착공일로부터 77개월)

ㅇ 도 급 비 : 111,609백만원

ㅇ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 1개사, 건설사업관리단 : ㈜이산 외 3개사

2		추진현황

ㅇ '19.01.28. ~ '23.11.07. : 사토장 사용승인 (도기본→건설사업관리단)

- '19.01.28. : 송도 11-2공구 사토장 사용승인 (1차), 매립공사 준공('23.04.10)

- '23.09.08. : 연천군 장남면 고랑포리 및 파주시 군내면 백연리 사용승인 (2차)

- '23.09.15. : 연천군 장남면 반정리 43, 47 사용승인 (3차)

- '23.11.07. : 연천군 장남면 반정리 24, 24-1 사용승인 (4차)

ㅇ '24.02.16. : 추가 사토장(5차) 선정에 따른 사용승인 요청 (건설사업관리단→도기본)

3		실정보고 검토내용

□ 추가 사토장 선정사유

ㅇ 연천군 장남면 반정리 24(일부), 24-1 민간사토장의 사토물량이 완료되어 토사반입을 위한 추가 사토장이 필요하게 되었음.

※ 중첩구간 U1~5 터파기 1,500㎥, 잔여구간 바이패스갱 가시설 터파기 10,700㎥ 등 추가 사토물량을 고려한 사토량 결정

□ 추가 사토장 선정검토

ㅇ 1차 검토 : 토석정보공유시스템(Tocycle) 우선조사

조사조건	검색	결과	비고
· 순성토 필요현장 · 직선거리 50km 이내 · 반입계획량 5,000㎥이하 제외	64개 사업장	당 현장 반입토 제반조건을 충족하는 사토장 없음	민간 사토장 조사 필요

ㅇ 2차 검토 : 인근현장(도기본 발주현장) 사토장 조사 → 대부분 사토 미발생현장

ㅇ 3차 검토 : 민간 및 추가 가능 사토장 조사 → 선정

구분	위치	사토량 (㎥)	운반거리 (km)	운영시기	비고
1	연천군 장남면 반정리 24	2,200 (추가요청)	73.0	'24년 4월까지	-
2	연천군 장남면 고량포리 221, 252,253,254,263,264,265,266,267,268	10,000	73.0	'24년 5월까지
3	인천시 송도 11-3공구 공유수면 매립지	-	-	'24년 하반기 (예정)	연약토 반입가능 여부 확인 필요

ㅇ 사토장 운용 계획

- 송도 11-3공구 공유수면 매립지 개설 시 ('24년 하반기 예정) 우선적 사용

- 매립지 선정전까지 원활한 공사추진을 위해 민간 사토장 지속적 조사·선정 예정

□ 물량 증·감 현황

구분		단위	당초	변경	증·감	비고
당초	사토운반(L=35.6km)	㎥	12,200	-	12,200	· 기존단가 적용
변경 (금회)	사토운반(L=73.0km)	㎥	-	12,200	12,000	· 적재,정지 기존단가 적용 · 운반 5차 설계변경 도급단가 적용
계			12,200	12,200	-

※ 적재 및 정지는 기존단가(ES포함)를 적용하고, 운반의 경우 5차 설계변경 도급단가(토피스 교통량을 반영한 표준시장단가)를 적용함.

□ 공사비 증·감 현황

(단위 :  원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증·감
1. 사토운반(L=35.6km)	173,752,400	-	173,752,400
2. 사토운반(L=73.0km)	-	424,913,800	424,913,800
직접공사비	173,752,400	424,913,800	251,161,400
간접비	77,127,600	96,866,200	19,738,600
공급가액	250,880,000	521,780,000	270,900,000
부가가치세	25,088,000	52,178,000	27,090,000
도급공사비	275,968,000	573,958,000	297,990,000

4		조치계획

ㅇ 향후  송도 11-3공구 공유수면 매립지 사토반입이 확정되면('24년 하반기 예정) 우선적으로 송도 사토장을 사용예정이며 송도 사토장이 선정전까지는 원활한 공사추진을 위해 민간 사토장을 지속적으로 조사·선정하여 운영할 계획임.

ㅇ 추가 사토장 비용은 도급비에 포함하되 적재 및 정지비는 기존단가를 적용하고, 운반비용은 5차 설계변경 도급단가(표준시장단가 100%)를 적용하여 추후 설계변경시 정산 반영코자 함.

ㅇ 우리 현장은 사토반출 시 GPS를 통한 운행경로 및 상·하차지를 자동운행 관리하는 '스마트 송장' 시스템을 시행하는 바, 사토의 임의반출 및 불법 매립이 발생하지 않도록 사토 처리업무(기록, 집계, 운행경로)에 철저를 기할 것임.

붙임 :  감리 실정보고서 1부.  끝.