문서번호	치수과-1375
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
이민호		김창신	02/21
			이유국
협 조

2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

설계변경(최종) 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2.

미 래 한 강 본 부

(시설부 치수과)

2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

설계변경(최종) 시행 보고

시설부장 :이유국☎3780-0830 치수과장 : 김창신☎0682 담당 : 이민호☎0695

『2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)』의 설계변경(최종)   시행 계획에 대하여 보고 드림.

□ 사 업 개 요

ㅇ 공  사  명 : 2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 위      치 : 한강공원 내(나들목, 제방, 수중보 등)

ㅇ 사업기간 : 2023. 03. 07. ~ 2024. 02. 28.

ㅇ *********************

ㅇ ***************************

ㅇ 공사개요 : 나들목 보수, 한강제방 정비 및 뻘청소 등

□ 설계변경 개요

ㅇ 관련근거

- 작업지시(10차) 검토보고[치수과-756호(2024.1.29.)]

ㅇ 설계변경 사유

- 작업지시에 따른 공종별 물량 증·감 및 신규공종 반영

- 국민연금보험 등 보험료 실 납입금액 정산

ㅇ 보험료 정산내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변경	증·감	비 고
*******	**********	**********	**************
*******	**********	**********	**************
*********	*********	*********	**************
*******	**********	**********	**************

ㅇ 직접공사비 변경

(단위: 원)

공 종	수량	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	증·감
******** *****	*	*	***********	***********	**********	***********	**************
			***********	***********	**********	***********
*****	*	*	*******	*********	*********	*********	*************
			*******	*********	*********	*********
******	*	*	**********	**********	**********	***********	*************
			**********	**********	**********	***********
*******	*	*	**********			**********	*************
			**********			**********
******* *****	*	*	***********	************	*********	***********	*
			***********	************	*********	***********
******	*	*	**********	***********	***********	***********	*
			**********	***********	***********	***********

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위: 원)

구 분	당 초	변경	증·감	비 고
****	*************	*************	***************
*****	*************	*************	***************
*****	**********	**********	*
*****	**********	**********	***************

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 설계변경을 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

ㅇ 변경계약 시행 요청(치수과 → 총무과)

- ********************************************

► 한강공원관리및운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비및부대비, 시설비(감 4,720천원)

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.