문서번호	정수시설과-576
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		代손영일	02/21
			代정종철
협 조
	행정관리과장			정종철

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

2024년 강북아리수정수센터

전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행계획

2024. 2.

강북아리수정수센터

( 정수시설과)

2024년 강북아리수정수센터

전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 연간단가 공사를 시행하여 정수처리시설 관리 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				관 련 근 거

□ 『24년 상수도 기전설비 유지보수(연간단가)』 설계기준 개정.보완 계획(기전설비과-1207, 2024.02.07.)

○ 전기설비 유지보수공사를 연간단가 계약으로 발주, 노후 설비를 적기에 정비하고 고장 발생 시 긴급`복구하여 전기설비의 안정적 운영 및 유지관리의 효율성 제고

○ 본부에서 정한 설계기준 적용으로 공사비 단가산출의 적정화 및 통일된 원가계산 구성으로 예산 절감

Ⅲ				사 업 개 요

□ 사 업 명 : 2024년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

□ 사업기간 : 계약일 ~ 2025. 03. 31.

□ 적용대상 : 정수센터 노후 및 개선대상 전기시설물(소규모 신설 포함)

□ 추진방법 : 작업 요청서에 의거 유지보수공사를 시행하며, 계약상대자가 기성 청구 시 작업완료보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급

□ 발주내역서 산정

○ 정수센터 전기시설물 노후 및 고장발생 보수공사 1식

※ 설계내역서는 예상물량으로 산정하여 추가물량 및 신규공종 발생 시 계약금액 내에서 선 작업지시 후 변경계약

Ⅳ				발 주 개 요

□ 소요예산 : 140,000천원(총차)

○ 1차(120,000천원) : 2024년분(계약일 ~ '24. 12. 31.)

○ 2차(20,000천원)  : 2025년분('25. 01. 01. ~ '25. 03. 31.)

※ 발주기준금액은 106,219천원이나(최근 3개년 준공액 평균의 1.2배)

옥내외 조명 교체, 노후 분전반 교체 작업 등으로 예산 증액 반영

□ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비

□ 계약방법 : 전자공개 수의계약, 장기계속공사

□ 입찰참가자격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

□ 계약기간 : 계약일로부터 2025. 03. 31.까지

Ⅴ				향후 추진계획

□ '24. 2. : 본부 안전조사과 계약심사 의뢰

□ '24. 3. : 공사 발주 및 계약

□ '24. 4. : 착공(1차)

□ '25. 1. : 착공(2차)

□ '25. 3. : 공사준공

붙임 1. 설계내역서(2024) 1부.

2. 본부 설계기준 1부.  끝.