문서번호	물재생계획과-3077
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수악취저감팀장	물재생계획과장
연승재		안은란	02/22
			신현석
협조

자연유하 정화조 악취저감시설

설치 지원계획 변경 보고

2024. 2.

물순환안전국

(물재생계획과)

자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원계획 변경 보고

물재생계획과장 : 신현석☎2133-3780 하수악취저감팀장 : 안은란☎3815 담당 : 연승재☎3819

자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원사업과 관련 자치구에서 사업계획변경을 요청하여 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 서울특별시 하수도 사용 조례 제23조제5항(사용료 등)

ㅇ 정화조(자연유하) 악취저감대책 추진계획

(행정2부시장 방침 제157호-2023.6.26.)

□ 사업개요

ㅇ 사업대상: 자연유하 정화조(1,000인조 이상) 24개소(74대)

ㅇ 사업내용: 공기공급장치(악취저감시설) 설치 시 보조금 지원

ㅇ 사업기간: 2024. 2.~12.

ㅇ 사업예산: 98백만원

□ 변경내용

ㅇ 동대문구, 강북구 시 보조금 지원액 감액

(단위: 천원)

구분	시비 지원액		비고
	변경전	변경후
동대문구	*************	********	사업취소
강북구	************	********

ㅇ 변경사유

- 강북구: 건물 소유주의 악취저감시설 설치 부동의

- 동대문구: 보조금 지원을 위한 자치구 조례 개정 미완료

□ 검토의견

ㅇ *********************************** ******************************* **********************************

□ 향후계획

ㅇ 추가 사업대상지 검토 및 변경된 계획에 따라 예산 교부

붙임  자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원 계획(변경) 1부.  끝.